АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-7662/22

26 декабря 2022 г.

г. Севастополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 19.12.2022 

Решение в полном объеме изготовлено 26.12.2022 

Арбитражный суд города Севастополя в составе  председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

государственного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования города Севастополя "Севастопольский центр  туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи" ОГРН:  

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-ВИОН 21"  ОГРН: 

<

***>,  

об обязании передать имущество, в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования города Севастополя "Севастопольский  центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи"  (далее – истец, учреждение) обратился в Арбитражный суд города  Код доступа к материалам дела:  

 

Севастополя с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ- ВИОН 21" (далее – ответчик, общество), в котором просило:  

- обязать ответчика передать здание учреждения, переданное по акту  от 07.10.2020, расположенное по адресу: 

<

...>, а также материальные ценности, переданные по акту от 19.10.2020  года и иные документы, связанные с капитальным ремонтом этого здания,  истцу;  

- обязать ответчика восстановить систему отопления здания  учреждения, переданное по акту от 07.10.2020 года, расположенное по  адресу: 

<

...>.  

Определением от 13.12.2022 к рассмотрению принят уточненный иск  государственного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования города Севастополя "Севастопольский  центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи" к  обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-ВИОН 21", в котором  истец просит:  

обязать общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН 21»  передать истцу здание учреждения, переданное по акту от 07.10.2020 года,  расположенное по адресу: 

<

...>, проектную и  рабочую документацию по капитальному ремонту здания, а также  материальные ценности, переданные по акту от 19.10.2020 года, а именно,  

 № п/п 

Наименование и характеристика (с указанием 

марки, модели...)  

Ед.  изм  

Кол-во по учету 

Кол-во передано 

Излишки/  недостача  

1 

Видеонаблюдение. Видеосервер Macroscop 32М2 

шт.  

1 

 

2 

Видеонаблюдение. Коммутатор 24 порта HP  

шт.  

1 

 

3 

Видеонаблюдение. Компьютер 2  T6HDD 4F6RAM+MON24+nO  

шт.  

1 

 

4 

Видеонаблюдение. ИБП стоечный Racknount  

шт.  

1 

 

5 

Видеонаблюдение. ИБП стоечный Racknount  

шт.  

1 

 

6 

Видеонаблюдение. Шкаф напольный 19 дюймов  

шт.  

1 

 

7 

Видеонаблюдение. Видеокамера внешняя DN- IPC-HDRW2300  

шт.  

11 

 

8 

Видеонаблюдение. Жесткий диск HDD4T6  SATA II Seaqaie  

шт.  

3 

 

9 

Видеонаблюдение. Видеокамера внутренняя  IPC-HDBW2300  

шт.  

5 

 

10 

Видеонаблюдение. Карта памяти ' Trancsend  

шт.  

16 

 

11 

Пожарная сигнализация. Блок управления на 32  индикатора  

шт.  

4 

 

12 

Пожарная сигнализация. Пульт управления  сегментом ПС-И  

шт.  

1 

 

13 

Пожарная сигнализация. Маршрутизатор РРОП-М2 

шт.  

13 

 

14 

Пожарная сигнализация. Контролер  радикальных устройств РРОПИ  

шт.  

4 

 

15 

Пожарная сигнализация. Сервер доступа WEB-И 

шт.  

1 

 

16 

Пожарная сигнализация. Световой оповещатель  радиокальный с надписью "ВЫХОД"  

шт.  

31 

 

17 

Пожарная сигнализация. Оповещатель звуковой  ОРФЕЙ-РИСП2  

шт.  

154 

 

18 

Пожарная сигнализация. Блок бесперебойного  питания БП-12/0,5  

шт.  

13 

 

19 

Пожарная сигнализация. Блок бесперебойного  питания БП-12/2А  

шт.  

5 

 

20 

Пожарная сигнализация. 

Аккумуляторная батарея 17 Ач 12В  DTM1217  

шт.  

5 

 

21 

Пожарная сигнализация. Блок преобразования  интерфейсов БПИ  

шт.  

1 

 

22 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  дымовой оптикоэлектронный АВРОР А-ДР  

шт.  

158 

 

23 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  радиокальный тепловой АВРОРА-ДР  

шт.  

4 

 

24 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  ручной радиокальный ИПР- Р  

шт.  

30  А  

 

25 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  дымовой оптикоэлектронный АВРОР А-ДР  

шт.  

11 

 

26 

Пожарная сигнализация. Объектовая станция  РСПИ Стрелец-Мониторинг  

шт.  

1 

 

27 

Пожарная сигнализация. Антенна Anli A-300MU-N 

шт.  

1 

 

28 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  ручной радиокальный ИПР- Р  

шт.  

1 

 

29 

Тревожная кнопка 

шт. 

1 

 

Ответчик отзыв на иск не представил, иск не оспорил, ввиду чего  

ответчик несет риск наступления последствий совершения или несовершения  ими процессуальных действий в порядке ч. 2 ст. 9 АПК РФ.  

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в  совокупности по правилам статей 65, 70, 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Суд, изучив материалы дела и оценив представленные доказательства,  по существу заявленных требований приходит к следующему.  

Как видно из материалов дела, На основании протокола подведения  итогов электронного аукциона от 16.09.2020 № 0174200002020000146-3  (извещение № 0174200002020000146) ГБОУ ДО «СЦТКСЭ» (заказчик) и  ООО «СМУ-ВИОН 21» (исполнитель) заключили контракт от 02.10.2020 №  1-ЭА на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания  Государственного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования города Севастополя «Севастопольский центр  туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» по адресу: 

<

...>.  

Согласно пункту 2.1 контракта срок выполнения работ: с момента  заключения контракта до 30 ноября 2020 года (включительно).  

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена определена по итогам  проведения электронного аукциона и составляет 44 067 713,35 руб.  

По акту передачи объекта к производству работ по капитальному  ремонту от 07.10.2020 подрядчику передано здание учреждения для  производства работ по адресу 

<

...>.  

По акту приема передачи от 19.10.2020 № 1 подрядчику переданы  материальные ценности, находящиеся в здании (видеонаблюдение и  пожарная сигнализация).  

 

В процессе исполнения контракта демонтирована система отопления  здания, после одностороннего отказа от договора, истцом были направлено  ответчику требование о восстановлении системы, в связи с подготовкой  отопительного сезона и опрессовкой оборудования.  

Из искового заявления следует, что по состоянию на 08.09.2022  обязательства по контракту генподрядчиком не исполнены, как следствие  итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.  

Учитывая, что работы по контракту в установленный срок  подрядчиком не выполнены, 22.03.2022 учреждением принято решение об  одностороннем отказе от исполнения контракта от 02.10.2020 № 1-ЭА.  

города Севастополя от 07 июня 2022 года по делу № А84-2425/2022  Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН 21», ОГРН  

<

***> к Государственному бюджетному образовательному  учреждению дополнительного образования города Севастополя  «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся  молодежи», ОГРН 

<

***>, о признании незаконным решения об  одностороннем отказе от исполнения контракта.  

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 07.06.2022 в  рамках дела № А84-2425/2022 в удовлетворении требования ООО «СМУ- ВИОН 21» о признании незаконным решения ГБОУ ДО «СЦТКСЭ» об  одностороннем отказе от исполнения контракта от 02.10.2020 № 1-ЭА,  отказано.  

Письмом от 09.06.2022 № 279 истец обратился к подрядчику с  требованием о возврате имущества переданного по акту от 07.10.2020 года,  расположенного по адресу: 

<

...>, проектной и  рабочей документации по капитальному ремонту здания, а также  материальных ценностей, переданных по акту от 19.10.2020.  

Требование оставлено без ответа. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения  учреждения с иском в арбитражный суд.  

 

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в  соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, заслушав доводы истца и  возражения ответчика, суд приходит к следующим выводам.  

Контракт от 02.10.2020 № 1-ЭА по своей природе является договором  строительного подряда, следовательно, правоотношения сторон в  рассматриваемом случае регулируются положениями параграфов 1, 3 главы  37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также  положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

Как установлено судом, решением Арбитражного суда города  Севастополя от 07.06.2022 в рамках дела № А84-2425/2022 признано  правомерным решение ГБОУ ДО «СЦТКСЭ» об одностороннем отказе от  исполнения контракта от 02.10.2020 № 1-ЭА.  

Вместе с тем, имущество, переданное по спорному контракту после его  расторжения истцу не возвращено.  

В силу статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации  собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного  владения.  

В пункте 32 Постановления от 29.04.2010 № 10/22 разъяснено, что  собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно  фактически находится в незаконном владении.  

Виндикационный иск представляет собой требование не владеющего  вещью собственника к владеющему вещью лицу, не являющемуся  собственником. Цель предъявления такого иска - возврат конкретной вещи во  владение лицу, доказавшему свои права на истребуемое имущество.  

Объектом виндикации во всех случаях может быть только  индивидуально-определенная вещь, существующая в натуре.  

 

Гражданские права и обязанности возникают, кроме прочего, из  действий граждан и юридических лиц, которые (действия) хотя и не  предусмотрены законом или правовыми актами, но в силу общих начал и  смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и  обязанности, в том числе и вследствие неосновательного обогащения (статья  8 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми  актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет  другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное  или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса  Российской Федерации ("Обязательства вследствие неосновательного  обогащения") подлежат применению также к требованиям об истребовании  имущества собственником из чужого незаконного владения (пункт 2 статьи  1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Из указанных норм права следует, что в круг юридически значимых  обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении настоящего  спора, входят наличие у Учреждения права собственности на истребуемое  имущество, утрата фактического владения имуществом, пользование  обществом спорным имуществом в заявленный период и нахождение его в  незаконном владении последнего на день рассмотрения дела в суде.  

Общество после заключения контракта от 02.10.2020 № 1-ЭА приняло  имущество учреждения по актам приема-передачи от 07.10.2020 и от  19.10.2020 без каких-либо возражений.  

При этом доказательства возврата спорного имущества ответчиком не  представлено.  

Поскольку факт законного владения и/или пользования спорным  имуществом подтвержден материалами дела, суд приходит к выводу о  

 

наличии у общества неосновательного обогащения, а требования истца  обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН 21»  передать истцу здание учреждения, переданное по акту от 07.10.2020,  расположенное по адресу: 

<

...>, проектную  и рабочую документацию по капитальному ремонту здания, а также  материальные ценности, переданные по акту от 19.10.2020, а именно:  

 № п/п  

Наименование и характеристика (с указанием 

марки, модели...)  

Ед.  изм  

Кол-во по учету 

Кол-во передано 

Излишки/  недостача  

1 

Видеонаблюдение. Видеосервер Macroscop  32М2  

шт.  

1 

 

2 

Видеонаблюдение. Коммутатор 24 порта HP  

шт.  

1 

 

3 

Видеонаблюдение. Компьютер 2  T6HDD 4F6RAM+MON24+nO  

шт.  

1 

 

4 

Видеонаблюдение. ИБП стоечный Racknount  

шт.  

1 

 

5 

Видеонаблюдение. ИБП стоечный Racknount  

шт.  

1 

 

6 

Видеонаблюдение. Шкаф напольный 19 дюймов  

шт.  

1 

 

7 

Видеонаблюдение. Видеокамера внешняя DN- IPC-HDRW2300  

шт.  

11 

 

8 

Видеонаблюдение. Жесткий диск HDD4T6  SATA II Seaqaie  

шт.  

3 

 

9 

Видеонаблюдение. Видеокамера внутренняя  IPC-HDBW2300  

шт.  

5 

 

10 

Видеонаблюдение. Карта памяти' Trancsend  

шт.  

16 

 

11 

Пожарная сигнализация. Блок управления на 32  индикатора  

шт.  

4 

 

12 

Пожарная сигнализация. Пульт управления  сегментом ПС-И  

шт.  

1 

 

13 

Пожарная сигнализация. Маршрутизатор РРОП-М2 

шт.  

13 

 

14 

Пожарная сигнализация. Контролер  радикальных устройств РРОПИ  

шт.  

4 

 

15 

Пожарная сигнализация. Сервер доступа WEB-И 

шт.  

1 

 

16 

Пожарная сигнализация. Световой оповещатель  радиокальный с надписью "ВЫХОД"  

шт.  

31 

 

17 

Пожарная сигнализация. Оповещатель звуковой  ОРФЕЙ-РИСП2  

шт.  

154 

 

18 

Пожарная сигнализация. Блок бесперебойного  питания БП-12/0,5  

шт.  

13 

 

19 

Пожарная сигнализация. Блок бесперебойного  питания БП-12/2А  

шт.  

5 

 

20 

Пожарная сигнализация. 

Аккумуляторная батарея 17 Ач 12В  DTM1217  

шт.  

5 

 

21 

Пожарная сигнализация. Блок преобразования  интерфейсов БПИ  

шт.  

1 

 

22 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  дымовой оптикоэлектронный АВРОР А-ДР  

шт.  

158 

 

23 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  радиокальный тепловой АВРОРА-ДР  

шт.  

4 

 

24 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  ручной радиокальный ИПР- Р  

шт.  

30  А  

 

25 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  дымовой оптикоэлектронный АВРОР А-ДР  

шт.  

11 

 

26 

Пожарная сигнализация. Объектовая станция  РСПИ Стрелец-Мониторинг  

шт.  

1 

 

27 

Пожарная сигнализация. Антенна Anli A-300MU-N 

шт.  

1 

 

28 

Пожарная сигнализация. Извещатель пожарный  ручной радиокальный ИПР- Р  

шт.  

1 

 

29 

Тревожная кнопка 

шт.  

1 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«СМУ-ВИОН 21», ОГРН 

<

***>, в пользу государственного  бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  города Севастополя «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта  и экскурсий учащейся молодежи», ОГРН 

<

***>, 6 000 рублей  расходов на уплату государственной пошлины.  

 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня  его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано  через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич