Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-52312/19-3-344

г. Москва

18 июня 2019г.

Резолютивная часть объявлена 20.05.2019г.

Дата изготовления решения в полном объеме 18.06.2019г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ОФИС ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 115054, г. Москва, Зацепский Вал, д. 2, стр. 3, подвальный этаж, пом. II, ком. 11)

к ООО AM «ПОРТАЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 115551, 

<

...>) 

о взыскании 952 435 руб. 28 коп.

В судебное заседание явились:

От истца - ФИО2, по доверенности от 05.04.2019г., ФИО3, по доверенности от 20.02.2019г.,

От ответчика - ФИО4 согласно приказу №1 от 14.01.2015г.,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с ООО AM «ПОРТАЛ» в пользу ООО «ОФИС ГРУПП» денежных средств в размере 250 000 рублей, в связи с невыполнением работ, предусмотренных пунктами 1.1.5, 1.1.7-1.1.8 договора № 0208 от 06.03.2018, денежных средств в размере 250 000 рублей за некачественное выполнение работ, предусмотренных пунктами 1.1.1-1.1.4 договора № 0208 от 06.03.2018, авансового платежа в размере 400 000 рублей, в связи с невыполнением всех работ по договору № 0208 от 06.03.2018, денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 52 435 рублей 28 копеек за неправомерное удержание, начисленных за период с 23.03.2018 по 26.02.2019.

Ответчик заявил письменное ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Истец представил отзыв на ходатайство ответчика, по доводам которого против удовлетворения данного ходатайства возражал.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика, не находит оснований для его удовлетворения, ввиду следующего.

Ответчик указал, что истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора, ссылаясь на то, что истец направил претензию по адресу: 115551, 

<

...> без указания номера офиса (квартиры), тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ адрес ответчика: 115551, 

<

...>, офис (квартира) 201.

Вместе с тем, реквизиты ООО AM «ПОРТАЛ» в договоре № 0208 от 06.03.2018, подписанном уполномоченными лицами при его заключении, содержат указание на адрес ответчика: 115551, 

<

...>, т.е. ООО AM «ПОРТАЛ» заверило ООО «Офис групп» о своем актуальном адресе.

Согласно ч. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Заверение о недостоверном адресе является обстоятельством неполучения корреспонденции, зависящим от Ответчика.

В силу п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных в том числе по адресу, указанному самим юридическим лицом, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

Таким образом, истец направил претензию исх. № 00012 от 22.01.2019 по адресу, указанному в договоре, учитывая, что закон позволяет направить претензию по адресу, согласованному сторонами в Договоре.

Кроме того, согласно сведениям с официального сайта ФГУП «Почта России», 25.01.2019 почтовое отправление с идентификатором 12908530032094 прибыло в место вручения.

Вместе с тем, ответчик не изъявил намерение урегулировать возникший спор во внесудебном порядке с момента извещения его о подаче иска и принятия иска к производству суда до рассмотрения спора по существу.

Также ответчик указал, что ФИО3 не был уполномочен на подписание искового заявления, поскольку доверенность от ООО «Офис групп» с датой «20.01.2019» подписана генеральным директором ООО «Офис групп» ФИО5, которая согласно выписке из ЕГРЮЛ вступила в свою должность с 13.02.2019.

Как пояснил истец, при оформлении доверенности на ФИО3 допущена техническая ошибка в дате, указанной в преамбуле доверенности: вместо 20.02.2019 указана дата 20.01.2019.

При этом, настоящее исковое заявление подписано представителем ООО «Офис групп» ФИО3 и направлено в Арбитражный суд г. Москвы 26.02.2019, то есть в период, когда ФИО5 уже являлась генеральным директором общества.

В соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель.

То обстоятельство, что в момент подписания искового заявления ФИО5 являлась генеральным директором и представитель общества действовал от имени общества по доверенности подписанной ФИО5, свидетельствует о наличии волеизъявления общества в лице генерального директора на представление своих интересов ФИО3

Техническая ошибка в доверенности не опровергает полномочия представителя по доверенности, так как является очевидной, не влияющей на существо спора и правомочия представителя, и не влечет недействительность такой доверенности (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 № 10АП-1474/2019 по делу № А41-86214/18).

Более того, генеральным директором ООО «Офис групп» составлено письмо № 00052 от 09.04.2019 с указанием на техническую ошибку в доверенности, который при этом подтвердил наличие полномочий у ФИО3 на подписание и направление от имени общества иска в Арбитражный суд г. Москвы. Действующий генеральный директор тем самым обозначил свою осведомленность о наличии спора, рассматриваемого в Арбитражном суде г. Москвы. 

При указанных обстоятельствах, несмотря на наличие технической ошибки в дате оформления доверенности, 26.02.2019 ФИО3 имел полномочия совершать действия, предусмотренные такой доверенностью.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме по заявленным основаниям.

Ответчик представил возражения на иск, по доводам которых исковые требования не признал.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между ООО АМ «Портал» (далее – Исполнитель, ответчик) и ООО «Офис групп» (далее – Заказчик, истец) был заключён договор №0208 от 06.03.2018 (далее Договор) на выполнение проектных работ и оказание услуг в отношении помещения II, расположенного на уровне подвала нежилого здания, по адресу: 

<

...>, в т.ч.:

- проведение работ по обмерам помещений и фасадов здания, фотофиксация (п. 1.1.1 Договора);

- разработка «Проекта перепланировки» (Раздел «АР») в соответствии с действующим законодательством (п. 1.1.2. Договора) в течении 10 рабочий дней после получения исходных материалов (п. 1.3.1. Договора);

- разработка «Проекта изменения внешнего вида фасада здания» с выполнением компьютерной визуализации и фотомонтажей (п. 1.1.3 Договора) в течении 15 рабочих дней после получения исходных материалов (п. 1.3.2. Договора);

- сопровождение получения согласования «Проекта изменения внешнего вида фасада здания» в Комитете по архитектуре и градостроительства города Москвы (п. 1.1.4 Договора) в течении 35 календарных дней с момента утверждения Заказчиком проектной документации (п. 1.3.3. Договора);

- разработка раздела «КР», «Проекта изменения внешнего вида фасада здания» (п. 1.1.5 Договора);

- чертежи раздела «КР», организация водостока во внутридомовую систему канализации (п. 1.1.6 Договора);

- проект организации строительства ПОС (п. 1.1.7 Договора);

- получение согласования ОПС Мосгоргеотреста с предварительным получением согласований МОЭСК, Метрополитена) (п. 1.1.8 Договора);

- открытие ордера на выполнение земляных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документации (ОАТИ гор. Москвы) (п. 1.1.9 Договора);

- закрытие ордера на выполнение земляных работ в соответствии с утверждённой Заказчиком проектной документации (ОАТИ гор. Москвы) (п. 1.1.10 Договора);

- обеспечение заказа и выполнения инвентаризации с выходом техника ТБТИ в соответствии с разработанной проектной документации (все линии черным цветом) (п. 1.1.11 Договора).

В соответствии с п. 2.2. Договора оплата услуг ответчика должна осуществляться поэтапно, в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, а также на условиях авансирования до начала выполнения работ, в следующих размерах: 400 000 руб. - авансовый платеж; 250 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктами 1.1.1-1.1.3 Договора; 250 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.4 Договора; 150 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктами 1.1.5-1.1.7 Договора; 100 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.8 Договора; 100 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.9 Договора; 100 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.10 Договора; 50 000 руб. - после выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.11 Договора.

Авансовый платеж в размере 400 000 руб. был перечислен ответчику, что подтверждается платежным поручением № 56 от 23.03.2018.

По факту выполнения работ и услуг по п. п. 1.1.1-1.1.3 ответчиком истцу был передан акт №8 от 26 июня 2018 и счет на оплату, на основании которых, после приемки работ, истец, в счет оплаты работ перечислил ответчику денежные средства в размере 250 000 руб., согласно платежному поручению №344 от 28.06.2018.  

По факту выполнения работ и услуг по п. 1.1.4 Договора ответчиком истцу был передан акт №9 от 26 июня 2018 и счет на оплату, на основании которого, после приемки работ, истец, в счет оплаты работ перечислил ответчику денежные средства в размере 250 000 руб., согласно платежному поручению №365 от 05.07.2018.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик допустил нарушения, связанные со сроком, качеством и объемом выполненных работ.

Сроки оказания услуг по Договору предусмотрены п. п. 1.3.1-1.3.7. 

Согласно п. 2 и п. 3 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Таким образом, истец вправе отказаться от приемки результата работ, однако указанным правом не воспользовался. 

Результат работ, выполненных в соответствии с п. п. 1.1.1-1.1.7 Договора, был принят истцом по расходным накладным №11 от 02 ноября 2018 и №14 от 13 ноября 2018, что свидетельствует о том, что по состоянию на 02 ноября 2018 года и 13 ноября 2018 года результат работ по Договору представлял для истца потребительскую ценность.

Более того, факт выполнения работ, предусмотренных п. п. 1.1.1-1.1.4 Договора подтверждается и доказательствами, представленными истцом - копией заключения Комитета по архитектуре и градостроительству гор. Москвы (Москомархитектуры) №МКА-02-16710/8-1 от 15.06.2018 и копией проекта перепланировки части подвала с изменением внешнего вида фасада нежилого здания.

В соответствии с п. 3.2. Договора Заказчик в течении 2-х дней с момента передачи ему проектной документации и Акта сдачи-приемки работ направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами в 5-ти дневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения (п. 3.3. Договора). 

Если в процессе выполнения работы, одной из сторон выяснится нецелесообразность дальнейшего её проведения, то сторона, выяснившая такую нецелесообразность, обязана приостановить работу, поставив об этом в известность вторую сторону в 3-х дневный срок (п. 3.4. Договора).

В силу п. 4.2. Договора, в обязанности Заказчика входят: одновременно с подписанием договора передать Исполнителю исходно-разрешительную документацию; производить платежи согласно пункту 2.2. настоящего договора; своевременно информировать Исполнителя о нецелесообразности продолжения работ или о возможных изменениях; своевременно подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ или направить мотивированные замечания.

Исходя из п. 7.4. Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков направления мотивированного отказа от подписания акта приемки работ такой акт считается подписанным Заказчиком, а Договор считается надлежаще выполненным Исполнителем.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Проектная документация и акты сдачи-приемки работ были приняты истцом и не возвращены ответчику. В установленные Договором срок мотивированного отказа с объяснением причин не подписания актов сдачи-приемки работ или каких-либо замечаний по выполненным работам в письменной форме от истца ответчику не поступало.

Таким образом, подписанные в одностороннем порядке акты являются доказательством исполнения ответчиком обязательств по Договору, а работы считаются принятыми истцом, в связи с чем, оснований для возврата истцу денежных средств, уплаченных за фактически выполненные работы, не имеется.

Доводы ответчика касательно качества выполненных работ являются необоснованными и подлежат отклонению.

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда возникает только в случае, если недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

Каких-либо замечаний и претензий при приемке работ, в том числе, в части срока, объема и качества выполненных работ, истцом ответчику заявлено не было.

Кроме того, в разумный срок после приемки работ претензии о наличии явных дефектов либо требования об устранении тех или иных недостатков, истцом ответчику не предъявлялись.

Какие-либо допустимые доказательства, свидетельствующие об отсутствии у истца возможности по своевременному обнаружению недостатков работ, в материалы дела не представлены.

Таким образом, объемы и качество выполненных ответчиком работ по Договору были определены ответчиком при их приемке в отсутствие замечаний.

В соответствии с п. 2 ст. 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Согласно п. 5 ст. 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

В нарушение п. 5 ст. 720 ГК РФ заключение специалиста ООО «ЭтуальСтройпроект» исх. № 07 от 22.01.2019 составлено истцом в одностороннем порядке, без уведомления ответчика, в результате чего, ответчик был лишен возможности представить свои возражения (пояснения), дополнительные документы, в обоснование своих возражений, таким образом, оно не может быть принято судом в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего наличие недостатков работ, как не отвечающее критериям относимости, допустимости и достоверности доказательств.

В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон (п. 6.2 Договора). 

Договор подлежит изменению или расторжению, если требования к оформляемой, в рамках настоящего договора, проектной и любой другой документации изменены решением, обязательным для обеих сторон (п. 6.3 Договора).

Уведомление об отказе от исполнения договора направлено ответчику спустя два месяца после передачи ответчиком результата работ, предусмотренных п.п. 1.1.1-1.1.7 договора, и приемки работ истцом, при этом, с требованием об устранении недостатков истец к ответчику не обращался, надлежащие доказательства, подтверждающие наличие недостатков выполненных работ, а также их существенность и неустранимость, в материалах дела отсутствуют.

В соответствии с ч. 2 ст. 1105 ГК РФ Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В соответствии  со  ст. 1102 ГК РФ лицо,  которое  без  установленных  законом,  иными правовыми  актами   или   сделкой   оснований  приобрело  или   сберегло  имущество  (приобретатель)  за   счет  другого  лица  (потерпевшего),  обязано  возвратить   последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение).

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, принимая во внимание, что ответчиком выполнены и переданы истцу работы на общую сумму в размере 900 000 руб., арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности и документальной неподтвержденности заявленного истцом искового требования к ответчику, поскольку истцом не доказан факт незаконного приобретения или сбережения ответчиком принадлежащего истцу имущества в заявленной сумме, в связи с чем, не имеет место неосновательное обогащение на стороне ответчика в порядке ст.ст.1102, 1105 ГК РФ, правовых оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании перечисленных денежных средств в размере 250 000 рублей за работы, предусмотренные пунктами 1.1.5, 1.1.7-1.1.8 договора № 0208 от 06.03.2018, денежных средств в размере 250 000 рублей за работы, предусмотренные пунктами 1.1.1-1.1.4 договора № 0208 от 06.03.2018, авансового платежа в размере 400 000 рублей, а также денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 52 435 руб. 28 коп., начисленных за период с 23.03.2018г. по 26.02.2019г., как дополнительного (акцессорного) требования, не имеется.

Расходы по оплате госпошлины по иску распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ и относятся на истца. В связи с тем, что истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, госпошлина в размере 22 049 руб. 00 коп. подлежит взысканию с истца в доход Федерального бюджета РФ.

На основании ст. ст. 8-12, 702, 720, 723, 753 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180  АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований - отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ОФИС ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 115054, г. Москва, Зацепский Вал, д. 2, стр. 3, подвальный этаж, пом. II, ком. 11) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в размере 22 049 (двадцать две тысячи сорок девять) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                         А.А. Федоточкин