Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-3330/2024

г. Хабаровск

29 мая 2024 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена  22 мая 2024  

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680054, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 127030, г. Москва, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 21)

о взыскании 3 254 048 руб. 02 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» о взыскании 3 254 048 руб. 02 коп. на основании  договора от 30.05.2023 № ИГИ 3005/23-1, составляющих основной долг в размере 2 100 000 руб., пени в размере 823 200 руб. за периоды с 10.08.2023 по 21.02.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 160 245 руб. 92 коп. за периоды с 10.08.2023 по 21.02.2024.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истцом заявлено ходатайство о частичном отказе от исковых требований о взыскании проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 160 245 руб. 92 коп. за периоды с 10.08.2023 по 21.02.2024, об уменьшении размера исковых требований, просил взыскать 2 741 970 руб., составляющих по договору от 30.05.2023 № ИГИ 3005/23-1  основной долг в размере  2 100 000 руб., пени в размере  602 700 руб. за периоды с 10.08.2023 по 22.05.2024.

На основании п.4 ч. 1 статьи 150 АПК РФ судом принимается частичный отказ от исковых требований о взыскании проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 160 245 руб. 92 коп. за периоды с 10.08.2023 по 21.02.2024.

Производство по требованию о взыскании проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 160 245 руб. 92 коп. за периоды с 10.08.2023 по 21.02.2024 подлежит прекращению.

Уменьшение размера исковых требований судом принимается, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заедания со ссылкой на нахождение ведущего юрисконсульта в служебной командировке, представлен приказ от 20.05.2024 № 28/1-К.

Статьей 53 ГК РФ установлено, что юридическое лицо приобретает гражданские права и несет обязанности посредством органов юридического лица, к которым относится, в том числе исполнительный орган ООО – директор, доказательств того, что директор не имел возможности представлять ООО «Строительная компания «Атлант» в судебном заседании 22 мая 2024 ответчиком не представлено.

В удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания судом отказано, поскольку отсутствуют основания, предусмотренные статьей 158 АПК РФ.

Истец, как следует из искового заявления, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договора от 30.05.2023 № ИГИ 3005/23-1, неисполнение ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, наличие основного долга  в размере  2 100 000 руб., право на взыскание пени в размере 602 700 руб. за периоды с 10.08.2023 по 22.05.2024.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и возражений на иск не представил.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

30.05.2023 между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях», подрядчик заключен договор № ИГИ 3005/23-1 с приложением № 1 к договору (техническое задание), в соответствии с которым заказчик поручает и обязуется оплатить, а подрядчик принимает и обязуется выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту: «Жилок комплекс «На семи холмах», многоэтажная (высотная) комплексная жилая застройка с объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктурой по адресу: городской округ Хабаровск, на земельном участке с кадастровым номером 27:23:000000:23255. 1 этап».

Пунктом 1.6. договора предусмотрено, результатом работ является: технический отчет, прошедший соответствующее согласование в Департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска (ДАСиЗ г. Хабаровска).

В соответствии с пунктом 3.1.1. договора, стоимость работ по договору составляет 4 200 000 руб., НДС не предусмотрен.

Пунктом 3.2. договора согласован порядок расчетов:

3.2.1. 50% стоимости работ, что составляет 2 100 000 руб., НДС не предусмотрен, заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами договора.

3.2.2. 30% стоимости работ, что составляет 1 260 000 руб., НДС не предусмотрен, заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с момента передачи материалов изысканий в соответствии с п. 1.6. договора и акта приемки передачи.

3.2.3. 20% стоимости работ, что составляет 840 000 руб., НДС не предусмотрен, заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы.

В соответствии с пунктом 5.3. договора, заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан проверить объем и содержание документации и направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от его подписания. В случае несогласия с замечаниями (претензиями) заказчика, подрядчик обязан в пятидневный срок после получения замечаний, предоставить заказчику письменное обоснование своей позиции. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной подрядчиком, требованиям технического задания, действующего законодательства и нормативных документов, если отступление от указанных требований не были согласованы с заказчиком.

В случае невыполнения заказчиком обязанности, указанной в п. 5.3. договора, акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается подрядчиком, считается действительным без подписи заказчика и является основанием для оплаты указанных в нем работ (пункт 5.5. договора).

В соответствии с пунктом 6.6. договора подрядчик вправе начислить заказчику неустойку за просрочку исполнения заказчиком его обязательств, предусмотренных договором, в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

Из приложения № 1 к договору (техническое задание) в п.19 следует, что составление технического отчета по ИГИ в 2-х экземп. на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf, графическая часть в формате dwg).

Ответчиком произведена оплата аванса в размере 2 100 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 13.06.2023 № 1846.

Истец выполнил работы в рамках договора от 30.05.2023 № ИГИ 3005/23-1, что подтверждается накладной от 02.08.2023 № 38/23, актом сдачи-приемки от 02.08.2023 №0208/23-1, подписанным в одностороннем порядке, направленных в порядке электронного документаоборота на электронную почту ответчика 02.08.2023, а также в приложении к претензии 18.01.2024, направленной посредством электронной почты в адрес ответчика, указанный в разделе 10 договора.

18.01.2024 истцом ответчику направлена претензия от 17.01.2024 № 2/24 с требованиями оплаты основного долга и неустойки, с приложением договора, акта, счета, накладной.

Мотивированный отказ от подписания акта от 02.08.2023 № 0208/23-1 на сумму 4 200 000 руб. истцом от ответчика не получен.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком обязанности по оплате задолженности послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях» в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с абзацем 2 статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Представленные сторонами доказательства арбитражный суд оценивает по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (статья 71 АПК РФ).

Оценив и исследовав представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд принимает акт от 02.08.2023 № 0208/23-1 в качестве доказательства, подтверждающего выполнение работ истцом и передачи их результата ответчику.

Ответчиком возражений относительно предоставления результата выполненных работ в электронной форме истцу не заявлено.

Пунктом 9.9 договора установлен порядок обмена документами и иными юридически значимыми сообщениями при  исполнении обязательств из договора будут производиться сторонами по адресам, телефонам, факсам, указанным в разделе 10 договора.

В разделе 10 договора указан E-mail: info@atlant-sk.com.

Статьей 165.1 ГК РФ установлено, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Доказательств оплаты основного долга на сумму 2 100 000 руб. ответчиком не представлено.

Исковое требование истца о взыскании основного долга подлежит удовлетворению в размере 2 100 000 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 602 700 руб. за периоды с 10.08.2023 по 22.05.2024.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 6.6. договора подрядчик вправе начислить заказчику неустойку за просрочку исполнения заказчиком его обязательств, предусмотренных договором, в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

Результат работ передан истцом ответчику 02.08.2023 посредством направления акта выполненных работ, накладной о передаче материалов, счета по адресу электронной почты ответчика, указанной в разделе 10 договора.

Судом указанный способ сдачи выполненных работ в соответствии с пунктами 9.9. и 9.10. договора признан надлежащим.

В соответствии с пунктом 3.2.2. договора 30% стоимости работ, что составляет 1 260 000 руб., НДС не предусмотрен, заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с момента передачи материалов изысканий в соответствии с п. 1.6. договора и акта приемки передачи.

Таким образом, период оплаты 30% стоимости работ наступил 09.08.2023.

Расчет пени произведен судом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 10.08.2023 по 25.01.2024), в размере 0,1% от  1 260 000 руб., за каждый день просрочки, составляет 212 940 руб.

В соответствии с пунктом 3.2.3. договора 20% стоимости работ, что составляет 840 000 руб., НДС не предусмотрен, заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы.

Таким образом, оплата работ в размере 840 000 руб., выполненных истцом, предусмотренная пунктом 3.2.2. договора поставлена в зависимость от действий заказчика о прохождении экспертизы.

О ходе прохождения экспертизы технического отчета по инженерно-геологически изысканиям, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях» по объекту: «Жилок комплекс «На семи холмах», многоэтажная (высотная) комплексная жилая застройка с объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктурой по адресу: городской округ Хабаровск, на земельном участке с кадастровым номером 27:23:000000:23255. 1 этап» сведения у истца отсутствуют.

С момента передачи материалов 02.08.2023 для проверки полноты и правильности технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, а также прохождения экспертизы прошло достаточное количество времени.

Замечаний от ответчика не поступало.

В соответствии с пунктом 5.5. договора акт сдачи приемки выполненных работ от 02.08.2023 считается действительным без подписи заказчика и является основанием для оплаты указанных в нем работ.

В претензии от 17.01.2024 № 2/24 истец просил ответчика в кратчайшие сроки погасить задолженность (основной долг и неустойку).

Суд признает разумным для исполнения требований, указанных в претензии, 5 рабочих дней с даты получения претензии (18.01.2024).

Расчет пени произведен судом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 26.01.2024 по 22.05.2024), в размере 0,1% от  цены договора 2 100 000 руб. (1260 000+840000), за каждый день просрочки, составляет 248 800 руб.

Требования истца о взыскании пени подлежат удовлетворению в размере 460 740 руб.

Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 10 134 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодека РФ государственная пошлина в размере 2 560 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                    Р Е Ш И Л

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 127030, г. Москва, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 21) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680054, 

<

...>) 2 560 740 руб., составляющих основной долг в размере 2 100 000 руб., пени в размере 460 740 руб., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере  34 284 руб.

В удовлетворении требований в остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Решения опытных специалистов в геоизысканиях» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680054, 

<

...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 560 руб., перечисленную платежным поручением от 28.02.2024 № 79.

Производство по требованию о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 160 245 руб. 92 коп.  прекратить.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

    Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                                Л.А. Збарацкая