АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-683/2021

г. Ставрополь

29 июня 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев  исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль», г.  Кисловодск, ОГРН 1082628001631, ИНН 2628051843,  

к федеральному казенному учреждению здравоохранения «Санаторий «Эльбрус»  министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Кисловодск, ОГРН  1022601319465, ИНН 2628016140,  

об изменении условий государственного контракта   № 1921188100122000000000000/0321100029619000091 от 05.08.2019, заключённого по  результатам проведения аукциона в электронной форме № 0321100029619000091 на  основании Протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в  электронной форме № 165 от 23.07.2019 между Федеральным казенным учреждением  здравоохранения «Санаторий «Эльбрус» Министерства внутренних дел Российской  Федерации» и Обществом с ограниченной ответственностью «Вертикаль»:  

 пункт 7.6 изложить в следующей редакции: Окончательная сдача работ по  настоящему Контракту и их приемка (на основании составленных при проведении  приемки работ документов) оформляется Заказчиком и Подрядчиком Актом о приемке  выполненных работ по реконструкции Объекта с приложением полного перечня  Исполнительной документации по реестру в 3-х экземплярах, составленному в  соответствии с перечнем Исполнительной документации для приемки выполненных работ  и результатами проведения итоговой проверки по объекту капитального строительства в  срок не позднее 10 февраля 2024 г. При этом такой Акт о приемке выполненных работ  подписывается Заказчиком в день принятия решения о приемке всех результатов  выполненных работ, предусмотренных Контрактом;  

 пункт 20.1 изложить в следующей редакции: Контракт вступает в силу с даты его  заключения Сторонами и действует по 09 марта 2024 года;  

 пункт 23.2 изложить в следующей редакции: Обеспечение исполнения  обязательств по контракту установлено в размере 5% (начальной) максимальной цены  контракта в сумме 14 675 338.78 руб. (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять  тысяч триста тридцать восемь рублей семьдесят восемь копеек).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Внести изменения в условия государственного контракта   № 1921188100122000000000000/0321100029619000091 от 05.08.2019, заключённого по  результатам проведения аукциона в электронной форме № 0321100029619000091 на  основании Протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в  электронной форме № 165 от 23.07.2019 между Федеральным казенным учреждением  здравоохранения «Санаторий «Эльбрус» Министерства внутренних дел Российской  Федерации» и обществом с ограниченной ответственностью «Вертикаль»:  

 пункт 7.6 изложить в следующей редакции: Окончательная сдача работ по  настоящему Контракту и их приемка (на основании составленных при проведении  приемки работ документов) оформляется Заказчиком и Подрядчиком Актом о приемке  выполненных работ по реконструкции Объекта с приложением полного перечня  Исполнительной документации по реестру в 3-х экземплярах, составленному в  соответствии с перечнем Исполнительной документации для приемки выполненных работ  и результатами проведения итоговой проверки по объекту капитального строительства в  срок не позднее 15 декабря 2022 года. При этом такой Акт о приемке выполненных работ  подписывается Заказчиком в день принятия решения о приемке всех результатов  выполненных работ, предусмотренных Контрактом;  

 пункт 20.1 изложить в следующей редакции: контракт вступает в силу с даты его  заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.  

 В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Взыскать с федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий  «Эльбрус» министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Кисловодск, ОГРН  1022601319465, ИНН 2628016140, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Вертикаль», г. Кисловодск, ОГРН 1082628001631, ИНН 2628051843, в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины 6 000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.11.2021 7:29:16

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна