Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, Смольного ул.,  дом 6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-1143/2021

01 июня 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 мая 2021 года. Полный текст решения изготовлен  01 июня 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Орловой Е.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сидоровой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»

(адрес: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, 1, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: закрытое акционерное общество "Универсальное строительное объединение", 

(адрес: 188640, Ленинградская область, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 3.964.875 руб. 09 коп., 

при участии:

от истца: представитель ФИО1 по дов. от 07.08.2020 г. №161-20,

от ответчика:  представитель ФИО2 по дов. от 25.09.2020 г. №б/н,  

 

установил:

Истец – публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – закрытому акционерному обществу «Универсальное строительное объединение», о взыскании 3.964.875 руб. 09 коп. неустойки по договору на осуществление технологического присоединения от 19.04.2013 г. №ОД-4044-13/2726-Э-13 (далее – Договор), неустойку за просрочку мероприятий по технологическому присоединению с 08.12.2020 г. до момента фактического исполнения обязательства, и 42.824 руб. возмещения расходов по госпошлине.

Истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, письменной позиции не представил.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, ответчика, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

Между ПАО «Россети Ленэнерго» (далее - Истец) и ЗАО «УНИСТО» от 19.04.2013 № ОД-4044-13/2726-Э-13 (далее - Договор), по условиям которого Истец обязуется осуществить технологическое присоединение объекта - «жилого дома», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ФИО3, земли САОЗТ «Ручьи», а Ответчик обязуется внести плату за технологическое присоединение, осуществить мероприятия по технологическому присоединению со своей стороны.

Дополнительным соглашением от 12.02.2018 стороны изменили объект присоединения, указав, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения торгово-складского здания (позиция 17), расположенного по адресу; Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер: 47:07:0722001:4741.

В соответствии с положениями пункта 5 Договора, в редакции дополнительного соглашения № 2 от 12.02.2018, установлено, что мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2019 г.

Положениями пункта 8 Договора установлена обязанность Ответчика выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору, уведомить об этом сетевую организацию.

Размер платы за технологическое присоединение установлен пунктом 10 Договора, в редакции дополнительного соглашения от 11.03.2019> определен в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 25.02.2011 № 22-п и составляет 10 066 839,55 руб., в т.ч. НДС 20 % -1 677 806,59 руб.

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены Истом в срок, предусмотренный Договором, письмом от 30.12.2016 № ПрЭС/038/10641-12, от 23.06.2017 №ПрЭС/038/5427-12, Истец уведомил Ответчика о готовности выполнения мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны.

Отмечаю, что в пункте 5 дополнительного соглашения 2 от 12.02.2018 стороны подтвердили выполнение мероприятий по технологическому присоединению со стороны Истца.

Мероприятия по технологическому присоединению Ответчиком по настоящий момент исполнены не были. На момент подготовки искового заявления Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств в 341 день (с 01.01.2020 по 07.12.2020).

Письмом от 24.04.2020 № ЛЭ/16-02/881 Истец обратился к Ответчику с претензией, в которой требовал уплатить неустойку за просрочку исполнения мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны.

Истец полагает, что указанные обстоятельства являются основанием требовать взыскания штрафных санкций в виде уплаты неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых: актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с подпунктом а) пункта 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным в случае, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

Пункт 17 Договора предусматривает ответственность за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, определяемую как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федераций, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В связи ненаправлением в адрес сетевой организаций уведомления о готовности, невыполнением мероприятий со стороны Ответчика в срок до 31.12.2019 у Истца возникло право требовать уплаты неустойки согласно представленному ниже расчету.

0,014 (ставка неустойки) * 8,25 (ставка рефинансирования на момент заключения Договора) / 100 * 10 066 839,55 (общий размер платы за ТП) * 341 (количество дней просрочки с 01.01.2020 по 07.12.2020) - 3 964 875,09 руб.

Таким образом, с Ответчика подлежит взысканию неустойка за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 3 964 875,09 руб.

Принимая во внимание, что Ответчик против иска по существу представленных требований не возразил и не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по договору, исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине, на основании статьи 110 АПК РФ, на последнего. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с закрытого акционерного общества «Универсальное строительное объединение» в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» 3.964.875 руб. 09 коп. неустойки,  неустойку за просрочку мероприятий по технологическому присоединению с 08.12.2020 г. до момента фактического исполнения обязательства, и 42.824 руб. расходов по госпошлине.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                    Орлова Е.А.