АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-17815/2023 

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть 

09 февраля 2024г г. г. Кемерово  Арбитражный суд Кемеровской области в составе  

судьи Переваловой О.И.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственной  

жилищной инспекции Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов Кузбасса», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, об обязании совершить действия 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ  

СТРОИТЕЛЬ", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

общество с ограниченной ответственностью "КЕМСТРОЙТОРГ", г.  

Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  

"Комфортный дом", Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район,  

Зеленогорский поселок городского типа, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

общество с ограниченной ответственностью "АРМСТРОЙ", ОГРН:  

1164205062581, ИНН: 

<

***>, 

Руководствуясь, статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса» в срок до 30.06.2024г. исполнить предписание  Государственной жилищной инспекции Кузбасса № 89.4-386 от 19.06.2023, а  именно: завершить капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 61 по ул.  Центральная, в пгт. Зеленогорский, Крагогвинский район, Кемеровской области-  Кузбасса, в соответствии с рабочей документацией от 2021 000 СК «Пионер» шифр  04-20/90.ПД.20-23-ГО, 04-20/90.ПД.20-23-АС, 04-20/90.ПД.20-23-СМ, а именно:  

выполнить в полном объеме кровельное ограждение, в том числе, элементы  снегозадержания - листы №№ 2,7,19 рабочей документации шифр 04-20/90.ПД.20- 23-АС;  

выполнить в полном объеме вентиляционные шахты (зонты, утепление  вентиляционных шахт в чердачном помещении) - листы № № 2,6,22 рабочей  документации 04-20/90.ПД.20-23-АС;  

установить страховочные крюки на крыше - листы № № 2,7,20 рабочей  

документации шифр 04- 20/90.ПД.20-23-АС;  

выполнить в полном объеме систему наружного водоотведения кровли  (водосточные трубы, воронки, желоба, свесы) листы №№ 2,7, 16 рабочей  документации шифр 04-20/90.ПД.20-23-АС;  

выполнить в полном объеме конструкции слуховых окон (установить блоки с  решетками) - листы № № 2,6,14,15 рабочей документации шифр 04-20/90.ПД.20-23- АС;  

в чердачном помещении полностью выполнить работы по устройству  утепления чердачного перекрытия - листы №№ 2,6 рабочей документации шифр 0420/90.ПД.20-23-АС;  

обеспечить пароизоляцию и влаговетрозащитную пленку в чердачном  помещении листы №№ 2,6,13 рабочей документации шифр 04-20/90.ПД.20-23-АС;  

установить ходовые трапы - листы №№ 2,6,8,9,17,18 рабочей документации  шифр 04- 20/90.ПД.20-23-АС;  

заменить противопожарные люки - листы №№ 2,3,6 рабочей документации  шифр 04- 20/90.ПД.20-23-АС;  

установить лестницы выхода на кровлю - листы №№ 2,6 рабочей  документации шифр 04- 20/90.ПД.20-23-АС;  

устранить просветы в кровельном покрытии. 

Предоставить в ГЖИ Кузбасса Акт приемочной комиссии оказанных услуг и  (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме № 61 по ул. Центральная в пгт. Зеленогорский,  Крапивинского района, Кемеровской области-Кузбасса.  

 Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 6000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова