АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-8499/2020

18 августа 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 11 августа 2020 года, полный текст решения изготовлен 18 августа 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Малыгиной Е.В.,                                        при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Уютстрой-55» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 19 845 406 руб. 69 коп.,

в заседании суда приняли участие: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 02.09.2019, личность удостоверена паспортом РФ;

от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Уютстрой-55» (далее - ООО «Уютстрой-55», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Строй» (далее - ООО «Альянс Строй», ответчик) о взыскании неустойки в размере 19 845 406 руб. 69 коп.

Определением Арбитражного суда Омской области от 25.05.2020 указанное исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 30.06.2020.

Определением Арбитражного суда Омской области от 30.06.2020 дело признано подготовленным, назначено к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 11.08.2020; ответчику повторно предложено представить письменный отзыв на исковое заявление с приложением документов в обоснование своих доводов и возражений.

В судебном заседании, состоявшемся 11.08.2020, представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме; ответчик не явился, явку представителя не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

13.02.2018 между ООО «УютСтрой-55» (генеральный подрядчик) и ООО «Альянс Строй» (субподрядчик) заключен договор строительного подряда № 1-18 (далее - договор № 1-38), по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок собственными силами и средствами выполнить по заданию генерального подрядчика на объекте капитального строительства : «1-ый этап строительства - Три 16-ти этажных жилых дома (строительные номера №1, №2, №3), в составе жилого квартала расположенного в границах; ул. 3-я Енисейская - ул. Б. ФИО3 - старица реки Замарайка - ул. Дмитриева в Кировском АО г. Омска» по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Б. ФИО3, дома 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», согласно проектной документации ОМ 1000-01-0-ГП «Генеральный план» следующие виды работ: выполнение работы по устройству проездов, площадок и тротуаров на объекте, а также сдать результат работ генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Сроки выполнения работ определены в пункте 2 договора № 1-18:

- начальный срок выполнения работ - 01.04.2018;

- завершение работ и сдача выполненных работ генеральному подрядчику осуществляются субподрядчиком в срок до 30.09.2019 (пункты 2.1 - 2.2 договора № 1-18).

Стоимость работ в соответствии с пунктом 3.1 договора № 1-18 составляет 37 210 356 руб., в том числе НДС 18% - 5 676 176 руб.

В соответствии с пунктом 12.1 договора стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании пункта 12.2 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков передачи результатов работ генеральному подрядчику,  субподрядчик по требованию генерального подрядчика, уплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере  0,05 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки исполнения каждого из обязательств, предусмотренных договором.

Как указал истец, срок окончания работ определен договором до 30.09.2019, однако работы до настоящего времени выполнены не в полном объеме, окончательный результат работ ООО «Уютстрой-55» не передан.

22.02.2018 между ООО «УютСтрой-55» (генеральный подрядчик) и ООО «Альянс Строй» (субподрядчик) заключен договор строительного подряда № № 2/1-18 (далее - договор № 2/1-18), по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок собственными силами и средствами из материалов генерального подрядчика выполнить по заданию генерального подрядчика на объекте капитального строительства : «1-ый этап строительства - Три 16-ти этажных жилых дома (строительные номера №1, №2, №3), в составе жилого квартала расположенного в границах: ул. 3-я Енисейская - ул. Б. ФИО3 - старица реки Замарайка - ул. Дмитриева в Кировском АО г. Омска» по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Б. ФИО3, дом 1 «Г», согласно проектной документации 0904/2017-П, ОМ 1000-01-3-АР «Архитектурные решения» следующие виды работ: устройство внутренних перегородок, кладка стен из кирпича и блоков, устройство воздуховодов, устройство монолитных участков на объекте, а также сдать результат работ генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Сроки выполнения работ определены в пункте 2 договора № № 2/1-18:

- начальный срок выполнения работ - 01.03.2018;

- завершение работ и сдача выполненных работ генеральному подрядчику осуществляются субподрядчиком в срок до 30.08.2018 (пункты 2.1 - 2.2 договора № 2/1-18).

Стоимость работ в соответствии с пунктом 3.1 договора № 2/1-18 составляет 5 197 872 руб. 86 коп., в том числе НДС 18% - 792 895 руб. 86 коп.

В соответствии с пунктом 12.1 договора стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании пункта 12.2 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков передачи результатов работ генеральному подрядчику,  субподрядчик по требованию генерального подрядчика, уплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере  0,05 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки исполнения каждого из обязательств, предусмотренных договором.

Как указал истец, срок окончания работ определен договором до 30.08.2018, однако работы до настоящего времени выполнены не в полном объеме, окончательный результат работ ООО «Уютстрой-55» не передан.

 22.02.2018 между ООО «УютСтрой-55» (генеральный подрядчик) и ООО «Альянс Строй» (субподрядчик) заключен договор строительного подряда № 2/2-18 (далее - договор № 2/2-18), по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок собственными силами и средствами выполнить по заданию генерального подрядчика на объекте капитального строительства : «1-ый этап строительства - Три 16-ти этажных жилых дома (строительные номера №1, №2, №3), в составе жилого квартала расположенного в границах: ул. 3-я Енисейская - ул. Б. ФИО3 - старица реки Замарайка - ул. Дмитриева в Кировском АО г. Омска» по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Б. ФИО3, дома 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», согласно проектной документации 0904/2017-П, ОМ 1000-01-2-АР «Архитектурные решения» следующие виды работ: выполнение работ по устройству внутренних перегородок и наружных стен на объекте, а также сдать результат работ генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Сроки выполнения работ определены в пункте 2 договора № 2/2-18:

- начальный срок выполнения работ - 01.07.2018;

- завершение работ и сдача выполненных работ генеральному подрядчику осуществляются субподрядчиком в срок до 30.06.2019 (пункты 2.1 - 2.2 договора № 2/2-18).

Стоимость работ в соответствии с пунктом 3.1 договора № 2/2-18 составляет 11 310 851 руб. 06 коп., в том числе НДС 18% - 1 725 384 руб. 06 коп.

В соответствии с пунктом 12.1 договора стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании пункта 12.2 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков передачи результатов работ генеральному подрядчику,  субподрядчик по требованию генерального подрядчика, уплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере  0,05 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки исполнения каждого из обязательств, предусмотренных договором.

Как указал истец, срок окончания работ определен договором до 30.06.2019, однако работы до настоящего времени выполнены не в полном объеме, окончательный результат работ ООО «Уютстрой-55» не передан.

21.02.2018 между ООО «УютСтрой-55» (генеральный подрядчик) и ООО «Альянс Строй» (субподрядчик) заключен договор строительного подряда № № 2-18 (далее - договор № 2-18), по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию генерального подрядчика на объекте капитального строительства: «1-ый этап строительства - Три 16-ти этажньгх жилых дома (строительные номера №1, №2, №3), в составе жилого квартала расположенного в границах: ул. 3-я Енисейская - ул. Б. ФИО3 - старица реки Замарайки - ул. Дмитриева в Кировском АО г. Омска», следующие виды работ: устройство кровли на объекте капитального строительства, а также сдать результат работ генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Сроки выполнения работ определены в пункте 2 договора № 2-18:

- начальный срок выполнения работ - 01.03.2018;

- завершение работ и сдача выполненных работ генеральному подрядчику осуществляются субподрядчиком в срок до 31.08.2018 (пункты 2.1 - 2.2 договора № 2-18).

Стоимость работ в соответствии с пунктом 3.1 договора № 2-18 составляет 8 130 032 руб. 44 коп., в том числе НДС 18% - 1 240 174 руб. 44 коп.

В соответствии с пунктом 12.1 договора стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании пункта 12.2 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков передачи результатов работ генеральному подрядчику,  субподрядчик по требованию генерального подрядчика, уплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере  0,05 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки исполнения каждого из обязательств, предусмотренных договором.

Как указал истец, срок окончания работ определен договором до 31.08.2018, однако работы до настоящего времени выполнены не в полном объеме, окончательный результат работ ООО «Уютстрой-55» не передан.

01.03.2019 между ООО «УютСтрой-55» (генеральный подрядчик) и ООО «Альянс Строй» (субподрядчик) заключен договор строительного подряда № 08-19 (далее - договор № 08-19), по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию генерального подрядчика на объекте капитального строительства: «1-ый этап строительства - Три 16-ти этажных жилых дома (строительные номера №1, №2, №3), в составе жилого квартала расположенного в границах: ул. 3-я Енисейская - ул. Б. ФИО3 - старица реки Замарайка - ул. Дмитриева в Кировском АО г. Омска», следующие виды работ: отделочные работы мест общего пользования, цокольного этажа, технического этажа и квартир жилого дома № 2 и жилого дома № 3 на объекте капитального строительства, а также сдать результат работ генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Сроки выполнения работ определены в пункте 2 договора № 08-19:

- начальный срок выполнения работ - 02.03.2019;

- завершение работ и сдача выполненных работ генеральному подрядчику осуществляются субподрядчиком в срок до 10.07.2019 (пункты 2.1 - 2.2 договора № 08-19).

Стоимость работ в соответствии с пунктом 3.1 договора № 08-19 составляет 30 681 445 руб. 20 коп., в том числе НДС 18%.

В соответствии с пунктом 12.1 договора стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основании пункта 12.2 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков передачи результатов работ генеральному подрядчику,  субподрядчик по требованию генерального подрядчика, уплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере  0,05 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки исполнения каждого из обязательств, предусмотренных договором.

Как указал истец, срок окончания работ определен договором до 10.07.2019, однако работы до настоящего времени выполнены не в полном объеме, окончательный результат работ ООО «Уютстрой-55» не передан.

В связи с просрочкой исполнения обязательств по договорам № 1-38, № 2/2-18, № 2/2-18, № 2-18, № 08-19, истец начислил ответчику неустойку в размере 19 845 406 руб. 69 коп.

21.04.2020 ООО «Уютстрой» в адрес ООО «Альянс Строй» были направлены претензии об уплате неустойки за нарушение сроков сдачи работ.

Отсутствие действий со стороны ответчика по оплате начисленной неустойки послужило основанием для обращения ООО «Уютстрой» с настоящим иском в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства в совокупности и взаимной связи, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Истец, руководствуясь указанной нормой, а также положениями пунктов 12.2 договоров, начислил неустойку за каждый день просрочки. 

По расчету истца размер неустойки составил:

- по договору № 1-38 за период с 01.10.2019 (дата, следующая за датой окончания работ по договору подряда) по 20.04.2020 (дата направления претензии) в размере 3 776 851 руб. 13 коп.;

- по договору № 2/2-18 за период с 31.08.2018 (дата, следующая за датой окончания работ по договору подряда) по 20.04.2020 (дата направления претензии) в размере 1 556 762 руб. 92 коп.;

- по договору № 2/2-18 за период с 01.07.2019 (дата, следующая за датой окончания работ по договору подряда) по 20.04.2020 (дата направления претензии) в размере 3 336 701 руб. 06 коп.;

- по договору № 2-18 за период с 01.09.2018 (дата, следующая за датой окончания работ по договору подряда) по 20.04.2020 (дата направления претензии) в размере 2 430 879 руб. 70 коп.;

- по договору № 08-19 за период с 11.07.2019 (дата, следующая за датой окончания работ по договору подряда) по 20.04.2020 (дата направления претензии) в размере 8 744 211 руб. 88 коп.

Таким образом, общий размер неустойки за нарушение сроков сдачи работ составил 19 845 406 руб. 69 коп.

Поскольку неустойка предусмотрена договорами, а факт нарушение сроков сдачи работ судом установлен, требование истца о взыскании неустойки признается обоснованным.

Расчет неустойки судом проверен, признан арифметически верным.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. 

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик своими процессуальными правами не воспользовался - в суд отзыв на иск с обоснованием своих возражений и доказательств не представил, доводов о несоразмерности размера неустойки  не привел, ходатайство о снижении размера неустойки и применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил, в связи с чем на основании статьи 9, части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Алгоритм расчета неустойки ответчиком по существу не оспорен, контррасчет не представлен. Доводов о несоразмерности размера неустойки ответчик не приводил, ходатайство о снижении размера неустойки и применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлял.

Таким образом, исковые требования являются обоснованными, подтверждаются материалами дела, и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В главе 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определен общий порядок разрешения вопросов о судебных расходах.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

С учетом результатов рассмотрения иска расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уютстрой-55» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 19 845 406 руб. 69 коп. неустойки, а также 122 227 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                Е.В. Малыгина