487/2023-269292(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-14933/2023

город Саратов

03 октября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

в соответствии подпунктом 6.5 муниципального контракта № 26 от 24.09.2021 обязать  общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецконструкция» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда за свой  счет устранить выявленные в гарантийный период дефекты (недостатки):  

1.1. Дефекты резинового покрытия детской и спортивной площадок: - некачественную адгезию резинового покрытия с основанием; - отсутствие целостности структуры резинового покрытия; - выкрашивания резинового покрытия; - деформацию, крошение резинового покрытия; - отсутствие адгезии у резиновых гранул между собой путем демонтажа остатков резинового покрытия и укладки нового резинового покрытия. 1.2. Дефекты (недостатки) МАФ: 

- устранение внутреннего повреждения механизма качелей-каруселей с сиденьем «Гнездо»;  

- устранение отсутствия крепления и укрепление крепежных элементов конструкции модуля  «Вращающийся лабиринт»;  

- устранение разрыва, деформации соединения между канатом и ступенью модуля «Канаты» 

Путем проведения ремонта с заменой элементов. 

В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный в решении срок взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Волгоспецконструкция» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город  

Саратов» (ОГРН 1026403681810, ИНН 6455026290) судебную неустойку, подлежащую начислению в  размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с даты вступления  решения суда в законную силу по день фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгоспецконструкция» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу администрации Фрунзенского района муниципального  образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени за просрочку  исполнения гарантийного обязательства по муниципальному контракту № 26 от 24.09.2021 в размере  1 186 818 руб. 04 коп. за период с 01.06.2023 по 03.10.2023, с последующим начислением неустойки  по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгоспецконструкция» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу администрации Фрунзенского района муниципального  образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф за факт  неисполнения обязательств по контракту в размере 20 000 рублей  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгоспецконструкция» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по  иску в размере 8 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1