АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-22804/2017

г. Симферополь

06 ноября 2018  года

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГУП РК  «Вода Крыма»

к ответчику ООО «СК «ЭкоСтрой»

о взыскании задолженности

при участии:

От истца – ФИО2, представитель по доверенности №5 от 09.01.2018;

От ответчика - не явился;

Обстоятельства дела:  Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 4 118 810,57 руб.

Исковые требования обосновываются ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору. 

          Ответчик отзыва не представил.  

В судебном заседании, которое состоялось 23.10.2018, объявлен перерыв по 30.10.218. 

         Рассмотрев материалы дела,  суд, -

установил:

Между ГУП РК «Вода Крыма» (Заказчик) и ООО «СК «ЭкоСтрой» (Подрядчик) подписан договор № 2016.12579 от 07.11.2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ, далее — Договор.

В соответствии с п. 2.1. Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами правилами Российской Федерации выполнить строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать и испытать оборудование, сдать объект приемной комиссии в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с порядком принятия в эксплуатацию законченных строительных объектов, утвержденных постановлением Государственного совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года, №2039-6/14 необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - работы), передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ (оказанных услуг) и оплатить обусловленную настоящим договором цену

Согласно п. 2.2. Договора, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора работы (услуги) выполняются Подрядчиком по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «капитальный ремонт сетей водоснабжения Новопавловского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым».

Согласно п. 5.2. Договора, в редакции, введенной дополнительным соглашением №3 от 30.03.2017 г. начало работ — с момента подписания договора, окончание работ — 30 апреля 2017 г.

Статьей 708 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Истец направил ответчику уведомление от 12.07.2018 № 6579/01-23 об одностороннем отказе от договора.

Указанное уведомление ответчиком не оспорено и недействительным не признано.

По крайней мере, заинтересованной сторон соответствующих доказательств не представлено.

Таким образом, у суда отсутствуют основания не принимать указанное уведомление во внимание. 

 Исходя из изложенных обстоятельств, договор считается расторгнутым с 24.07.2018.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

  Пеня предусмотрена п. 26.9.1. Договора. 

Согласно статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Ответчиком отзыва на исковое заявление также не представлено, изложенные в исковом заявлении обстоятельства им не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Согласно  постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 оспаривая расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием иного подхода.

Непредставление такого расчета расценивается как недобросовестность, в связи с чем нет оснований считать предоставленный истцом расчет неправильным. (Постановление Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 по делу № А83-5275/2017. 

Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.    

  Таким образом, ответчиком проявлена недобросовестность, и, соответственно, его возражения в части расчета суммы иска в дальнейшем, с учетом вышеприведенного постановления Президиума, во внимание приниматься не должны.     

            Таким образом, исковые требования законные,  и подлежат удовлетворению.

   Согласно  ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат взысканию  с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с ООО «СК «ЭкоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ГУП РК «Вода Крыма» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 4 118 810,57 руб., расходы связанные с уплатой госпошлины в размере 43 594,00 руб. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                      

         Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                            В.И. Гайворонский