Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-50796/2021

17 июня 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  17 июня 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Михайлова П.Л.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :общество с ограниченной ответственностью "АКСИОМА" (адрес: 197348, 

<

...> ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 412, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: :муниципальное учреждение культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"  ИМ. Н.А. РУБАКИНА (адрес:  188531, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШАЯ ИЖОРА ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 11, -, ОГРН: 

<

***>);

третьи лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофКонтроль" (адрес: 193315, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

2. Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"  (адрес: 188502, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ГОРБУНКИ ДЕРЕВНЯ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и неустойки за просрочку оплаты

при участии:

- от истца: ФИО2 доверенность от 26.01.2022 г.

- от ответчика: директор ФИО3, ФИО4 доверенность от 10.02.2022 г.

- от третьих лиц: не явились (извещены)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» ИНН 

<

***> 197348, 

<

...> лит. А, пом. 412 обратилось с иском к Муниципальному учреждению культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина ИНН 

<

***> 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 11, уточненным в порядке ст. 49Арбитражного процессуального кодекса РФ  о взыскании задолженности по оплате работ в размере 3312333 рубля, неустойки за просрочку оплаты работ в размере 348788 рублей 67 копеек.

Муниципальным учреждением культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина был представлен отзыв, в котором указывалось на ненадлежащее выполнение работ, которые оплате не подлежат.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора,  определением от 19.07.2021 г. привлечены общество с ограниченной ответственностью «Профконтроль» (ОГРН 

<

***>) и муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (ОГРН 

<

***>).

Определением от 25 февраля 2022 года производство по делу приостанавливалось в связи с назначением судебной строительной экспертизы, производство по делу было возобновлено определением суда от 15.07.2022 года.

Третьим лицом - муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» представлен отзыв, в котором указывается на отсутствие подтверждения заявленных к оплате работ исполнительной документацией, на наличие замечаний к работам, которые подрядчиком не устранены.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства:

18.09.2020 года между ООО «Аксиома» и Муниципальным учреждением культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина заключен Контракт № МК-240-0345300121120000120 от 18.09.2020 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений «Центральной библиотеки Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина», расположенной в жилом доме по адресу: Приморское шоссе, 11, пгт. Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область». 10.12.2020 года стороны заключили Дополнительное соглашение к Контракту.

Контракт заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) на основании Протокола об итогах электронного аукциона от 08.09.2020 года № 203472002261547250100100120014399243, подписан сторонами посредством ЭЦП.

Согласно п. 1.2 Контракта подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт помещений «Центральной библиотеки Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина», расположенной в жилом доме по адресу: Приморское шоссе, 11, пгт. Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область» в соответствии с Техническим заданием, со Сводным сметным расчетом, условиями Контракта и требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, установленными для данного вида работ, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему Контракту в пределах цены, установленной Контрактом.

Согласно п. 2.1 Контракта, начало выполнения работ - с момента подписания акта передачи объекта в работу, окончание выполнения работ - 10.12.2020 года.

В соответствии с п. 3.1 Контракта цена Контракта составляет 15 466 827 руб.32 коп.

Пунктом 4.1 Контракта предусмотрено, что оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без замечаний, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и передачи подрядчиком заказчику счета и счета-фактуры. Оплата результата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Согласно п. 7.5, п. 7.10 Контракта работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Объект был передан ООО «Аксиома» в работу 21.09.2020г. по Акту.

Результат работ принят заказчиком путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 № 1-16 от 22.12.2020 года (л.д.189-228 т.1) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 а всего 15 466 827,32 руб. Акты и справки подписаны уполномоченными представителями сторон, заверены печатями организаций без замечаний.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть произведена Заказчиком в срок до 20 января 2021 года.

Ответчик частично оплатил выполненные подрядчиком работы в сумме 11 576 245, 36 руб. платежным поручением № 36783 от 28.12.2020 года.

По спорным актам выполненных работ были поставлены вопросы перед экспертом:

1. - Каков общий объем и стоимость выполненных работ, отраженных в актах по форме КС-2 №14,15,16,17 от 18.09.2019г. №18,19,20 от 25.09.2019г?- Выполнены ли данные работы в соответствии с условиями контракта № МК - 240 - 0345300121170000120 от 18.09.2020 г. и дополнительным соглашением к нему?- Имеют ли данные работы недостатки (дефекты, недоделки). Являются ли эти недостатки существенными? Возможно ли исправление данных недостатков? Если устранение недостатков, возможно, какова стоимость их устранения?- Влияют ли обнаруженные недостатки (если они будут обнаружены) на надлежащую эксплуатацию здания библиотеки.- Если обнаружены недостатки, являются ли они результатом работ или ненадлежащей эксплуатации здания?

В соответствии с заключением эксперта стоимость выполненных и предъявленных к оплате работ составляет 3876292 рубля. Стоимость устранения недостатков, имеющихся в данных работах, составляет 563959 рублей.

Свои выводы эксперт ФИО5 подтвердила при допросе в ходе судебного разбирательства.

Истец изменил свои требования в соответствии с заключением экспертизы, учитывая стоимость работ, подтвержденную экспертом и стоимость работ по устранению недостатков. Итоговая сумма ко взысканию составила 3312333 рублей. 

Таким образом, у Заказчика осталась задолженность в размере 3312333 рублей, которую Заказчик до настоящего времени не погасил.

Истец направил ответчику по почте России претензию № 19 от 11.03.2021 года, которая была получена 13.04.2021 года руководителем ответчика, о чем имеется ее подпись в уведомлении о вручении, но оставлена ответчиком без удовлетворения.

В связи с указанными обстоятельствами ООО «Аксиома» было вынуждено обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ч. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Справки о стоимости выполненных работ вместе с актом приема-передачи являются доказательством выполнения работ, датой приемки работ является дата, указанная в актах приема-передачи  Ссылка заказчика на отсутствие в актах подписи со стороны технического надзора не принимается судом, т.к. качество работ проверено путем проведения экспертизы.

Пунктом 9.2.1 Контракта, ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае просрочки заказчиком оплаты оказанных услуг, исполнитель вправе требовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Размер пени за период просрочки с 21.01.2021 года по 31.03.2021года составляет: 348 788,67 руб.

Истцу предоставлялась отсрочка уплаты государственной пошлины.

Сторонами вносилась оплачивалось производство экспертизы в размере 170 000 рублей. Каждая из сторон внесла 85 000 рублей на депозит Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Муниципального учреждения культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Аксиома» задолженность по Контракту № МК-240-0345300121120000120 от 18.09.2020 года в размере 3 312 333  рубля 

Взыскать с Муниципального учреждения культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Аксиома» пени за период с 21.01.2021 г. по 31.03.2021 г. в размере 348 788 рублей 67 копеек.

Взыскать с Муниципального учреждения культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Аксиома» расходы по оплате экспертизы в размере 85000 рублей. 

Взыскать с Муниципального учреждения культуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 41306 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Михайлов П.Л.