045/2025-69135(1) 

и

ю

л 

 я 

Арбитражный суд Рязанской области   

ул. Почтовая, 43/44, 

<

...>; факс 

<

***>; 2 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 0 

Именем Российской Федерации 

2 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 5 

г. Рязань Дело № А54-6568/2023  

г 

08 июля 2025 года  

о 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 08 июля 2025 года. д а Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Афанасьевой И.В.,  

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теплострой" (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РН-Сервис Рязань" (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/22 от 11.03.2022 г. за период с 01.10.2022 г. по 31.07.2023 г. в сумме 405 000 руб., судебные расходы по госпошлине в сумме 17 100 руб.  

Дальнейшее взыскание пеней за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 1/22 от 11.03.2022 г. производить на сумму невыполненных работ, начиная с 01.08.2023 г. по день фактического выполнения работ, исходя из ставки 0,01 % за каждый день просрочки.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Теплострой" (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) в течение трёх рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда выполнить предусмотренные договором подряда № 1/22 от 11.03.2022 г. следующие работы:  

- установить теплообменник пластинчатого гвс тип НН7 «Ридан» F=1,389M2 21 пластина вместо установленного теплообменника пластинчатого гвс «Этра» тип ЭТ-007с-10-19;  

- установить вертикальный гидроаккумуляторный бак БТ (A)-1,2-0,6-B4*V-1200 л (Максимальная рабочая температура +100°С) вместо установленного вертикального гидроаккумуляторного Бака «S-Tank» серии ЕТ1200 (Максимальная рабочая температура +95 °С);  

- установить термометр металлический погружной диам 100 мм, с гильзой L=40MM, пределы измерений 0...+120°С, марки WIKA, Термометр металлический погружной диам 100 мм, с гильзой L=40мм, пределы измерений 0...+250 °С, марки WIKA, Термометр оборудование и материалы, включая трубы и запорную арматуру.  

В случае неисполнения судебного акта в части выполнения вышеуказанных работ взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теплострой" (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РН-Сервис Рязань" (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) неустойку за неисполнение судебного акта со дня, следующего за истечением трёх рабочих дней с момента вступления решения в законную силу по день фактического выполнения в размере 1 000 руб. за каждый день.  

Решение

 может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.В. Афанасьева