АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-38368/23-61-299

г. Москва

04 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 июня 2023 года Полный текст решения изготовлен 04 июля 2023 года 

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Орловой Н.В., при ведении протокола секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (394036, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,  ГОРОД ВОРОНЕЖ Г.О., ВОРОНЕЖ Г., ВОРОНЕЖ Г., НИКИТИНСКАЯ УЛ., Д. 5,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.01.2007, ИНН: 

<

***>,  КПП: 366601001)  

к ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ" (127006, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 

<

***>, КПП:  770701001,)  

об обязании провести работы по компенсационному лесовосстановлению  

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" (121059, 

<

...>, ЭТ 10/КОМНАТА 6, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 08.07.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001)  

при участии: от истца – ФИО2 по доверенности от 9 января 2023 г. № 64-11/6 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 16 мая 2022 г. № Д-162  от третьего лица – не явилось, извещено.  

УСТАНОВИЛ:

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" об обязании  произвести компенсационное лесовосстановление.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2023 к участию в  деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  

относительно предмета спора, привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ".  

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени, дате и месте  проведения судебного заседания по делу в соответствии со ст.ст. 121, 122 АПК РФ,  в суд не явилось, доказательств уважительности причин неявки не представило, в  связи с чем судебное заседание проведено в его отсутствие.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования  по доводам иска.  

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных исковых  требований возражал по доводам представленного в порядке ст. 131 АПК РФ  отзыва на иск.  

Суд, рассмотрев исковые требования, заслушав мнение лиц, участвующих в  деле, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит  к выводу о том, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению,  исходя из следующего.  

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что 19.09.2019  года между управлением лесного хозяйства Воронежской области и  Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» заключен  договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации  линейных объектов № 82.  

Лесной участок площадью 1 125 кв.м., предоставленный в аренду по  договору, имеет местоположение: Воронежская область, Павловский район,  Павловское Лесничество, Павловское участковое лесничество, урочище  «Куцевалово», квартал 10, часть выдела 1 с кадастровым номером  36:20:6000015:185.  

Договор зарегистрирован 09.04.2020. 

Согласно подп. "л" п. 3.4 договора, арендатор принял на себя обязательства по  воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством  Российской Федерации и проектом освоения лесов.  

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 63.1 ЛК РФ (в редакции, действовавшей на  момент заключения договора аренды) лица, использующие леса в соответствии со  ст.ст. 43-46 настоящего Кодекса, обязаны выполнить работы по  лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего  субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных  лесных насаждений, в том числе при создании охранных зон, предназначенных для  обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для  эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому  изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, линейных  объектов, не позднее чем через один год после рубки лесных насаждений в  соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в  порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Лицо, обратившееся с ходатайством или заявлением об изменении целевого  назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда  в земли иных категорий, за исключением случаев перевода земель лесного фонда в  земли особо охраняемых территорий и объектов, обязано не позднее чем через один  год после изменения вида разрешенного использования земельного участка  выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах  территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади,  равной площади такого земельного участка, в соответствии с проектом  

лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.  

Согласно ст. 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЭ «О внесении  изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные  законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения  линейных объектов» предоставление земельных участков в целях размещения  линейных объектов федерального, регионального и местного значения  осуществляется в соответствии с утвержденными документами территориального  планирования и (или) документацией по планировке территории независимо от  принадлежности таких земельных участков к той или иной категории земель, за  исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом не допускается  размещение таких линейных объектов в границах определенных земель, зон, на  определенной территории.  

Одновременно с регистрацией права лица, которому предоставлен земельный  участок, указанный в ч. 1 настоящей статьи, в Единый государственный реестр  недвижимости вносятся сведения о принадлежности такого земельного участка к  категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,  телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,  земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, за  исключением случаев, если такой земельный участок отнесен к категории земель  населенных пунктов. При этом принятие решения о переводе земельного участка из  одной категории земель в другую категорию или об отнесении земельного участка  к определенной категории земель не требуется.  

В соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 07.05.2019 № 566  «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или  лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со ст.ст. 43-46 ЛК  РФ, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении  целевого значения лесного участка», лица, осуществляющие рубку лесных  насаждений, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или  лесоразведению на землях, указанных в п. 3 настоящих Правил, в границах  территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади,  равной площади вырубленных лесных насаждений, не позднее чем рез один год со  дня окончания срока действия лесной декларации, предусмотренной ст. 26 ЛК РФ,  в соответствии с которой осуществлена рубка лесных насаждений.  

Как указывает истец, заявление о намерении выполнить работы по  лесовосстановлению в управление не поступало, а установленные законом  обязательства по компенсационному лесовосстановлению в объеме 1 125 кв.м.  ответчиком не исполнены, что явилось основанием для обращения истца с  настоящим иском в суд.  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать  обстоятельства своих требований или возражений.  

В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться в  арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и  законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным  кодексом Российской Федерации, самостоятельно определив способы их судебной  защиты.  

Согласно ст. 11 ГК РФ, защита нарушенных или оспоренных граждански прав  осуществляется в судебном порядке с использованием способов защиты,  предусмотренных ст. 12 ГК РФ, либо иными способами, установленными законом.  

Как следует из заявленных требований, истцом избран способ защиты –  присуждение к исполнению обязанности в натуре.  

Способ защиты права должен соответствовать характеру его нарушения и  обеспечивать возможность восстановления нарушенных прав.  

По смыслу ст. 12 ГК РФ, устанавливающей такой способ защиты права как  присуждение в судебном порядке к исполнению обязанности в натуре, в предмет  доказывания по данному спору входят следующие обстоятельства: наличие у  ответчика обязанности, о понуждении к исполнению которой заявлен иск; реальная  возможность исполнения ответчиком этой обязанности; отказ ответчика от  исполнения установленной обязанности.  

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить  действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового  обязательства.  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее -  Государственная компания) является некоммерческой организацией, не имеющей  членства и созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в  целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере  дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе  доверительного управления (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ  «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

Учредителем Государственной компании выступает Российская Федерация.  Права и обязанности учредителя Государственной компании осуществляет от  имени Российской Федерации Правительство Российской Федерации или  уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган  исполнительной власти (п.7 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ).  

Деятельность Государственной компании регулируется Федеральным законом  от 17.07.2009 № 145-ФЗ, другими федеральными законами, принятыми в  соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской  Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными  правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего  функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому  регулированию в сфере транспорта (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 №  145-ФЗ).  

Согласно п. 1., п. 2 ст. 33 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ  Государственная компания вправе выступать заказчиком работ по строительству  автомобильных дорог на основании программы деятельности Государственной  компании на долгосрочный период, утвержденной Правительством Российской  Федерации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 24 ЛК РФ, использование лесов осуществляется с  предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без  изъятия лесных ресурсов. Лесные участки, находящиеся в государственной или  муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное  (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в  аренду, безвозмездное пользование. Предоставление гражданам, юридическим  лицам в аренду лесных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с ЛК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 72 ЛК РФ, по договору аренды лесного участка,  находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель  предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей,  

предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов является одним из видов использования лесов (ч. 1 ст. 25 ЛК  РФ).  

На основании ст. 24 ЛК РФ, использование лесов осуществляется с  предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без  установления сервитута, публичного сервитута, изъятием или без изъятия лесных  ресурсов.  

В силу ч. 1 ст. 45 ЛК РФ, использование лесов для строительства,  реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии  со ст. 21 ЛК РФ.  

Пунктом 4 ч. 1 ст. 21 ЛК РФ, определено, что на землях лесного фонда  допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных  с созданием лесной инфраструктуры, для использования линий электропередач и  других линейных объектов.  

Федеральным законом от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в  Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и  лесоразведения», вступившим в силу с 01.01.2019, Лесной кодекс Российской  Федерации дополнен ст. 63.1, в силу ч. 1 лица, использующие леса в соответствии  со ст.ст. 43-46 настоящего Кодекса, обязаны обеспечить лесовосстановление или  лесоразведение на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в  том числе при установлении или изменении зон с особыми условиями  использования территорий, предусмотренных ст. 21 настоящего Кодекса.  

В соответствии со ст. 63.1 ЛК РФ, если иное не предусмотрено настоящей  статьей, лица, использующие леса в соответствии со ст. 43-46 настоящего Кодекса,  обязаны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной  площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при установлении или  изменении зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренных  ст. 21 настоящего Кодекса. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, лица, в  интересах которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных  категорий, в том числе без принятия решения о переводе земельных участков из  состава земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны обеспечить  лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади лесных  земель, находящихся на таком земельном участке, исключаемом из состава земель  лесного фонда. Лесовосстановление или лесоразведение, проводимое в  соответствии с ч.ч. 1 и 2 настоящей статьи на землях лесного фонда,  осуществляется в субъекте Российской Федерации, на территории которого  проведена рубка лесных насаждений или осуществлен перевод земель лесного  фонда в земли иных категорий, в том числе без принятия решения о переводе  земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, либо  по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  на территориях иных субъектов Российской Федерации, определенных таким  федеральным органом исполнительной власти.  

Определение лесных земель установлено ч. 2 ст. 6.1 ЛК РФ, так к лесным  землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные  для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).  

В соответствии с договором аренды лесного участка для строительства,  реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 82 от 19.09.2019, Управление  лесного хозяйства Воронежской области передало Государственной компании на  

срок 49 лет лесной участок общей площадью 1 125 кв.м. с кадастровым номером  36:20:6000015:185.  

Согласно условиям договора, на Государственную компанию как арендатора  не возлагалось обязанностей по проведению работ по лесовосстановлению.  

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на  долгосрочный период (2010-2024 г.г.), утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в период 2016-2019  г.г. осуществлялись мероприятия по реализации проекта: «Строительство и  реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,  Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей  эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы  через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 -  км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область» (Муниципальные  образования Воронежской области: Бобровский район, Павловский район и  Верхнемамонский район).  

Между Государственной компанией и ООО «Транстроймеханизация»  26.12.2016 заключено долгосрочное инвестиционное соглашение № ДИП-2016- 1483 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию  на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,  Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с.  Лосево и г. Павловск), Воронежская область.  

ООО «Транстроймеханизация» на основании указанного Соглашения,  разрешения на строительство, выданного застройщику - Государственной  компании, от 03.05.2017 № 36-000-028-2017, проектной документации, получившей  положительное заключение государственной экспертизы № 1715-14/ГГЭ-9545/04 от  30.12.2014 выполняло работы по строительству участка автомобильной дороги М-4  «Дон».  

Статьей 2.5 соглашения предусмотрено, что подготовка территории  строительства, в том числе вырубка леса, а также получение необходимого (-ых)  разрешения (-ий) (в части данных работ), реализация необходимых  природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства  относится к ответственности исполнителя - ООО «Трансстроймеханизация».  

Пункт 3 ст. 2.5 соглашения устанавливает обязательства сторон по принятию  необходимых мер к тому, чтобы исполнитель мог получить доступ к земельным  участкам, на которых необходимо осуществление мероприятий по подготовке  территории строительства.  

Так, Государственной компанией с Управлением лесного хозяйства  Воронежской области заключен договор аренды от 19.09.2019 № 81 лесного  участка, необходимого для строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» - от  Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке  км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), на котором ООО  «Трансстроймеханизация» в соответствии с условиями соглашения и проектной  документацией осуществляла рубку лесных насаждений.  

На переданном Государственной компании в 2019 в рамках договора аренды  от 19.09.2019 лесном участке с кадастровым номером 36:20:6000015:185, леса не  располагались, работы по рубке лесных насаждений проводились в рамках  подготовительных работ по строительству объекта в 2018 году до вступления в  силу Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в  Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и  лесоразведения».  

Факт рубки лесных насаждений в 2018 году подтверждается актом  освидетельствования скрытых работ от 19.06.2019 № 21-л, в соответствии с  которым рубка с трелевкой, корчевкой, погрузкой и транспортировкой на основной  дороге на арендованном участке осуществлялась в период с 01.05.2018 по  23.08.2018.  

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются в том числе и лицом,  осуществляющим строительный контроль в соответствии с договором от 29.07.2016   № ДС-2016-766 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при  проведении подрядных работ на объекте: «Строительство и реконструкция  автомобильной дороги М-4 "Дон” - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,  Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на  платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,  Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с.  Лосеве и г. Павловск), Воронежская область» - ООО «Автодор-Инжиниринг».  

На основании изложенного, оснований для возложения на ответчика  обязанности по компенсационному лесовосстановлению не имеется.  

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии  со ст. 110 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121,  123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

 Судья Н.В. Орлова