РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-167534/23-110-1360

г. Москва

04 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2024 года 

Решение в полном объеме изготовлено 04 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СК ФОРС ГРУПП" (142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИДНОЕ ГОРОД, БЕРЕЗОВАЯ 

<

...>, КОМНАТА 1, ОГРН: 

<

***>) к Федеральному государственному казенному учреждению "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 100 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" (119192, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 9 640 174,63 руб.,

третье лицо : общество с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" (141607, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИН ГОРОД, МОСКОВСКАЯ 

<

...>, ОФИС 401, ОГРН: 

<

***>)

при участии:

от истца –ФИО1 по дов.  от 21.06.2023 ,

от ответчика-Косых  Т.В. по дов.  от 01.02.2024.

от третьего лица – не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СК ФОРС ГРУПП" обратилось с иском к  Федеральному государственному казенному учреждению "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 100 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" о взыскании 9 460 174,63 руб. задолженности по государственному контракту ИГК 17729546880210000270 №2128 от 22.11.2021.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные знания, тогда как в данном случае специальных знаний для разрешения спора не требуется.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 22 ноября 2021 г. между обществом с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" и  Федеральным государственным казенным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 100 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» был заключен Государственный контракт ИГК 17729546880210000270 №2128 на Капитальный ремонт здания пожарного депо, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, село Усово, «ФИО2 (пожарное депо).

30 марта 2023г. Ответчик направил  обществу с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" односторонний отказ от исполнения контракта от 30 марта 2023г. №413-365-108. В качестве обоснования одностороннего отказа Ответчик указывал, что Подрядчик не исполнил всех обязательств по контракту до 27 марта 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" не согласился с данным решением и требовал его отменить. Однако, Ответчик это требование не удовлетворили и Контракт был расторгнут.

Между тем, до расторжения Контракта, ООО "КЛИНСТРОЙСИТИ" была выполнена часть работ по Контракту, был сформирован и передан Ответчику комплект исполнительной документации, а также КС-2 и КС-3 на выполненные объемы работы.

Кроме того, по согласованию с Ответчиком, Обществом с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" была проведена экспертиза с привлечением экспертной организации, с целью определения стоимости выполненного объема работ в соответствии с ПП 1315. Результаты данной экспертизы были предоставлены Ответчику.

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" неоднократно письменно сообщало Ответчику, о том, что Подрядчиком выполнены объемы работ, которые могут быть и должны быть приняты Ответчиком.

Это обстоятельство подтверждается письмами о направлении в адрес Ответчика Актов КС-2 и КС-3 и комплекта технической документации на выполненные объемы работ на сумму 9 460 174 (девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто семьдесят четыре) рубля 63 копейки.

В том числе: Справкой от 27 января 2023г., предоставленной Ответчиком, письмами и реестрами от 14 февраля 2023г, от 25 апреля 2023г., от 27 апреля 2023г., от 19 мая 2023г.

В соответствии с п. 5.4. Контракта, приемка работ производится Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ (части работ) (форма №КС-2). Вместе с Актом о приемке выполненных работ (части работ) (форма №КС-2) Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, необходимую для приемки работ (части работ) (на предъявляемые к приемке объемы выполненных работ):

справки о стоимости выполненных работ (части работ) и затрат (форма КС-3),

акты приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма 0504103) при необходимости,

акты об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), в случае проведения демонтажных работ при необходимости,

акты освидетельствования скрытых работ,

акты входного контроля, исполнительные схемы, паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, журнал производства работ и другие необходимые документы.

В соответствии с п. 5.5. Контракта, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов осуществляет проверку результатов работ и при отсутствии замечаний подписывает представленный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), или в этот же срок, при обнаружении недостатков в работе, направляет запрос о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ и (или) мотивированный отказ от приёмки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их выполнения.

Ответчик нарушил вышеуказанные пункты Контракта и не организовал приемку работ, а также не ответил ООО "КЛИНСТРОЙСИТИ" на требование, подготовиться к приемке части выполненных работ и провести приемку работ с участием представителей Подрядчика.

Несмотря на неоднократные обращения ООО "КЛИНСТРОЙСИТИ", приемка Ответчиком организованна и произведена не была, ответа на данные обращения Ответчик также не предоставил.

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику". Однако до настоящего момента Заказчик на приемку, которую он проводил три раза, Подрядчика не пригласил, работы не принял и задолженность за выполненные работы Подрядчику не оплатил. При этом, основания отказа от приемки не связаны с качеством и количеством выполненных работ, а базируются на формальных причинах, не соответствующих действительности.

Согласно условиям, указанным в Контракте, ООО "КЛИНСТРОЙСИТИ" приняла на себя обязательства по проведению ремонта здания Заказчика и исполнила их. В то же время Заказчик своих обязательств по приемке работ не исполнил, хотя со стороны Подрядчика все сдаваемые работы были выполнены полностью и надлежащего качества.

Контракт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, регулируется главной 37 «Подряд» параграфом 5 «Подрядные работы для государственных нужд» Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 763 «Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд» п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации «По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее -государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.»

В соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ в пункте 8 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда (Информационное письмо от 24.01.2000 № 51), в соответствии с которыми основанием для возникновения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ Заказчику.

10 мая 2023г. Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНСТРОЙСИТИ" уступило права требования по вышеуказанному Государственному контракту Обществу с ограниченной ответственностью "СК ФОРС ГРУПП", (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на основании Договора уступки права требования (цессии) №2 от 10 мая 2023 г.

На основании выше указанного, ООО "СК ФОРС ГРУПП" направил Заказчику досудебную претензию, в которой требовал выплатить ему сумму задолженности в размере 9 460 174 (девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто семьдесят четыре) рубля 63 копейки, в течении 10 дней с момента получения настоящей претензии, которая оставлена без ответа.

Таким образом, у Заказчика перед Истцом образовалась задолженность в размере 9 460 174 (девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто семьдесят четыре) рубля 63 копейки.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, оспаривая иск ответчик указал, что в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном   аукционе   от   09.11.2021   №   0373100065421000004   заключен государственный контракт от 22.11.2021 № 2128 (далее - Контракт) с единственным участником закупки - Обществом с ограниченной ответственностью «КЛИНСТРОЙСИТИ» (далее - Подрядчик) по начальной (максимальной) цене контракта - 60 058 469 (шестьдесят миллионов пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 45 копеек. ИКЗ 211772954688077290100100250084399243.

Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по Контракту ООО «КЛИНСТРОЙСИТИ» обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

В соответствии с п. 4.1 Контракта, срок исполнения обязательств по капитальному ремонту здания до 01.12.2022.

В соответствии с п. 3.1. Контракта Подрядчик -ООО «КлинСтройСити» вправе привлекать к выполнению настоящего контракта субподрядчиков только после предварительного согласования с Заказчиком;

В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции Заказчика, Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков при выполнении своих обязательств в соответствии с гражданским законодательством;

Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта.

02.07.2022 заключен договор подряда № 11/07-2022 между ООО «КлинСтройСити» и ООО «СК Форс Групп» согласно которого Субподрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту здания ответчика, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский Муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, село Усово, «Огарево (пожарное депо)».

По состоянию на 10.04.2023 взятые Подрядчиком обязательства не исполнены.

По состоянию на 01.12.2022 Подрядчиком выполнены и сданы работы по капитальному ремонту, которые оплачены 06.04.2022 на сумму 2 044 569 (два миллиона сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 87 копеек:

-выполнены демонтажные работы первой части здания, переданной под капитальный ремонт на сумму 694 880,60 руб.;

-утилизация на сумму 173 804,40 руб.;

-проведена работа по установке окон первой части здания, переданной под капитальный ремонт на сумму 1 175 884,87 руб.

Контракт не исполнен на сумму 58 013 899 (пятьдесят восемь миллионов тринадцать тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 58 копеек.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и подпункту «ж» пункта 3.3. и пункту 12.2. Контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Учитывая, что по состоянию на 10.04.2023 года Подрядчик не исполнил взятых обязательств по Контракту, ООО «КлинСтройСити» допущено существенное нарушение условий контракта.

Заказчиком, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 100 МЧС России» на основании пункта 3 статьи 708, пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта «ж» пункта 3.3. и пункта 12.2. Контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Во исполнение требования части 12 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта было размещено в ЕИС 30.03.2023, Подрядчик письмом № ИВ-365-108 уведомлен через Единую информационную систему в сфере закупок о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.04.2023 г. решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу.

Согласно заключению от 12.09.2023 установлено, что работы выполнены с нарушением строительных норм и имеется необходимость в устранении недостатков по выполненным работам.

Общий объем выполненных работ и не принятых Заказчиком составил 4 556 112, 79 руб.

В связи с чем оснований для оплаты выполненных работ, не имеется.

В соответствии с пунктом 13.3 Контракта, Подрядчик не в праве передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьим лицам, за исключением правопреемника Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

До момента расторжения Контракта дополнительное соглашение о передаче прав и обязанностей по Контракту от ООО «КлинСтройСити» в ООО «СК ФОРС ГРУПП» с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 100 МЧС России» не заключалось.

В соответствии со ст. 706 Гражданского кодекса РФ генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Таким образом,  истец не представил  достаточных доказательств выполнения работ на заявленную сумму.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст  82, 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства  о назначении судебной  экспертизы

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко