АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6264/2019

г. Чебоксары

22 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 15.10.2020.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Филиппова Б.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стальской К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428000, 

<

...>,

к  обществу с ограниченной ответственностью "Юман",  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428022, 

<

...>,

о взыскании 20393 руб. 32 коп. и обязании выполнить работы,

и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью "Юман",  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428022, 

<

...>,

к Министерству здравоохранения Чувашской Республики, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428000, 

<

...>,

о взыскании 208737 руб. 63 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики;

казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,

общество с ограниченной ответственностью "СТЭП", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 429500, 

<

...>,

при участии: 

от истца ФИО1 по доверенности от 08.11.2019,

от ответчика ФИО2 по доверенности от 01.04.2019, ФИО3  (генерального директора),

от третьего лица бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики- ФИО4 по доверенности от 14.05.2020 № 4,

эксперта ФИО5,

установил:

Министерство здравоохранения Чувашской Республики (далее – Министерство) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к  обществу с ограниченной ответственностью "Юман" (далее – Общество), содержащим следующие требования:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юман" в рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" в течение 15 календарных дней после вступления решения суда в законную силу:

- заменить аварийный электрический котел ЭВП - 6 на исправный, не бывший в эксплуатации, с проведением испытания его работоспособности;

- сдать результат работы по контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.

2.Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юман" устранить последствия аварии от 05.10.2018 и 20.02.2019 на объекте "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" по государственному контракту от 05.06.2018 в течение 15 календарных дней после вступления решения суда в законную силу согласно перечню работ, указанному в акте осмотра фельдшерско-акушерского пункта в с. Чемурша Чебоксарского района от 26.02.2019, направленного в адрес ООО "ЮМАН" письмом Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 03.03.2019 № 08/17-2582.

3.Взыскать с ООО "Юман" в пользу Министерства здравоохранения Чувашской Республики неустойку (пени) за период с 21.08.2018 по 11.11.2019 в сумме 20 393,32 руб. и до приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Исковые требования основаны на нормах статей 309, 310, 702, 718 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ в полном объеме в рамках государственного контракта по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики".

Определением от 10.06.2019 арбитражный суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – Больница) и казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – Учреждение).

В рамках дела № А79-6328/2019 общество с ограниченной ответственностью "Юман" обратилось в арбитражный суд с иском к Министерству здравоохранения Чувашской Республики о взыскании 208 737 руб. 63 коп., в том числе 182 695 руб. задолженности и 26 042 руб. 63 коп. неустойки по государственному контракту от 05.06.2018 № 10-22/315.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением истцом своих обязательств по оплате работ, выполненных ответчиком в рамках государственного контракта от 05.06.2018.

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 06.06.2019 данное исковое заявление принято к производству в упрощенном порядке.

Определением суда от 04.07.2019 в соответствии с частью 2 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело № А79-6264/2019 объединено с делом № А79-6238/2019 в одно производство, присвоен единый номер № А79-6264/2019.

Определением суда от 25.12.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечено общество с ограниченной ответственностью "СТЭП".

Определением суда от 12.03.2020 по делу № А79-6264/2019 назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО "Стройнадзор" ФИО5

01.06.2020 через электронную систему подачи документов "Мой арбитр" от эксперта поступило ходатайство о приостановлении деятельности объекта исследования для проведения экспертизы, об обеспечении вскрытия пола для экспертного исследования и о продлении срока экспертного исследования.

Определением суда от 07.07.2020 срок производства экспертизы продлен до 26.08.2020. Обществу с ограниченной ответственностью "СтройНадзор" разрешено вскрытие полов на объекте "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики", с последующей компенсацией затрат эксперта. 

При этом судом определено обществу с ограниченной ответственностью "Юман" произвести восстановительные работы конструкций пола в каждом помещении фельдшерско-акушерского пункта в с. Чемурша Чебоксарского района после проведенного экспертного исследования (срок производства восстановительных работ – в течение 5 рабочих дней с даты завершения экспертом работ по вскрытию пола и их исследованию).

Определением суда от 02.09.2020 срок производства экспертизы продлен до 10.09.2020.

17.09.2020 эксперт ФИО5 представил экспертное заключение.

В судебном заседании представитель истца заявил об уточнении исковых требований, просил:

1) Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юман" в рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу:

- заменить аварийный электрический котел ЭВП-6 на исправный, не бывший в эксплуатации, с проведением испытания его работоспособности;

- устранить неисправности в монтаже системы безопасности (установить расширительный бак на трубопровод подачи теплоносителя к электронагревателю);

- устранить несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации и дефекты выполненных работ, указанные в отчете по экспертизе, выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5 (заменить полностью во всех помещениях керамогранитные плиты с размера 300x300 на 400x400, уложить линолеум сплошным приклеиванием на клей, уложить утеплитель толщиной 200 мм, установить поперечные бруски и фиброцементные плиты Latonit);

- укрепить здание методом добавления деревянного каркаса в конструкцию самонаборных плит перекрытия пола и устройства стяжек на отметке -0,394 и 0,000, согласно перечню работ, указанному в отчете по экспертизе, выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5;

- сдать результат работы по контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

2) Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу Министерства здравоохранения Чувашской Республики 31 434 руб. 18 коп. пени за период с 21.08.2018 по 08.10.2020 и далее по день приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Уточнение иска судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители ответчика исковые требования не признали, встречные требования поддержали. Не соглашаясь с выводами эксперта ФИО5, заявили ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы.

Представители истца и третьего лица Больницы просили отказать в удовлетворении ходатайства ответчика.

Ходатайство ответчика о назначении по делу повторной экспертизы судом рассмотрено и отклонено, о чем принято протокольное определение.

В соответствии со статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц Учреждения и ООО "СТЭП".

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Между Министерством (госзаказчик) и Обществом (подрядчик) по итогам электронного аукциона заключен государственный контракт от 05.06.2018 № 10-22/315 (далее – Контракт), по условиям которого госзаказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики", включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2018 год в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01.12.2017 № 71 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" (т.2, л.д.10-17).

Согласно пункту 2.1. Контракта работы выполняются в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием на выполнение работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики (приложение № 1), являющимся его неотъемлемой частью, и проектно-сметной документацией, переработанной ОАО "ПИ "Чувашгражданпроект" и пересчитанной сметной документацией в 2018 году (обозначение 4204-2017) (далее – "Проект").

В пункте 1.3. Контракта стороны указали следующие сроки выполнения работ: начало производства работ - не позднее даты заключения Контракта; окончание производства работ - не позднее 20.08.2018.

В соответствии с пунктом 3.1. Контракта стоимость работ составляет 3 650 080 руб. в соответствии с протоколом аукциона от 21.05.2018 № 2, без НДС (НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощённой системы налогообложения  в соответствии со статьёй 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 3.2. Контакта работы оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования и за счёт денежных средств республиканского бюджета Чувашской Республики. За выполненную работу согласно Контракту госзаказчик уплачивает подрядчику 3 650 080 руб. в соответствии с протоколом аукциона от 21.05.2018 № 2, без НДС и утвержденным сторонами протоколом соглашения о Контрактной цене (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Авансирование работ не производится. 

Пунктом 3.3. Контракта предусмотрено, что оплата производится поэтапно и на расчетный счет подрядчика безналичным расчетом платежным поручением, в течение 15 рабочих дней после сдачи подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, оформленных актом (актами)  приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкой (справок)  о стоимости работ и затрат по форме КС-3, с приложением счёт-фактуры, проверенным и согласованным уполномоченным представителем Госзаказчика. 

В соответствии с пунктом 3.4. Контракта оплата за выполненные работы в период строительства производится в пределах 95% от стоимости работ, указанных в предмете Контракта. Окончательный расчет (оставшиеся 5% стоимости) производится после завершения строительства, на основании подписанных сторонами акта (актами) приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкой (справок) о стоимости работ и затрат по форме КС-3, акта приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11, с приложением счет-фактуры подрядчика и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится госзаказчиком  в течение 15 рабочих дней с момента представления подрядчиком документов, указанных в п. 3.4 настоящего Контракта (пункт 3.5. Контракта).

Согласно пункту 3.6. Контракта стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.

Работы, выполненные с отступлением от проекта, дополнительные работы, не согласованные госзаказчиком, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат (пункт 3.7. Контракта).

Согласно подписанным сторонами актам выполненных работ по форме КС-2 от 02.07.2018 № 1, от 25.07.2018 № 2, от 20.08.2018 № 3 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат от 09.08.2018 № 1, от 10.08.2018 № 2, от 20.08.2018 № 3 подрядчик выполнил, а заказчик принял работы на сумму 3467385 руб. (т.2, л.д.18-45).

Кроме того, подрядчик сопроводительным письмом от 21.08.2018 № 75 направил заказчику в одностороннем порядке подписанные акт выполненных работ по форме КС-2 от 20.08.2018 № 4 и справку на сумму о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2018 № 4 на сумму 182695 руб. (т.2, л.д.46-48, 58).

Впоследствии, подрядчик указал на названных акте и справке, что заказчик отказался от подписания указанных документов.

По платежным поручениям от 22.08.2018 №№ 232231, 232233, от 03.10.2018 № 276981 заказчик оплатил подрядчику 3467385 руб. за выполненные в рамках Контракта работы (т.2, л.д.49-51).

Письмом от 20.08.2018 № 71 подрядчик известил заказчика о завершении работ на объекте "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" и просил назначить комиссию для приемки выполненных работ (т.2, л.д.56).

Приказом Министерства от 22.08.2018 № 1101 была создана комиссия по приемке законченного строительством объекта, в состав которой включены в том числе представители Министерства, Общества и Больницы (т.2, л.д.59).

Акт приемки законченного строительством объекта Министерство и Больница не подписали (т.2, л.д.60-65).

Письмом от 09.10.2018 № 01-19/1569 Больница известила Министерство и Общество о том, что 05.10.2018 произошло затопление всех помещений фельдшерско-акушерского пункта, в результате чего произошло коробление дверных коробок, полов, разрушение гипсокартона на стенах, мебели, а также повреждено имущество. Подрядчик был уведомлен о затоплении и был приглашен на осмотр, но не явился (т.2, л.д.72).

11.10.2018 комиссией в составе представителей Министерства, Общества и Больницы был составлен акт оценки ущерба, согласно которому причиной залива помещений фельдшерско-акушерского пункта предположительно является срыв пробки фильтра тонкой очистки внутреннего холодного водоснабжения (т.2, л.д.73-74).

Письмом от 09.11.2018 № 01-19/1823 Больница уведомила Министерство о том, что после прорыва 05.10.2018 внутреннего водопровода Общество лишь 09.11.2018 подняло напольное покрытие (линолеум) в кабинетах, при этом, в ходе визуального осмотра обнаружено повреждение плит ОСП напольных панелей, их деформация. По этим причинам Больница сообщила о невозможности приемки здания в эксплуатацию (т.1, л.д.28).

Согласно протоколу от 15.11.2018 на выездном совещании с участием представителей Министерства, Общества и Больницы принята к сведению информация ООО "ЮМАН" о выполнении мер по устранению последствий аварии и их завершении в срок до 25.12.2018 (т.1, л.д.29-30).

25.12.2018 представителями Больницы, Общества и Учреждения составлен акт вскрытия и замены конструкции пола фельдшерско-акушерского пункта. В акте указано, что на объекте приняты меры по ликвидации последствий затопления, в том числе: демонтаж плинтусов и линолеума, вскрытие конструкции пола, демонтаж утеплителя в конструкции пола, смена лаг из бруса, обработка конструкции пола антисептическими составами, устройство пароизоляции в 2 слоя, укладка нового утеплителя в конструкции пола, замена обрешетки конструкции пола, замена основания покрытия пола из ОСП плит, устройство покрытия пола из линолеума, устройство плинтусов, покраска стен помещений объекта (т.2, л.д.75).

Согласно протоколу выездного совещания в с. Чемурша Чебоксарского района от 27.12.2018 с участием представителей Министерства, Общества и Больницы предписано принять срочные меры по устранению последствий произошедшей аварии и в срок до 18.01.2019 заменить неисправный электрокотел, все влажные и промокшие элементы внутри полового покрытия (лаги), а также утеплитель (базальтовую плиту) под полами санузла и помещения уборочного инвентаря, фасады мебели и представить подписанные акты по форме КС-14 (т.1, л.д.32).

Письмом от 11.01.2019 № 08/17-199 Министерство уведомляет Общество о том, что работы по Контракту не завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию не оформлено, в связи с чем просит срочно (не позднее 31.01.2019) завершить работы и оплатить неустойку за просрочку (т.1, л.д.33-34).

Из материалов дела и пояснений участвующих в деле лиц следует, что 20.02.2019 произошло повторное затопление.

Впоследствии, сторонами и Больницей велась переписка, в которой Министерство настаивало на необходимости полного устранения Обществом выявленных на объекте недостатков работ, тогда как Общество ссылалось на отсутствие свой вины в возникновении этих недостатков, указывая на то, что они носят эксплуатационный характер (т.2, л.д.77-81, 153-158).

Письмом от 03.03.2019 № 08/17-2582 Министерство вновь сообщает Обществу, что фельдшерско-акушерский пункт не введен в эксплуатацию, так как в ходе осмотра на объекте выявлены недостатки и дефекты и требует их устранить до 07.03.2019 (т.1, л.д.38).

Отказ Общества от устранения недостатков работ и отказ Министерства от оплаты выполненных работ послужили основанием для предъявления исков, рассматриваемых по настоящему делу.

Проанализировав условия Контракта, суд считает, что возникшие между сторонами правоотношения регулируются нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44- ФЗ) во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) о подряде.

На основании пункта 1 статьи 702 Кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740 названного Кодекса), проектные и изыскательские работы (статья 758 названного Кодекса), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования (часть 2 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

По смыслу приведенных норм права, определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком. Приемка выполненных работ осуществляется с учетом акта выполненных работ и является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчика о готовности его к сдаче.

Свой отказ от приемки выполненных работ истец мотивирует тем, что работы выполнены ответчиком с отступлением от проекта и некачественно.

Ответчик возразил против доводов истца.

Для выяснения вопроса о правомерности отказа заказчика от приемки работ по указанным им причинам судом назначена судебная экспертиза по следующим вопросам:

1. Какова причина возникновения аварийной ситуации 05.10.2018 и 20.02.2019 в ходе эксплуатации системы водоснабжения "Модульного фельдшерско-акушерского пункта" в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики?

2. Соответствует ли фактически выполненная работа по устройству пола "Модульного фельдшерско-акушерского пункта" в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики государственному контракту от 05.06.2018 № 10-22/315, в том числе техническому заданию и проектно-сметной документации?

3. В случае несоответствия фактически выполненной работы по устройству пола государственному контракту от 05.06.2018 № 10-22/315 определить перечень (виды), объем и стоимость работ и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков.

4. Соответствует ли установленный подрядчиком и принятый заказчиком электрический котел требованиям проектной документации к государственному контракту от 05.06.2018 № 10-22/315? В случае его неисправности, определить причины такой неисправности.

Согласно отчету по экспертизе от 15.09.2020, выполненному экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5, последний пришел к следующим выводам:

1) Определить причину возникновения аварийной ситуации 05.10.2018 и 20.02.2019 определить невозможно, т.к. в момент проведения экспертизы система водоснабжения находится в рабочем состоянии. Фильтр тонкой очистки, вышедший из строя во время аварийных ситуаций, в материалах дела отсутствует.

2) Устройство пола "Модульного фельдшерско-акушерского пункта" в селе Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики не соответствует условиям Контракта, в том числе техническому заданию и проектно-сметной документации.

3) Полы в Модульном фельдшерско-акушерском пункте, выполненные подрядной организацией, заменить на проектное решение фактически невозможно, так как согласно проектному решению весь каркас здания опирается на конструкцию пола и привести эту конструкцию в проектное решение без полного разбора здания до отметки -0,394 фактически невозможно. Стоимость работ по усилению конструкции пола для приведения конструкций в безопасное для эксплуатации состояние и определение перечня (видов), объемов и стоимости работ и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков: в ценах сентября 2017 года – 550702,87 руб., в том числе НДС, в ценах июня 2020 года составляет 684006,73 руб., в том числе НДС.

4) Электроводонагреватель ЭВП-6 соответствует требованиям проектной документации к Контракту. Электроводонагреватель неисправен. Одна из причин выхода из строя электроводонагревателя ЭВП-6 является неправильный монтаж системы безопасности, а именно, неверное место установки расширительного бака.

Таким образом, эксперт установил несоответствие выполненных ответчиком работ условиям Контракта.

Указанные выводы эксперта не вызывают у суда сомнений. Кроме того, эксперт явился в судебное заседание и дал исчерпывающие ответы на вопросы, имеющиеся у ответчика.

Доводы ответчика о небоснованности экспертного заключения, сделанные со ссылкой на рецензию этого заключения, выполненную по заказу ответчика ФИО6, суд отклоняет, поскольку указанные в рецензии сведения не опровергают выводов судебного эксперта.

Более того, сам ответчик не отрицает тот факт, что полы в фельдшерско-акушерском пункте выполнены не по проекту, размещенному в составе аукционной документации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По изложенным причинам суд не усмотрел наличия оснований, предусмотренных статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для назначения по делу повторной экспертизы.

Спецификой правоотношений, возникающих у заказчика и подрядчика в рамках Контракта, заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ, является то, что обязательства по такому Контракту, заключаемому по результатам аукциона, должны исполняться подрядчиком в строгом соответствии с тем проектом, который размещается в составе аукционной документации. 

Иной подход не позволит достигнуть той цели, которую преследует Закон № 44-ФЗ и предусмотренные им конкурентные способы размещения заказа, а именно, обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Следует также принять во внимание, что подрядчик в ходе исполнения Контракта не уведомил заказчика о том, что будет применена иная конструкция пола.

Пунктом 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 8 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен такой способ защиты нарушенного права как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее – Постановление № 7) разъяснено, что при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. 

Ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения тех обязательств, которые приведены в уточненном иске, тем более, что они направлены по существу на завершение исполнения Контракта.

С учетом изложенных обстоятельств требования истца об обязании ответчика в рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу:

- заменить аварийный электрический котел ЭВП-6 на исправный, не бывший в эксплуатации, с проведением испытания его работоспособности;

- устранить неисправности в монтаже системы безопасности (установить расширительный бак на трубопровод подачи теплоносителя к электронагревателю);

- устранить несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации и дефекты выполненных работ, указанные в отчете по экспертизе, выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5 (заменить полностью во всех помещениях керамогранитные плиты с размера 300x300 на 400x400, уложить линолеум сплошным приклеиванием на клей, уложить утеплитель толщиной 200 мм, установить поперечные бруски и фиброцементные плиты Latonit);

- укрепить здание методом добавления деревянного каркаса в конструкцию самонаборных плит перекрытия пола и устройства стяжек на отметке -0,394 и 0,000, согласно перечню работ, указанному в отчете по экспертизе, выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5;

- сдать результат работы по контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, 

являются законными, обоснованными  и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На основании пункта 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 6.4. Контракта в случае, просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, госзаказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком (пункт 6.5. Контракта).

Так как обязательства по Контакту подрядчиком не исполнены в полном объеме, требование заказчика о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ является обоснованным.

 Проверив представленный истцом расчет пеней за период с 21.08.2018 по 08.10.2020, суд находит его правильным, в связи с чем требование истца о взыскании пеней подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В пункте 65 Постановления № 7 разъяснено, что по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства. 

Следовательно, требование Министерства о взыскании пеней за просрочку выполнения предусмотренных Контрактом работ, начиная с 09.10.2020 по день фактического исполнения обязательств, также подлежит удовлетворению.

Довод ответчика о том, что срок исполнения обязательств по Контракту был нарушен по причине того, что под строительство объекта не сформирован земельный участок, суд отклоняет по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (пункт 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 разъяснено, что при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика.

Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий (пункт 1 статьи 750 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Действительно, письмом от 20.06.2018 № 41 Общество уведомило Министерство о том, что не проведены работы по межеванию земельного участка под строительство фельдшерско-акушерского пункта, но, при этом, не объяснено, как данное обстоятельство препятствует выполнению работ по Контракту (т.2, л.д.52).

Ссылки ответчика на публикации в средствах массовой информации новости об открытии и начале работы фельдшерско-акушерского пункта как на доказательства, подтверждающие надлежащее качество работ, также не могут быть приняты во внимание, поскольку в ходе рассмотрения настоящего дела установлено иное.

Встречное требование ответчика о взыскании долга за выполненные в рамках Контракта работы по односторонним акту выполненных работ по форме КС-2 от 20.08.2018 № 4 и справке на сумму о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2018 № 4 на сумму 182695 руб. и начисленной за указанный долг неустойки не подлежит удовлетворению, поскольку при рассмотрении дела судом установлено, что подрядчик не исполнил надлежащим образом своих обязательств по Контракту, в связи с чем на него возложена обязанность по их исполнению. То есть возражения Министерства против подписания акта и справки являются обоснованными.

Расходы третьего лица Больницы по оплате судебной экспертизы и уплаченную сторонами государственную пошлину суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дополнительные затраты эксперта, связанные с проведением работ по вскрытию полов для проведения экспертного исследования, в сумме 54624 руб. в силу части 6 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу экспертной организации ООО "СтройНадзор".

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

иск Министерства здравоохранения Чувашской Республики удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юман" в рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу:

- заменить аварийный электрический котел ЭВП-6 на исправный, не бывший в эксплуатации, с проведением испытания его работоспособности;

- устранить неисправности в монтаже системы безопасности (установить расширительный бак на трубопровод подачи теплоносителя к электронагревателю);

- устранить несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации и дефекты выполненных работ, указанные в отчете по экспертизе, выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5 (заменить полностью во всех помещениях керамогранитные плиты с размера 300x300 на 400x400, уложить линолеум сплошным приклеиванием на клей, уложить утеплитель толщиной 200 мм, установить поперечные бруски и фиброцементные плиты Latonit);

- укрепить здание методом добавления деревянного каркаса в конструкцию самонаборных плит перекрытия пола и устройства стяжек на отметке -0,394 и 0,000, согласно перечню работ, указанному в отчете по экспертизе, выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5;

- сдать результат работы по контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу Министерства здравоохранения Чувашской Республики 31 434 (Тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) руб. 18 коп. пени за период с 21.08.2018 по 08.10.2020. Начиная с 09.10.2020 по день приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией продолжить начисление и взыскание пеней.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью "Юман" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 28 000 (Двадцать восемь тысяч) руб. расходов на оплату судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтройНадзор" 54 624 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) руб. дополнительных затрат, связанных с выполнением судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в федеральный бюджет 8 000 (Восемь тысяч) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Б.Н. Филиппов