АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-13396/2018

г. Чебоксары

14 марта 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2019 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Трусова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, 

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

428004, 

<

...>,

к  закрытому акционерному обществу "Холдинговая компания "Голицын", 

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

429950, 

<

...>,

о устранении недостатков работ,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Автономного учреждения Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева" Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, 

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

428000, 

<

...>,

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2019 № 06/11-27 (сроком действия до 31.12.2019),

от ответчика – не было, уведомлен 21.01.2019,

от третьего лица – ФИО3 по доверенности от 04.03.2019 № 1 (сроком действия на один год),

установил:

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее – истец, Минспорта Чувашии) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Холдинговая компания "Голицын" (далее – ответчик, ЗАО "ХК "Голицын") о безвозмездном устранении недостатков работ.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по безвозмездному устранению недостатков работ, выполненных в рамках государственного контракта на строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г. Чебоксары от 26.12.2012 № 17 и основаны на статьях 723, 737, 754, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 27.11.2018 к участию в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлечено Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева" Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Представитель истца в судебном заседании ранее заявленные уточненные требования поддержал в полном объеме по изложенным в уточненном иске основаниям, уменьшив объем работ, необходимых для устранения недостатков, и заявив об увеличении до трех месяцев срок устранении недостатков работ.

Ответчик, явку в суд своего представителя не обеспечил, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, что подтверждается уведомлением отделения почтовой связи, направил в суд ходатайство об отложении судебного разбирательства, просил не рассматривать в отсутствие своего представителя. Отзыв по делу ответчиком не представлен.

Представитель третьего лица представил отзыв на исковое заявление, в котором указал на законность и обоснованность требований, заявленных истцом.

Представители истца и третьего лица возражали против удовлетворения ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства.

Выслушав мнения представителей явившихся лиц, руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд отклонил ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства как необоснованное. Данное заявление является четвертым с начала рассмотрения дела. Суд трижды переносил рассмотрение дела на иную дату. Требования суда о представлении отзыва на исковое заявление ответчиком не выполнено, доказательств принятия мер к урегулированию спора и невозможности обеспечения явки представителя в судебное заседание не представлено.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает измененные исковые требования, поскольку истец вправе производить данные распорядительные действия до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещал информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuvashia.arbitr.ru, и на сайте www.arbitr.ru в разделе "Картотека арбитражных дел".

В порядке статьи 121, 123, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, участвующего в деле.

Выслушав представителей явившихся сторон, изучив доказательства, представленные в материалы дела, суд установил следующее.

26.12.2012 между истцом (государственный заказчик) и ответчиком (генеральный подрядчик) заключен государственный контракт № 17 (далее контракт №17), по условиям которого истец обязался в установленный настоящим контрактом срок  выполнить работы на строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г. Чебоксары (далее Объект) и передать их ответчику, а ответчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с Законом Чувашской Республики от 15.03.2012 №10  "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и титулом стройки за счет ассигнований  на государственные капитальные вложения (пункт 1.1 контракта № 17).

Генеральный подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по строительству и обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями настоящего контракта, согласно техническому заданию (приложение      № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (пункт 1.3 контракта № 17).

Цена контракта согласована сторонами в разделе 2 контракта № 17.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в календарном плане, являющемся приложением № 2 к контракту № 17.

Раздел 5 контракта № 17 предусматривает обязанности генерального подрядчика.

Согласно пункту 5.2 контракта № 17 генеральный подрядчик обязан качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СПиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.

В соответствии с пунктом 5.3 генеральный подрядчик обязан обеспечить: 

-выполнение работ по настоящему контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 

- представление Застройщику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01.-85; 

- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет; 

- установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации; 

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 28.11.2017 по делу № А79-2650/2016 с Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики в пользу закрытого акционерного общества "Холдинговая компания "Голицын" взыскана сумму долга  311 159 007 (Триста одиннадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч семь) руб. 05 коп., 200 000 (Двести тысяч) руб. в возмещение уплаченной государственной пошлины, 625 050 (Шестьсот двадцать пять тысяч пятьдесят) руб. в возмещение  расходов, связанных с проведением  судебной экспертизы.

В ходе рассмотрения дела № А79-2650/2016 между сторонами возникли разногласия относительно объема и стоимости выполненных подрядчиком работ в рамках государственных контрактов на спорном объекте, судом по ходатайству ответчика по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено  экспертам ООО "Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы" ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7. 

На разрешение экспертов поставлены вопросы, касающиеся объема, стоимости и качества работ, выполненных истцом при строительстве ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г. Чебоксары на основании государственных контрактов № 17 от 26.12.2012, № 1 от 19.01.2015. 

В представленном в материалы дела № А79-2650/2016 экспертном заключении от 21.09.2017 № Э-0290/2017 экспертами ООО "Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы" сделаны выводы в рамках поставленных судом вопросов, в том числе представлена сводная таблица № 6-ГК17 объемов и стоимости некачественно выполненных фактических объемов работ в результате натурных исследований качественно выполненных работ на объекте экспертизы (стр. 132-143 экспертного заключения).

Гарантийным письмом от 16.11.2017 № 142 ЗАО "Холдинговая компания "Голицын" гарантировало устранение недостатков, указанных в таблице № 6-ГК17 экспертизы, в рамках своих гарантийных обязательств по государственному контракту от 26.12.2012 № 17.

21.11.2017 Минспортом Чувашии и ЗАО "Холдинговая компания "Голицын" был подписан график производства работ по устранению недостатков на Объекте. Срок выполнения всех работ по указанному графику определен - август 2018 года. Таким образом, ЗАО "ХК "Голицын" приняло на себя обязательство с определенным сроком исполнения, срок исполнения которого истек 31.08.2018.

В рамках настоящего дела Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Холдинговая компания "Голицын" о безвозмездном устранении недостатков работ.

04.09.2018 истцом направлена претензия № 06/11-2738 о безвозмездном устранении недостатков, обнаруженных по результатам проведенной экспертизы в рамках дела № А79-2650/2016.

Неудовлетворение ответчиком предъявленного требования явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в сиу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., ибо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

В сиу статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). 

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования ибо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Согласно пункту 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привеченными им третьими лицами.

Между тем, работы по строительству Объекта приняты по акту приемки законченного строительством объекта от 25.05.2015.

Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию выдано администрацией г. Чебоксары от 03.06.2015 за № 21 -01-46С-2015.

Судом установлено, материалами дела подтверждено некачественное выполнение ответчиком следующих работ:

1. в общем зале автостоянки на отметке -7,000:

- смонтировать сигнализаторы оксида углерода СОУ-1 в количестве 42 шт., произвести пусконаладочные работы данной системы;

2. устройство покрытий над автостоянкой (в том числе устройство отмосток вокруг объекта) и на открытом балконе над главным входом в здание:

- у наружных стен автостоянок по оси Бг (со стороны ул. Гагарина) в осях   1-13/Я на пощади 84 кв.м выполнить устройство основания из известкового щебня толщиной 12 см;

- выполнить устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см общей площадью 178,8 кв.м;

- смонтировать ограждения балконов диной 136 м;

- заменить покрытие эксплуатируемой крови подземной автостоянки из брусчатки в осях 10а-13/Дг-Иг и в осях 13-18/2/Бг-Иг на общей пощади 1376,2 кв.м;

3. кровля:

- выполнить монтаж парапетных покрытий из листовой оцинкованной стали на пощади 182,5 кв.м;

- выполнить устройство крови из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин на пощади 1 кв.м;

- выполнить устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам диной 75 м;

- выполнить монтаж стальных плинтусов длиной 75 м;

- выполнить монтаж ограждения крови согласно ПСД длиной 365 м;

4. водоотвод от здания:

- установить нащельники в примыкание стены и трансформаторной подстанции длиной 5,12 м;

- выполнить устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной 100 мм объемом 1 кв.м;

- выложить керамическую плитку около лестничных площадок на пощади 5,58 кв.м;

- установить чугунные решетки на водоотводящие лотки общей массой 151 кг;

- установить нащельники на цоколе 18/Е2-И на площади 3,78 кв.м;

- выполнить штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором на площади 37,92 кв.м;

- выполнить покраску цоколя водоэмульсионной краской на площади 37,92 кв.м;

5. подвесные потоки:

- установить недостающие подвесы в подвесных потолках типа "Армстронг" на площади 12,2 кв.м;

6. помещение венткамеры с форкамерами на отметке +11,4000:

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью "Тексотерм" на площади 1 298,43 кв.м;

- оштукатурить дверной откос на площади 2,7 кв.м;

7. основная арена отметка 0,000:

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью "Тексотерм" в осях 1-18/Г-С на площади 648 кв.м;

- выполнить обработку швов сухой штукатурки постановкой раскладок на площади 1,82 кв.м;

- очистить от ржавчины металлические конструкции с последующей огрунтовкой за один раз грунтовкой ГФ-021 на площади 2 кв.м;

- выполнить покраску металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на площади 2 кв.м;

8. холлы  и  коридоры, служебные помещения, лестничные клетки (по результатам вскрытия):

- демонтировать существующую керамическую плитку на площади 659,6 кв.м;

- демонтировать существующую стяжку на площади 150,84 кв.м;

- выполнить устройство новой стяжки армированной на площади 150,84 кв.м толщиной 20 мм;

- выполнить устройство нового покрытия из керамических плиток на площади 659,6 кв.м;

9. служебные помещения при тренировочном катке отметка 0,000. Вениляторная на отметке +4.200:

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью "Тексотерм" на площади 8,26 кв.м;

- выполнить штукатурку дверного откоса и покрасить на площади 5,53 кв.м;

- выполнить обработку швов сухой штукатурки постановкой раскладок на площади 0,33 кв.м;

- выполнить изоляцию трубопроводов утеплителем на площади 2,7 кв.м;

- выполнить выравнивание внутренних поверхностей и покрасить водоэмульсионной краской за 2 раза на площади 0,22 кв.м;

10. тренировочный каток:

- очистить от ржавчины металлические конструкции с последующей огрунтовкой за один раз грунтовкой ГФ-021 и покраской эмалью ПФ-115 за 2 раза, на площади 195,24 кв.м;

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью "Тексотерм" на площади 164,85 кв.м;

- очистить от ржавчины металлические конструкции с последующей огрунтовкой за один раз грунтовкой ГФ-021 и покраской эмалью ПФ-115 за 2 раза, на площади 26,88 кв.м;

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью "Тексотерм" на площади 29 кв.м;

- выполнить штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором на площади 2,8 кв.м;

- выполнить покраску водоэмульсионной краской на площади 2,8 кв.м;

- выполнить покраску водоэмульсионной краской за 2 раза объемом 16,1 кв.м;

- установить противопожарные двери EI 60 (Д13-5шт; Д26-3шт) на противопожарной стене по оси С/1-13 на отметке 0.000: +4.200;

11. вспомогательные помещения автостоянки на отметке-3,900:

- убрать занижение пола перед лифтом, путем подъема уровня пола перед лифтом; 

- произвести ремонт покрытия пола в помещениях тамбур шлюз (3) хо (4;5), в осях 7-11/Г-Д на отметке -3,900 на площади 1 кв.м;

- выполнить шлифовку покрытий на площади 19,38 кв.м;

- выполнить штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором на площади 3,2 кв.м;

- выполнить покраску водоэмульсионной краской, на площади 3,2 кв.м;

- выполнить гидроизоляцию автостоянки на площади 10 кв.м;

12. общий зал автостоянки на отметке -3.900:

- зашпаклевать швы и покрасить водоэмульсионной краской за 2 раза, объемом 1,32 кв.м;

- установить вентиляционные решетки в количестве 2 шт. размерами 100x200 мм.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений. 

При этом каждому лицу, участвующему в деле, в том числе, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу. лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены. 

Доказательств устранения недостатков выполненных работ в рамках государственного контракта от 26.12.2012 № 17 на строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г. Чебоксары, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик на день принятия решения суду не представил, возражений по существу спора не заявил. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что выявленные недостатки не устранены, исковые требования истцом заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению. 

Суд полагает необходимым и достаточным установить срок для устранения недостатков в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную сиу.

Суд в соответствии с пунктом 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оплату государственной пошлины в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб. относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "Голицын" в трехмесячный срок с момента вступления решения в законную силу устранить за свой счет недостатки в работах и выполнить следующий комплекс работ в соответствии с условиями государственного контракта от 26.12.2012 № 17, требованиями проекта, строительных норм и правил на объекте «Ледовый дворец на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе «Олимпийский» в г. Чебоксары», расположенном по адресу: 428000. 

<

...>:

1. в общем зале автостоянки на отметке -7,000:

- смонтировать сигнализаторы оксида углерода СОУ-1 в количестве 42 шт., произвести пусконаладочные работы данной системы;

2. устройство покрытий над автостоянкой (в том числе устройство отмосток вокруг объекта) и на открытом балконе над главным входом в здание:

- у наружных стен автостоянок по оси Бг (со стороны ул. Гагарина) в осях 1-13/Я на площади 84 кв.м выполнить устройство основания из известкового щебня толщиной 12 см;

- выполнить устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см общей площадью 178,8 кв.м;

- смонтировать ограждения балконов длиной 136 м;

- заменить покрытие эксплуатируемой кровли подземной автостоянки из брусчатки в осях 10а-13/Дг-Иг и в осях 13-18/2/Бг-Иг на общей площади 1376,2 кв.м;

3. кровля:

- выполнить монтаж парапетных покрытий из листовой оцинкованной стали на площади 182,5 кв.м;

- выполнить устройство кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин на площади 1 кв.м;

- выполнить устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам длиной 75 м;

- выполнить монтаж стальных плинтусов длиной 75 м;

- выполнить монтаж ограждения кровли согласно ПСД длиной 365 м;

4. водоотвод от здания:

- установить нащельники в примыкание стены и трансформаторной подстанции длиной 5,12 м;

- выполнить устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной 100 мм объемом 1 кв.м;

- выложить керамическую плитку около лестничных площадок на площади 5.58 кв.м;

- установить чугунные решетки на водоотводящие лотки общей массой 151 кг;

- установить нащельники на цоколе 18/Е2-И на площади 3,78 кв.м;

- выполнить штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором на площади 37,92 кв.м;

- выполнить покраску цоколя водоэмульсионной краской на площади 37,92 кв.м;

5. подвесные потолки:

- установить недостающие подвесы в подвесных потолках типа "Армстронг" на площади 12,2 кв.м;

6. помещение венткамеры с форкамерами на отметке +11,4000:

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью "Тексотерм" на площади 1 298,43 кв.м;

- оштукатурить дверной откос на площади 2,7 кв.м;

7. основная арена отметке 0,000:

- восстановить   поверхность   огнезащитного   слоя   огнезащитной   эмалью "Тексотерм" в осях 1-18/Г-С на площади 648 кв.м;

- выполнить обработку швов сухой штукатурки постановкой раскладок на площади 1,82 кв.м;

- очистить от ржавчины металлические конструкции с последующей огрунтовкой за один раз грунтовкой ГФ-021 на площади 2 кв.м;

- выполнить покраску металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на площади 2 кв.м;

8. холлы  и  коридоры, служебные помещения, лестничные клетки (порезультатам вскрытия):

- демонтировать существующую керамическую плитку на площади 659,6 кв.м;

- демонтировать существующую стяжку на площади 150,84 кв.м;

- выполнить устройство новой стяжки армированной на площади 150,84 кв.м толщиной 20 мм;

- выполнить устройство нового покрытия из керамических плиток на площади 659,6 кв.м;

9. служебные помещения при тренировочном катке отметка 0,000. Вениляторная на отметке +4.200:

- восстановить   поверхность   огнезащитного   слоя   огнезащитной   эмалью "Тексотерм" на площади 8,26 кв.м;

- выполнить штукатурку дверного откоса и покрасить на площади 5,53 кв.м;

- выполнить обработку швов сухой штукатурки постановкой раскладок на площади 0,33 кв.м;

- выполнить изоляцию трубопроводов утеплителем на площади 2,7 кв.м;

- выполнить выравнивание внутренних поверхностей и покрасить  водоэмульсионной краской за 2 раза на площади 0,22 кв.м;

10. тренировочный каток:

- очистить от ржавчины металлические конструкции с последующей огрунтовкой за один раз грунтовкой ГФ-021 и покраской эмалью ПФ-115 за 2 раза, на площади 195,24 кв.м;

- восстановить поверхность огнезащитного слоя огнезащитной эмалью «Тексотерм» на площади 164,85 кв.м;

- очистить от ржавчины металлические конструкции с последующей огрунтовкой за один раз грунтовкой ГФ-021 и покраской эмалью ПФ-115 за 2 раза, на площади 26,88 кв.м;

- восстановить   поверхность   огнезащитного   слоя   огнезащитной   эмалью «Тексотерм» на площади 29 кв.м;

- выполнить штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором на площади 2,8 кв.м;

- выполнить покраску водоэмульсионной краской на площади 2,8 кв.м;

- выполнить покраску водоэмульсионной краской за 2 раза объемом 16,1 кв.м;

- установить противопожарные двери EI 60 (Д13-5шт; Д26-3шт) на противопожарной стене по оси С/1-13 на отметке 0.000: +4.200;

11. вспомогательные помещения автостоянки на отметке -3,900:

- убрать занижение пола перед лифтом, путем подъема уровня пола перед лифтом; 

- произвести ремонт покрытия пола в помещениях тамбур шлюз (3) холл (4;5), в осях 7-11/Г-Д на отметке -3,900 на площади 1 кв.м;

- выполнить шлифовку покрытий на площади 19,38 кв.м;

- выполнить штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором на площади 3,2 кв.м;

- выполнить покраску водоэмульсионной краской, на площади 3,2 кв.м;

- выполнить гидроизоляцию автостоянки на площади 10 кв.м;

12. общий зал автостоянки на отметке -3.900:

- зашпаклевать швы и покрасить водоэмульсионной краской за 2 раза, объемом 1,32 кв.м;

- установить вентиляционные решетки в количестве 2 шт. размерами 100x200 мм.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Холдинговая компания "Голицын" в доход федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

А.В. Трусов