1111111402_3166327  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-7478/2018 «17» октября 2018 года Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.С.  Подкорытовой,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСИНСКИЙ  РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1078506000792, ИНН 8505006658,  зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Осинский р-н, с. Оса)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТАЛЬСТРОЙ» (ОГРН  1053808043299, ИНН 3808121146, зарегистрирован по адресу: г. Иркутск)  

третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  

об устранении недостатков, 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

 Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СИБСТАЛЬСТРОЙ» (ОГРН 1053808043299, ИНН 3808121146) в срок до 01.08.2019  безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в здании и на территории детского  сада на 220 мест с овощехранилищем, расположенном по адресу: с. Оса, Осинского района  Иркутской области, ул. Комарова, 15 "А", а именно:  

 1. в угловых групповых помещениях здания детского сада произвести ремонт  витражей;  

 2. восстановить отделку стен из керамической плитки на плиточном клее в  помещениях пищеблока, прачечной, туалета группы "Светлячок";  

 3. водостоки с кровли здания в местах примыкания к парапетам выполнить в  соответствии с проектом МК № 4 "а" (7373)-2010. Исключить затекание воды с фартуков  парапетов на витражи групповых помещений;  

 4. уплотнить грунты обратной засыпки пазух котлована здания детского сада,  насосной станции, овощехранилища, траншеи тепловой сети, водопроводной сети от  скважины до котельной протяженностью 25 метров до плотности, соответствующей  требованиям проектной документации МК № 4 "а" (7373)-2010. Исключить попадание  поверхностных вод в помещения подвала детского сада, овощехранилища, насосной  станции;  

 5. выполнить работы по организации рельефа территории детского сада в  соответствии с проектной документацией МК № 4 "а" (7373)-2010, а именно: обеспечить  отвод поверхностных вод с территории детского сада (отмосток, газонов, дорожных  покрытий и др.);  

 6. Люки колодцев, тепловой камеры вывести на проектные отметки, выполнив срезку  или наращивание горловин в соответствии с требованиями МК № 4 "а" (7373)-2010;  

7. заделать технологические отверстия, которые остались после демонтажа опалубки  в здании насосной станции второго подъема воды;  

 8. выровнять металлические ограждения станции первого подъема воды вместе  прохождения теплосети.  

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СИБСТАЛЬСТРОЙ» (ОГРН 1053808043299, ИНН 3808121146, зарегистрирован по адресу:  г. Иркутск) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С. Н. Швидко