АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А67- 10466/2024

г. Томск

31 января 2025 года

23 января 2025 года оглашена резолютивная часть решения

Судья Арбитражного суда Томской области Федорова С.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астаповой Н.С., ,рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению  Департамента по управлению государственной собственностью Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 634034, Томская область, г. Томск, пр-кт. ФИО1, д.20)

к Муниципальному образованию «Город Томск» в лице Департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 634050, 

<

...>)

о взыскании субсидии в сумме 151 599,70 руб.

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, публично-правовая компания «Роскадастр» в лице филиала по Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 634029, 

<

...>), Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области (634003, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

при участии:

от заявителя – ФИО2 по доверенности №35 от 06.11.2024, диплом, удостоверение,

от ответчика  – ФИО3 по доверенности №30 от 24.06.2024, удостоверение, диплом.

от третьих лиц – не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением к Муниципальному образованию «Город Томск» в лице Департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее – ответчик, Департамент недвижимости) о взыскании субсидии в сумме 151 599,70 руб.

В обоснование исковых требований Департамент по управлению государственной собственностью Томской области указал, что ответчиком не достигнуты плановые значения результатов использования субсиии на проведение комплексных кадастровых работ.

Определением Арбитражного суда Томской области от 12.11.2024 заявление принято, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена публично-правовая компания «Роскадастр» в лице филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Томской области.

Определением Арбитражного суда Томской области от 04.12.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице Департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска исковые требования не признало, указав, что результатом предоставления субсидии является общее количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, а не только количество объектов, в отношении которых внесены сведения в ЕГРН. Поскольку комплексные кадастровые работы проведены в отношении 18 336 объектов, значения результатов использования субсидии являются достигнутыми в полном объеме. Правовые основания для возврата части субсидии в областной бюджет отсутствуют.

Третье лицо (публично-правовая компания «Роскадастр») в отзыве на заявление пояснило, что при оценке результативности проведения комплексных кадастровых работ органы власти должны учитывать весь объем проведенных работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, сведения о результатах работы с которыми содержатся не только в графической, но и в текстовой части карт-планов территорий. Решение оставило на усмотрение суда.

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области отзыв на заявление не представило.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились. В соответствии со статьей  156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в отсутствии представителей третьих лиц, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования. Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Согласно статье 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная система Российской Федерации основана на принципах эффективности использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (пункт 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации»).

К бюджетным полномочиям получателя бюджетных средств, в том числе отнесено обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований (статья 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Субсидии местным бюджетам являются одной из форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (статья 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации регламентирован статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В силу пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 Положения о Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 № 68 (далее – Положение о Департаменте), Департамент по управлению государственной собственностью Томской области является исполнительным органом Томской области, целью деятельности которого является организация эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области.

Согласно подпункту 27 пункта 10 Положения о Департаменте департамент представляет Томскую область в судебных органах с целью защиты имущественных прав и интересов Томской области как собственника областного государственного имущества.

В соответствии с пунктом 4.1 раздела «Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20 сентября 2019 года № 328а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области», департамент является главным распорядителем бюджетных средств в рамках мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ».

В целях финансирования предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Администрацией Томской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2021 №321-09-2022-027.

В соответствии с пунктом 6.1.1 данного соглашения уполномоченным органом исполнительной власти Томской области, осуществляющим взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, на который со стороны Томской области возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) данного соглашения и предоставления отчетности, является департамент.

Во исполнение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2021 № 321-09-2022-027 между департаментом и Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации Города Томска (далее - Департамент архитектуры) заключено соглашение о предоставлении субсидии от 21.01.2022 № 69701000-1-2022-011 (далее - Соглашение) в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Законом Томской области от 29 декабря 2021 года № 180-03 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области, являющимся приложением к подпрограмме «Управление государственным имуществом Томской области» государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20 сентября 2019 года № 328а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» (далее - Порядок предоставления субсидий).

Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Томской области в 2022-2024 годах бюджету муниципального образования «Город Томск» субсидии на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области (далее -Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными департаменту как получателю средств бюджета Российской Федерации.

Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования «Город Томск» на проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения и в приложении № 1 к Соглашению и составляет в 2023 году 224 625 рублей 29 копеек.

В силу пункта 4.3.3 Соглашения Департамент архитектуры обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. В приложении № 2 к Соглашению указаны:

1)   направление расходов - проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области;

2)   результат использования Субсидии - количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы;

3)  единица измерения - единица;

4)  плановые значения результатов предоставления субсидии на 31.12.2023 с датызаключения Соглашения - 610, из них с начала текущего финансового года - 100.

В дальнейшем между департаментом и Департаментом архитектуры было заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 17.08.2023 № 69701000-1-2022-011/4, в соответствии с которым пункт 2.2 Соглашения и приложения №№ 1, 2 к Соглашению изложены в новой редакции.

Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования «Город Томск» на проведение комплексных кадастровых работ, был установлен в размере 13 794 330 рублей 78 копеек, плановые значения результатов предоставления субсидии на 31.12.2023 с даты заключения Соглашения установлены в размере 18 846 единиц, из них с начала текущего финансового года – 18 336.

Факт перечисления Департаменту архитектуры средств субсидии в указанном размере  подтверждается  платежными  поручениями от 23.10.2023 №  583956,  от 16.11.2023 № 649684, от 05.12.2023 № 690990.

В соответствии с абзацем третьим пункта 4.3.4 Соглашения Департамент архитектуры обязуется обеспечивать представление в департамент в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчётным годом, уточненный отчёт - не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным годом.

Департаментом архитектуры в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» представлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 января 2024 года, согласно которому значение результатов предоставления субсидии фактически достигло 18 336 единиц, то есть плановое значение достигнуто в полном объеме.

Вместе с тем согласно письму Управления Росреестра по Томской области от 16.10.2024 № исх-05-20956/24 по результатам проведения комплексных кадастровых работ на территории Томской области в 2023 году по состоянию на 31.12.2023 в Единыйгосударственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) внесены сведения в отношении 16320 объектов на территории муниципального образования «Город Томск».

Учитывая недостижение плановых значений результата предоставления субсидии в соответствии с Соглашением, департаментом соответствующий отчет о достижении значений результатов использования субсидии отклонен и направлен Департаменту архитектуры на доработку.

23.01.2024 департаментом в адрес Департамента архитектуры было направлено уведомление о необходимости возврата в областной бюджет субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в объеме 151 599 рублей 70 копеек.

23.05.2024 Департамент архитектуры выразил несогласие с требованием департамента, указав на то, что при подготовке карты-плана территории, являющейся результатом проведения комплексных кадастровых работ, кадастровым инженером проведен полный и всесторонний анализ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов, в том числе прекративших свое существование, дублирующих сведения об объектах недвижимости, объектах недвижимости, содержащихся в карте-плане территории, но фактически расположенных в других кадастровых кварталах.

На основании решения Думы Города Томска от 05.03.2024 № 841 «Об изменении структуры (перечня органов) администрации Города Томска и о внесении изменений в отдельные решения Думы города Томска» Департамент архитектуры исключен из структуры администрации Города Томска.

В соответствии с указанным нормативным правовым актом в новой редакции изложено Положение о департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, утвержденное решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска» и утверждении положений об органах администрации», в соответствии с которой департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска организует кадастровые работы в отношении земель, земельных участков и их частей, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск», а также расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск». Администрации Города Томска также предписано осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения Департамента архитектуры к Департаменту недвижимости.

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. В связи с упразднением Департамента архитектуры, в настоящее время обязанным лицом по Соглашению является Департамент недвижимости.

Поскольку в добровольном порядке средства субсидии не возвращены, данное обстоятельство послужило основанием для обращения заявителя в суд с рассматриваемым требованием.

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 328а утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области (далее – Порядок).

Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ на территории Томской области (пункт 1 Порядка).

Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ на территории Томской области (пункт 2 Порядка).

Согласно пункту 24 Порядка, в случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением, в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности по итогам отчетного финансового года департамент направляет в орган местного самоуправления муниципального образования уведомление о возврате субсидии в областной бюджет.

Из материалов дела следует, что Департаментом архитектуры представлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 января 2024 года, согласно которому значение результатов предоставления субсидии фактически достигло 18336 единиц, то есть плановое значение достигнуто в полном объеме.

Вместе с тем согласно письму Управления Росреестра по Томской области от 16.10.2024 № исх-05-20956/24 по результатам проведения комплексных кадастровых работ на территории Томской области в 2023 в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесены сведения в отношении 16 320 объектов на территории муниципального образования «Город Томск».

По мнению ответчика, результатом предоставления субсидии является общее количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, а не только количество объектов, в отношении которых внесены сведения в ЕГРН. Поскольку комплексные кадастровые работы проведены в отношении 18336 объектов, значения результатов использования субсидии являются достигнутыми в полном объеме.

Данная позиция является несостоятельной по следующим основаниям.

Как определено частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности) под комплексными кадастровыми работами в целях закона о кадастровой деятельности понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов, или территориях, указанных в части 1 статьи 42.11 Закона о кадастровой деятельности (далее - территория выполнения комплексных кадастровых работ):

1) земельных участков, сведения ЕГРН о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ № «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации недвижимости) требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

2) земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности;

3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

В силу статьи 42.4 Закона о кадастровой деятельности в результате выполнения комплексных кадастровых работ обеспечивается в установленном законом о кадастровой деятельности и Законом о регистрации недвижимости порядке подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.

Таким образом, Закон о кадастровой деятельности предусматривает, что результатом комплексных кадастровых работ является именно внесение сведений об объектах недвижимости, в отношении которых проводились комплексные кадастровые работы, в ЕГРН.

Из системного толкования норм Закона о кадастровой деятельности следует, что показателем результативности использования субсидии в данном случае является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, сведения о которых внесены в ЕГРН.

В связи с изложенным суд соглашается с позицией заявителя о недостижении ответчиком плановых значений результатов использования субсидии на проведение комплексных кадастровых работ, поскольку, несмотря на указанные в отчете Департамента архитектуры сведения о достижении плановых показателей, фактически эти показатели Департаментом архитектуры достигнуты не были. Аналогичная правовая позиция отражена в Постановлениях Арбитражного суда Западно-Сибирского  суда от  22.05.2024 по делу А67- 7538/2024, от  21.10.2024 по делу № А67-7655/2023.

Позиция ответчика по вопросу о возврате субсидии в областной бюджет является несостоятельной, поскольку по смыслу положений Закона о кадастровой деятельности результатом проведения комплексных кадастровых работ является внесение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, в связи с чем достижение или недостижение заказчиком данных работ плановых показателей должно оцениваться исключительно в зависимости от количества внесенных в ЕГРН объектов.

Приведенная ответчиком позиция Управления Росреестра по Томской области высказана данным органом применительно к контракту, заключенному заказчиком комплексных кадастровых работ с их непосредственным исполнителем (кадастровым инженером).

Часть 2 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности устанавливает, что в результате выполнения комплексных кадастровых работ:

1) осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;

2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 данной статьи Закона о кадастровой деятельности;

3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

5) обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Таким образом, в результате проведения комплексных кадастровых работ количество объектов, в отношении которых они проведены, действительно может отличаться от планового показателя вследствие уточнения границ, образования новых земельных участков, исправления реестровых ошибок.

Вместе с тем в силу пункта 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц), в связи с чем, информация о количестве объектов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, имеет значение лишь для обязательства, возникшего между Департаментом архитектуры и исполнителем комплексных кадастровых работ из муниципального контракта, а не для обязательства, возникшего между департаментом и Департамента архитектуры из Соглашения.

В связи с изложенным имеются правовые основания для возврата части субсидии в областной бюджет в связи с недостижением получателем субсидии плановых показателей.

В соответствии с пунктом 4.1.4 Соглашения в случае, если Департаментом архитектуры по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 Соглашения (а именно обязательства по обеспечению достижения значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению), и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении результатов использования субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Порядком предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, департамент обязуется рассчитать в соответствии с пунктом 24 Порядка предоставления субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования «Город Томск» в бюджет Томской области, и в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления Департаментом архитектуры отчетности о достижении значения показателя результативности по итогам отчетного финансового года направить Департаменту архитектуры требование о возврате средств Субсидии в бюджет Томской области в указанном объеме.

Согласно пункту 24 Порядка предоставления субсидий, в случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением, в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности по итогам отчетного финансового года департамент направляет в орган местного самоуправления муниципального образования уведомление о возврате субсидии в областной бюджет.

Объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

Vв = (Vс x kv) x 0,1, где:

Vв - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

Vс - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;

kv - коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

kv = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

В соответствии с указанными формулами по расчету истца возврату в областной бюджет подлежат средства в следующем объеме:

kv = 1 - T / S = 1 – 16320 / 18336 = 1 – 0,89 = 0,1099

Vв = (Vс x kv) x 0,1 = (13 794 330,78 х 0,1099) х 0,1 = 151 599,70 руб.

При расчете заявитель использовал значения размера субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, а также планового значения показателя результативности использования субсидии в размере, установленном в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению от 17.08.2023 № 69701000-1-2022-011/4, поскольку приведенная выше формула расчета объема средств, подлежащего возврату в областной бюджет, предусматривает использование соответствующих значений на отчетную дату, которой в данном случае является 31.12.2023. На указанную дату данные значения были согласованы сторонами Соглашения в размере, указанном в дополнительным соглашении к Соглашению от 17.08.2023 № 69701000-1-2022-011/4.

Расчет судом проверен и признан верным, возражения со стороны ответчика не заявлены.

Заявленные требования подлежат удовлетворению в полном размере.

Руководствуясь  статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с муниципального образования «Город Томск» в лице Департамента управ-ления муниципальной собственностью администрации Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 634050, 

<

...>) в пользу Де-партамента по управлению государственной собственностью Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 634034, Томская область, г. Томск, пр-кт. ФИО1, д.20) 151 599,70 руб. субсидии.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья                                                                             С.Ю. Федорова