АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-37720/2024

г. Новосибирск

11 декабря 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Локтионовым Я.М. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (ИНН 

<

***>), п. Восход, к обществу с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, о понуждении к исполнению гарантийных обязательств. Лица, участвующие в деле: от истца – ФИО1 (доверенность от 09.01.2024, паспорт, диплом); от ответчика – ФИО2 (доверенность от 14.05.2020, паспорт, диплом).  

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» в срок с 01.05.2025 по с 31.05.2024 устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту № 0851200000623004363 от 03.07.2024 на ремонт автомобильной дороги вдоль школы и амбулатории в с.Каменка (микрорайон «Олимпийская слава»):  

- по чётной стороне на 5-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 27-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 73,5-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне со 129-го метра по 137-й метр образование сетки, разрушение асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 180-м метре. разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 215-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 246-ом разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 297,2-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 303,2-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по нечётной стороне на 303,2-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 331,9-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 388,6-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по нечётной стороне на 406,2-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 407,4-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 435,4-ом метре образование сетки размером 1м* 1м, разрушение асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 512,4-ом метре образование сетки размером 1м*3м, разрушение асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 538,2-ом метре разрушение асфальтобетонного покрытия; - по чётной стороне на 540,9-ом метре разрушение асфальтобетонного покрытия;  

- по чётной стороне на 621-ом метре разрушение кромки асфальтобетонного покрытия.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» (ИНН 

<

***>) в случае неисполнения решения суда в установленный решении срок в пользу администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения,  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 800 руб.  

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.  

 Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, город Тюмень, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

 Судья Д.Н. Дорофеева