2165/2021-28042(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-8953/2020

город Казань

03 марта 2021 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  судьи Р.Р.Абдуллиной,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального  унитарного предприятия «Дирекция муниципальных жилищных программ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «КазаньстройПром» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требовании относительно предмета спора ООО «Управляющая компания  «Домус», об обязании устранить недостатки,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении ходатайства о принятии в производство  дополнительного требования о взыскании штрафа в размере 512 637,25 рубля.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КазаньстройПром»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в десятидневный срок после  вступления решения в законную силу безвозмездно устранить выявленные  

недостатки работ по договору № 5-1324 от 23.11.2017 по строительству объекта  капитального строительства – «72-х квартирного 9-ти этажного жилого дома поз.  2 с наружными сетями по улице Ютазинской Московского района города  Казани, а именно:  

в квартире № 2 выполнить работы по устранению дефектов межкомнатных  дверей,  

в квартире № 3 выполнить работы по регулировке входной двери, 

в квартире 15 выполнить работы по замене линолеума и плинтусов во всех  комнатах квартиры, замене стекла двери в кухне, закреплению косяков двери  спальной комнаты, закреплению решетки в ванной комнате, земене петли  балконной двери, устранению неисправности работы духового шкафа газовой  плиты, восстановлению работы освещения в зале, регулировке работы кранов на  кухне и в ванной комнате,  

в квартире 17 выполнить работы по замене стекла на окне лоджии,  в квартире 19 выполнить работы по регулировке окон,  

в квартире 24 выполнить работы по регулировке окон во всех комнатах,  выполнить работы по регулировке входной двери,  

в квартире 31 выполнить работы по установлению уплотнителя в входной двери и регулировке косяков межкомнатных дверей, 

в квартире 32 выполнить работы по замене стекла на окне лоджии,  

 в квартире 37 выполнить работы по замене подоконника в зале и установке  заглушек на указанный подоконник,  

в квартире 45 выполнить работы по устранению щели в окнах зала,  выполнить работы по замене остекления лоджии, выполнить работы по  закреплению на кухне линолеума,  

в квартире 52 выполнить работы по устранению щели двери кухни и по  закреплению стекла двери кухни,  

в квартире 61 выполнить работы по регулировке окон, установленных в  квартире, в том числе и на лоджии, Выполнть работы по замене крышки  электрощитка,  

в квартире 62 выполнить аботы по регулировке окон, установленных в  квартире и на лоджии,  

в квартире 67 выполнить работы по регулировке косяков и двери  туалетной комнаты, выполнить работы по регулировке балконной двери,  

в квартире 68 выполнить работы по регулировке окон на кухне и лоджии,  выполнить работы по регулировке межкомнатной двери зала, выполнить работы  по поклейке обоев в зале;  

в квартире 71 выполнить работы по устранению провисания верхней части  дверной коробки в одной из комнат, регулировке межкомнатной двери,  выполнить работы по устранению трещины на дверном полотне в ванной  комнате, выполнить работы по устранению краски на дверном полотне и коробе  двери санузла.  

В остальной части отказать. Выдать истцу справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины 13 253 рубля. Расходы по экспертизе возложить на истца. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан  на счет экспертной организации ООО «ЦСНО «Эталон» 100 000 рублей за  проведенную экспертизу.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 7:55:58Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна