Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5746/2022

19 июня 2025 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шильчиковой А.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третьи лица: 

- муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г.Анива» (ОГРН 

<

***>).  

- общество с ограниченной ответственностью «Седьмой сезон Архитектуры» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

- общество с ограниченной ответственностью «Новострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>)  

- общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» (ИНН 

<

***>, 

<

...>)  

о возложении обязанности устранить недостатки, при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 17.02.2025, диплом 

от ответчика – генеральный директор ФИО2 (личность удостоверена) эксперт ФИО3  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) безвозмездно в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу выполнить работы по устранению недостатков (дефектов) выполненных работ по Договору от 20.08.2019 Nº 97/19-Д на строительство объекта: «Стадион за висячим мостом в г. Анива», а именно:  

- устранить деформацию швов между картами бетонного перекрытия беговой дорожки;  

- произвести замену 100% резинового покрытия по всей площади беговой дорожки, с предварительной подготовкой бетонного основания беговой дорожки, с применением резиновой крошки, отвечающей требованиям ТУ 22.19.73-003-72119882-2020.  

- выполнить работу по снятию существующего естественного газонного покрытия для его последующей укладки;  

- выровнять основание газонного покрытия футбольного поля; 

- выполнить устройство (укладку) существующего естественного газонного покрытия футбольного поля.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.В. Кучкина