РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-46280/23-110-379

г. Москва

01 ноября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено  01 ноября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (107031, 

<

...>, ЭТ 1 ПОМ V, ОГРН: 

<

***>,) к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании 8 025 595,52 руб.,

 

при участии:

от истца – ФИО3, по дов.  от  07.06.2023,

от ответчика- ФИО4 по дов.  от  30.03.2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" о взыскании 6 883 553 руб. задолженности по договору от 05.09.2022 №ТР09-22Ф, 874 397,59 руб. неустойки, неустойки на сумму 6 883 553 руб., исходя из расчета 0,1% за каждый день просрочки с 08.03.2023 по дату фактического исполнения обязательства, 260 994,92 руб. 1-й части гарантийного резерва, 6 650,01 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов на сумму 260 994,92 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 08.03.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Комплекс «Серебряный бор», выступавшим на стороне заказчика, и ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», выступавшим на стороне генерального подрядчика, был заключен Договор от 05.09.2022 № ТР09-22Ф, продолжающий действовать с внесенными в него Дополнительным соглашением от 06.09.2022 № 1 и Дополнительным соглашением от 01.10.2022 № 2 изменениями, по которому истец принял обязательства выполнить строительные работы по устройству фундамента здания торговых рядов и передать результат таких строительных работ ответчику, а ответчик принял обязательства принять такой результат строительных работ от истца и оплатить выполненные строительные работы.

Во исполнение Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф:

ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» выполнило строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796,97 рубля, и передало такие строительные работы ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2; выставило соответствующие счета-фактуры ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Счетом-фактурой от 30.09.2022 № 54 и Счетом-фактурой от 24.10.2022 № 75; выставило соответствующие счета ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Счетом от 30.09.2022 № 38 и Счетом от 24.10.2022 № 42;

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796,97 рубля, от ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» без указания на существование отступлений Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф и на иные недостатки в выполненных строительных работах и результат выполненных строительных работ от истца, что подтверждается по Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2.

С принятием строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796,97 рубля, от истца у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникли обязанности уплатить данную денежную сумму.

В  силу пункта 4.3. Договора от 05.09.2022 №ТР09-22Ф, соответствующие части такой денежной суммы подлежали уплате ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в оплату выполненных строительных работ в течение 10 календарных дней со дней, следующих за днями выставления, соответственно, Счета от 30.09.2022 № 38 и Счета от 24.10.2022 № 42.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 10 439 796,97 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ, которые несло ООО «Комплекс «Серебряный бор», в части, равняющейся 521 989,85    рубля,    удержав    денежную    сумму,    равняющуюся    521 989,85    рубля,    у    ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в качестве гарантийного резерва, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2.

После такого удержания ответчик продолжил нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 917 807,12 рубля, истцу в оплату выполненных строительных работ.

Комплекс «Серебряный бор» прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 917 807,12 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ, которые несло ООО «Комплекс «Серебряный бор», в части, равняющейся 3 034 254,12 рубля, уплатив денежную сумму, равняющуюся 3 034 254,12 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ, что подтверждается Платежным поручением от 14.11.2022 № 9361 и Платежным поручением от 27.12.2022 № 10613.

После такой уплаты ООО «Комплекс «Серебряный бор» продолжило нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 883 553 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

По состоянию на 07.03.2023 ответчик не исполнил обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 883 553 рубля, истцу в оплату выполненных строительных работ и, как следствие, имеет долг по оплате выполненных строительных работ, равняющийся 6 883 553 рубля, что подтверждается Калькуляцией величины долга по оплате выполненных строительных работ от 07.03.2023.

Подписав Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2, причем без указания на существование отступлений Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф и на иные недостатки в выполненных строительных работах, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, согласилось с тем, что ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» выполнило строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796,97 рубля, и передало такие строительные работы и результат этих строительных работ ответчику.

Следовательно, согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 883 553 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

Между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» достигнуто согласие о сроке оплаты выполненных работ.

Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется. Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом, пропорционально суммы, авансового платежа. (пункт 4.3. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом, или договором.» (пункт 1 статьи 329 ГК).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. (пункт 1 статьи 330 ГК).

Между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» существует согласие о договорной неустойке, которую ответчик должно уплатить истцу в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, выполненных работ по настоящему Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.» (подпункт 19.3.1. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф).

С принятием выполненных строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 8 351 846,44 рубля, от ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по Акту о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 8 351 846,44 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем выставления Счета от 30.09.2022 № 38 ООО «Комплекс «Серебряный бор» ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 10.10.2022, что подтверждается пунктом 4.3. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф и Счетом от 30.09.2022 № 38;

выполненных строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 2 087 950,53 рубля, от ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по Акту о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2 у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 2 087 950,53 рубля ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем выставления Счета от 24.10.2022 № 42 ООО «Комплекс «Серебряный бор» ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 03.11.2022, что подтверждается пунктом 4.3. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф и Счетом от 24.10.2022 № 42.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся  9 917 807,12   рубля,   ООО   «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»   в   оплату  выполненных строительных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф.

В заключенном между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» Договоре от 05.09.2022 № ТР09-22Ф предусматривается договорная неустойка, которую ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, что подтверждается подпунктом 19.3.1. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф.

По состоянию на 07.03.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 874 397,59 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату предусмотренной в пункте 19.3.1. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ в течение периода времени, начиная с 11.10.2022 и заканчивая 07.03.2023, что подтверждается Калькуляцией величины договорной неустойки от 07.03.2023.

Не исполнив обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 917 807,12 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф, на основании пункта 1 статьи 329 и пункта 1 статьи 330 ГК и подпункта 19.3.1. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 874 397,59 рубля, в уплату договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ в течение периода времени, начиная с 11.10.2022 и заканчивая 07.03.2023.

Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить исчисляемую, исходя из ставки, равняющейся 0,1 % за каждый день просрочки, денежную сумму ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» за просрочку оплаты выполненных работ в течение периода времени, начиная с 04.03.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 6 883 553 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

Также, между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» существует согласие о сроке возвращения 1-й части гарантийного резерва.

Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) - в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

оставшаяся часть в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.» (пункт 4.2. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим. Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.» (пункт 1 статьи 310 ГК).

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло результат выполненных строительных работ от ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2.

С принятием результата выполненных строительных работ от ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по Акту о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Акту о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2 у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994,92 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва.

Причем в силу пункта 4.2. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф, такая денежная сумма подлежала уплате ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2 между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ».

По состоянию на 07.03.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994,92 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва и, как следствие, ООО «Комплекс «Серебряный бор» имеет долг, равняющийся 260 994,92 рубля, перед ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Калькуляцией величины долга по возвращению 1-й части гарантийного резерва от 07.03.2023.

Подписав Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 1 и Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 № 2, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, согласилось с тем, что ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» передало результат выполненных строительных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор».

Следовательно, в силу пункта 4.2. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф ответчик должен уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994,92 рубля, истцу в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, определенный в пункте 4.3. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.» (пункт 1 статьи 395 ГК).

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.» (пункт 3 статьи 395 ГК).

В гражданском законодательстве предусматриваются проценты за пользование чужими деньгами, которые ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить ООО «Моспромстройинжиниринг» в случае нарушения срока возвращения 1-й части гарантийного резерва.

По состоянию на 07.03.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 650,01 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 04.11.2022 и заканчивая 07.03.2023, что подтверждается Калькуляцией величины за незаконное пользование чужими деньгами от 07.03.2023.

Не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994,92 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, предусмотренный в пункте 4.2. Договора от 05.09.2022 № ТР09-22Ф, на основании пункта 1 статьи 395 ГК ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 650,01 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 04.11.2022 и заканчивая 07.03.2023.

Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить исчисляемую, исходя из ключевой ставки, денежную сумму ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва, начиная с 08.03.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 260 994,92 рубля, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва.

Между тем, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» передало исполнительную документацию на работы по устройству фундамента на объекте: здание «Торговые ряды» на территории эко-отеля «Изумрудный лес», расположенный по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, что подтверждается Реестром исполнительной документации № 3 за 2022 год и прилагаемыми к нему документами, которые имеются в материалах дела №А40-46280/23-110-379. Исполнительная документация на работы по устройству фундамента на объекте: здание «Торговые ряды» на территории эко-отеля «Изумрудный лес», расположенный по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка была получена от имени ООО «Комплекс «Серебряный бор» ФИО5, назначенным ответственным специалистом по строительному надзору объектов «Изумрудный лес», что подтверждается Приказом от 23.01.2020 №14/20-ОСБ.

Согласно пункту 4.3 Договора «Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами». Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 №1, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 №1, а также Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 №2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 №2 были подписаны ООО «Комплекс «Серебряный бор» и ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ».

Стоимость работ по Договору определяется Сметами по форме Приложения №1 к Договору, утвержденными Сторонами на вид Работ, составленных Генеральным подрядчиком на основании рабочей документации (пункт 3.1 Договора). Согласно Смете №1, являющейся Приложением №1 к Дополнительному соглашению №2 от 01.10.2022 к Договору, стоимость работ составляет 10 439 796,97 рублей. ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» выполнило работы на 10 439 796,97 рублей, что подтверждается подписанными Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 №1, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 №1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 №2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 №2.

Как указал истец, состав работ по устройству фундамента на объекте: здание «Торговые ряды» на территории эко-отеля «Изумрудный лес», расположенный по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка определяется в Смете № 1, являющейся Приложением №1 к Дополнительному соглашению №2 от 01.10.2022 к Договору. Среди таких работ нет работ, связанных с устройством инженерных систем. Следовательно, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» не должно было проводить испытаний инженерных систем в соответствии с Договором.

Согласно пункту 15.1 Договора, сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и локальных смет к исполнительной документации. ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» осуществляло работы по устройству фундамента на объекте: здание «Торговые ряды» на территории эко-отеля «Изумрудный лес». По окончании каждого отчетного месяца, ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» осуществляли сдачу-приемку выполненных работ согласно пункту 15.1 Договора, что подтверждается подписанными Актами по форме № КС-2, КС-3. Кроме того, подписав Реестр №3 исполнительной документации за 2022 год по устройству фундамента на объекте: здание «Торговые ряды» на территории эко-отеля «Изумрудный лес», ООО «Комплекс «Серебряный бор» подтвердило, что исполнительная документация проверена в полном объеме и подтверждает выполненные ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» работы по устройству фундамента на объекте: здание «Торговые ряды» на территории эко-отеля «Изумрудный лес».

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (  ОГРН: 

<

***>)    в пользу  общества с ограниченной ответственностью  "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 

<

***>,)  6 883 553 руб. задолженности, 874 397 руб. 59 коп.  неустойки, неустойка  на сумму 6 883 553 руб.,  исходя из  0,1% за каждый день,  с 08.03.2023 по день фактической оплаты,260 994 руб. 92 коп.  резерва, 6 650 руб. 01  коп. процентов,  проценты на сумму 260 994 руб. 92 коп.  , исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды,  с  08.03.2023 по день фактической оплаты,  63 128 руб.   в возмещение расходов по госпошлине

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

ФИО1