Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-237643/18

116-1865 

24 декабря 2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2018 года

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2018 года

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению: ОАО «РЖД» (ОГРН: 

<

***>)

к ООО "ПСТ" (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании долга.

при участии представителей: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 16.10.2018 года.

от ответчика: не явился, извещен. 

У С Т А Н О В И Л:

ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ПСТ" о взыскании по Договору от 24.07.2017 года  № ЦЛООПН-172209/МОСК долга в сумме 1 208 091 рублей.

Представитель ответчика надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения спора, в суде не явился, отзыв не представил.

Представитель истца не возражал против рассмотрения спора в отсутствие представителя ответчика.

Дело рассмотрено в порядке ст.123, ч.1, 3 ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 24 июля 2017 г. между ОАО «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») и ООО «Передовые строительные технологии» (далее - ООО «ПСТ»), заключен договор № ЦЛООПН-172209/МОСК на выполнение полного комплекса работ по устройству навесов на 6-ти остановочных пунктах по проекту: «Оборудование остановочных пунктов навесами».

В ходе проверки выполнения работ, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2016 году, проводимом под девизом «Год Пассажира», работниками регионального управления в г. Москве Центра «Желдорконтроль» выявлены факты принятия к учету на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 фактически не выполненных работ по остановочным пунктам Нахабино, Ленинградская и Дмитровская.

По состоянию на 6 апреля 2018 г. представлены корректировочные акты формы КС-2 и справки формы 3 на снятие фактически невыполненных объемов работ, однако не возвращены полученные денежные средства: по остановочным пунктам: Нахабино на сумму 665 295 рублей, Ленинградская -215 498 рублей, Дмитровская - 327 298 рублей.

Указанные справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 подписаны сторонами без разногласий.

Претензией от 9 апреля 2018 г. № ИСХ - 526/МОСКДКС ОАО «РЖД» известило ООО «ПСТ» о необходимости возврата денежных средств в размере 1 208 091 рублей.

В свою очередь ООО «ПСТ» письмом от 12 апреля 2018 г. № 38 в ответ на указанную Претензию гарантировало возврат денежных средств в срок не позднее 15 мая 2018 г.

Однако истребуемые денежные средства ответчиком уплачены не были и ОАО «РЖД» направило в адрес ООО «ПСТ» повторную претензию от 1 июня 2018 г. № ИСХ - 836/МОСКДКС о возврате денежных средств.

До настоящего времени денежные средства не возвращены.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению.

В силу ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 180 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Передовые строительные технологии» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ОАО «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>) сумму задолженности в размере 1.208.091 руб., расходы по госпошлине 25.081  руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб