АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-22919/2021

21 июня 2022 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 21 июня 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Крутько В.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым к Обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл», при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Контрольно-ревизионного управления Симферопольского района Республики Крым,  о взыскании денежных средств,

при участии представителей сторон:

от истца – не явились;

от ответчика – ФИО1 представитель по доверенности №1 от 19.12.2021г.;

от третьего лица – ФИО2, представитель по доверенности №1/2021 от 30.06.2021г.;

УСТАНОВИЛ:

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Кристалл» о взыскании денежных средств по контракту № 01/02/19 от 01.02.2019г. в сумме 17 130.69 руб., по контракту № 01/03 от 01.03.2019г. в сумме 29 597.15 руб., по контракту № 19/03 от 19.03.2019г. в сумме 23 226.66 руб., по контракту № 05/04 от 05.04.2019г. в сумме 32 477.28 руб., по контракту № 08/04 от 08.04.2019г. в сумме 23 294.07 руб., по контракту № 18/04 от 18.04.2019г. в сумме 17 132.72 руб., по контракту № 20/04 от 20.04.2019г. в сумме 15 847.35 руб., по контракту № 06/05 от 06.05.2019г. в сумме 23 365.07 руб., по контракту № 20/06 от 20.06.2019г. в сумме 8 217.87 руб., по контракту № 03/12 от 02.12.2019г. в сумме 17 210.11 руб..

Определением АС РК от 10.03.2022г. суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Контрольное-ревизионное Управление Симферопольского района Республики Крым.

В судебное заседание 14.06.2022г. явились представители ответчика и третьего лица; истец явку своего уполномоченного представителя в судебное заседание не обеспечил, при этом был признан судом надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте проведения судебного заседания с учетом положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В отсутствии ходатайств, свидетельствующих о невозможности рассмотрения данного дела, а также во избежание нарушения процессуальных сроков, принимая во внимание полноту материалов дела, суд признал возможным рассмотреть его по существу в отсутствие неявившегося представителей.

Судом были установлены следующие обстоятельства.

01.02.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 01/02/19.

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение земляных работ, демонтаж опор по ул. Комсомольская в с. Доброе, очистка от грунта и мусора хоздвора по ул. 40 лет Победы, 8 А Добровского сельского поселения в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии е условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 988.00 руб. в том числе НДС 16 664.67 руб..

01.03.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 01/03. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по корчевке кустарника, планировка участка по ул. Октябрьская в районе дома № 43 в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 831.60 руб., в том числе НДС 16 638.60 руб..

19.03.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 19/03. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству газонов, площадью 168 м2, на участке: 

<

...> в районе домов № 42-44 в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 400.80 руб. в том числе НДС 16 566.80 руб..

05.04.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 05/04. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ в с. Лозовое «Земляные работы, корчевка пней, кустарников» в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 106.80 руб. в том числе НДС 16 517.80 руб..

08.04.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 08/04. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству газонов, площадью 168,5 м2, на участке: 

<

...> в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 744.00 руб. в том числе НДС 16 624.67 руб..

18.04.2019г между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 18/04. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству покрытия дороги в 

<

...> в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 338.40 руб., в том числе НДС 16 556.40 руб..

20.04.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 20/04.

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству площадок под контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов 

<

...>, № 5, с. Доброе-2, 

<

...> в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 655.20 руб., в том числе НДС 16 609.20 руб..

06.05.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 06/05.

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству газонов, площадью 169 м2 на участке 

<

...> в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии е условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 990.00 руб., в том числе НДС 16 665.00 руб..

20.06.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 20/06. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству площадок под контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов Добровского сельского поселения район Понтос в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 49 779.60 руб., в том числе НДС 8 296.60 руб..

02.12.2019г. между Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и ООО «Кристалл» был заключен контракт № 03/12. 

Согласно пункта 1.1 контракта его предметом является выполнение работ по устройству газонов, площадью 170 м2, на участке: 

<

...> в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить, а заказчик принять и оплатить работы в соответствии е условиями настоящего контракта (пункт 1.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена (стоимость работ) составляет: 99 972.00 руб., в том числе НДС 16 662.00 руб..

К вышеуказанным контрактам прилагались согласованные и утвержденные локальные сметные расчеты на выполнение работ.

Так, истец указывает, что расчет стоимости работ по контрактам произведен базисно-индексным методом с применением сметных нормативов на основании территориальных единичных расценок ТЕР-2001. ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Свердловской области, федеральных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве ФССЦ-2001 и федеральных сметных цен па перевозки грузов для строительства ФССЦпг-2001 для определения стоимости работ в базисном уровне цен, а также с применением индексов пересчета стоимости работ в текущий уровень цен.

Контрольно-ревизионным управлением Симферопольского района Республики Крым проведена проверка целевого расходования денежных средств, в том числе и при исполнении контрактов № 01/02/19 от 01.02.2019г., № 01/03 от 01.03.2019г., № 19/03 от 19.03.2019г., № 05/04 от 05.04.2019г., № 08/04 от 08.04.2019г., № 18/04 от 18.04.2019г., № 20/04 от 20.04.2019г., № 06/05 от 06.05.2019г., № 20/06 от 20.06.2019г., № 03/12 от 02.12.2019г..

Проверкой были установлены избыточные расходы бюджетных средств при реализации вышеперечиленных контрактов, в связи с применением сметных нормативов на основании территориальных единичных расценок ТЕР-2001. ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Свердловской области, которые отличны от нормативов для Республики Крым.

Вышеуказанное нарушение привело к завышению стоимости выполненных работ по контракту № 01/02/19 от 01.02.2019г. на сумму 17 130.69 руб., по контракту № 01/03 от 01.03.2019г. на сумму 29 597.15 руб., по контракту № 19/03 от 19.03.2019г. на сумму 23 226.66 руб., по контракту № 05/04 от 05.04.2019г. на сумму 32 477.28 руб., по контракту № 08/04 от 08.04.2019г. на сумму 23 294.07 руб., по контракту № 18/04 от 18.04.2019г. на сумму 17 132.72 руб., по контракту № 20/04 от 20.04.2019г. на сумму 15 847.35 руб., по контракту № 06/05 от 06.05.2019г. на сумму 23 365.07 руб., по контракту № 20/06 от 20.06.2019г. на сумму 8 217.87 руб., по контракту № 03/12 от 02.12.2019г. на сумму 17 210.11 руб..

26.05.2021г. Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым направила в адрес ООО «Кристалл» претензию № 5/2113 с требованием о возврате излишне уплаченных денежных средств по контрактам.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Так, согласно искового заявления истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства (неосновательное обогащение) по контракту № 01/02/19 от 01.02.2019г. в сумме 17 130.69 руб., по контракту № 01/03 от 01.03.2019г. в сумме 29 597.15 руб., по контракту № 19/03 от 19.03.2019г. в сумме 23 226.66 руб., по контракту № 05/04 от 05.04.2019г. в сумме 32 477.28 руб., по контракту № 08/04 от 08.04.2019г. в сумме 23 294.07 руб., по контракту № 18/04 от 18.04.2019г. в сумме 17 132.72 руб., по контракту № 20/04 от 20.04.2019г. в сумме 15 847.35 руб., по контракту № 06/05 от 06.05.2019г. в сумме 23 365.07 руб., по контракту № 20/06 от 20.06.2019г. в сумме 8 217.87 руб., по контракту № 03/12 от 02.12.2019г. в сумме 17 210.11 руб..

Квалифицируя спорные правоотношения сторон, суд признал их сложившимися в рамках исполнения контрактов соответствующих признакам договора подряда, правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 ГК РК и Федерального закона № 44-ФЗ.. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основании государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Пунктом 1 статьи 766 ГК РФ предусмотрено, что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно положениям статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями  статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Оценивая правомерность заявленных требований, суд исходит из того, что факт выполнения подрядчиком предусмотренных контрактом работ подтвержден представленными в дело актами и справкам о стоимости выполненных работ, которые подписаны заказчиком без замечаний и возражений. Как указывает истец, оплата принятых работ произведена заказчиком в полном объеме.

Согласно пункту 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Как указано в статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ)

Судом установлено, что Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за выполненные по контрактам № 01/02/19 от 01.02.2019г., № 01/03 от 01.03.2019г., № 19/03 от 19.03.2019г., № 05/04 от 05.04.2019г., № 08/04 от 08.04.2019г., № 18/04 от 18.04.2019г., № 20/04 от 20.04.2019г., № 06/05 от 06.05.2019г., № 20/06 от 20.06.2019г., № 03/12 от 02.12.2019г. работы в пользу ООО «Кристалл» оплачены денежные средства, что подтверждается представленными в материалы дела документами.

Контрольно-ревизионным управлением Симферопольского района Республики Крым проведена проверка целевого расходования денежных средств, в том числе и при исполнении контрактов № 01/02/19 от 01.02.2019г., № 01/03 от 01.03.2019г., № 19/03 от 19.03.2019г., № 05/04 от 05.04.2019г., № 08/04 от 08.04.2019г., № 18/04 от 18.04.2019г., № 20/04 от 20.04.2019г., № 06/05 от 06.05.2019г., № 20/06 от 20.06.2019г., № 03/12 от 02.12.2019г..

По результатам вышеуказанной проверки были установлены избыточные расходы бюджетных средств при реализации контрактов № 01/02/19 от 01.02.2019г. на сумму 17 130.69 руб., по контракту № 01/03 от 01.03.2019г. на сумму 29 597.15 руб., по контракту № 19/03 от 19.03.2019г. на сумму 23 226.66 руб., по контракту № 05/04 от 05.04.2019г. на сумму 32 477.28 руб., по контракту № 08/04 от 08.04.2019г. на сумму 23 294.07 руб., по контракту № 18/04 от 18.04.2019г. на сумму 17 132.72 руб., по контракту № 20/04 от 20.04.2019г. на сумму 15 847.35 руб., по контракту № 06/05 от 06.05.2019г. на сумму 23 365.07 руб., по контракту № 20/06 от 20.06.2019г. на сумму 8 217.87 руб., по контракту № 03/12 от 02.12.2019г. на сумму 17 210.11 руб., связанные с завышением стоимости работ, вследствие применения в локально-сметном расчете территориальных единичных расценок ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Свердловской области, федеральных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве ФССЦ-2001 и федеральных сметных цен па перевозки грузов для строительства ФССЦпг-2001 для определения стоимости работ в базисном уровне цен.

Вышеуказанные нарушения привели к завышению стоимости выполненных работ в общей сумме 207 498.99 руб.. 

Судом в рамках рассмотрения дела был поставлен вопрос относительно необходимости проведения судебной экспертизы.

Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ, пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статьям 82 и 87 АПК РФ относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, которые поставлены судом в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 09.03.2011г. № 13765/10 по делу № А63-17407/2009, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания. Если необходимость проведения экспертизы отсутствует, суд отказывает в ходатайстве о назначении судебной экспертизы.

Оснований для назначения судебной экспертизы у суда не имеется. 

Ответчик своим заявлением б/н от 14.06.2022г. отказался от проведения судебной строительно-технической экспертизы. 

От истца пояснений относительно назначения судебной экспертизы не поступало, что было расценено судом как отказ от ее проведения.

Так, постановлением Госстроя России о 05.03.2004г. года № 15/1 утверждена Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (ИДС 81-35.2004).

Согласно пункта 2.3 Методики к территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ.

Территориальные сметные нормативы привязаны к местным условиям строительства, а, поскольку, Свердловская область находится в более суровой климатической зоне, чем Республика Крым, стоимость строительных и специальных Строительных работ в Республике Крым не может совпадать со стоимостью данных работ в Свердловской области.

Стоимость материалов, изделий, конструкций, и оборудования, а также стоимость перевозки грузов также разная в зависимости от субъекта Российской Федерации. При прямом сравнении по каждому шифру (номеру) расценки, все территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы для Свердловской области являются более высокими, чем для Республики Крым.

Факт завышения стоимости подтверждается Актом № 1 по результатам контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-ревизионным управлением Симферопольского района Республики Крым.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).  Применение норм о неосновательном обогащении возможно только в случае установления судом совокупности обстоятельств: пользование ответчиком имуществом истца в отсутствие правовых оснований для этого, сбережение ответчиком денежных средств за счет истца, размер неосновательного сбережения (неосновательного обогащения).

Согласно пункту 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: наличие факта приобретения (сбережения) имущества; приобретение (сбережение) этого имущества за счет другого лица; отсутствие правовых оснований для такого приобретения (сбережения), то есть - приобретение (сбережение) этого имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке (договоре).

В предмет доказывания по спору о взыскании неосновательного обогащения входят следующие обстоятельства: факт получения ответчиком имущества, принадлежащего истцу; факт использования ответчиком этого имущества; период пользования имуществом, сумма неосновательного обогащения. Возможность извлечения и размер доходов от использования ответчиком неосновательно приобретенного имущества должны быть доказаны истцом (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 29.01.2013г. № 11524/12, с учетом того, что основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п., распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

Таким образом, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того обстоятельства, что лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

Распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании норм статьи 65 АПК РФ необходимо сделать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. На основании статей 67, 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).

На основании вышеизложенного, суд находит исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения по контракту № 01/02/19 от 01.02.2019г. в сумме 17 130.69 руб., по контракту № 01/03 от 01.03.2019г. в сумме 29 597.15 руб., по контракту № 19/03 от 19.03.2019г. в сумме 23 226.66 руб., по контракту № 05/04 от 05.04.2019г. в сумме 32 477.28 руб., по контракту № 08/04 от 08.04.2019г. в сумме 23 294.07 руб., по контракту № 18/04 от 18.04.2019г. в сумме 17 132.72 руб., по контракту № 20/04 от 20.04.2019г. в сумме 15 847.35 руб., по контракту № 06/05 от 06.05.2019г. в сумме 23 365.07 руб., по контракту № 20/06 от 20.06.2019г. в сумме 8 217.87 руб., по контракту № 03/12 от 02.12.2019г. в сумме 17 210.11 руб. подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 3-1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 оспаривая расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием иного подхода.

Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.

Непредставление такого расчета расценивается как недобросовестность (Постановление Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 по делу № А83-5275/2017).

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства (неосновательное обогащение) по контракту № 01/02/19 от 01.02.2019г. в сумме 17 130.69 руб., по контракту № 01/03 от 01.03.2019г. в сумме 29 597.15 руб., по контракту № 19/03 от 19.03.2019г. в сумме 23 226.66 руб., по контракту № 05/04 от 05.04.2019г. в сумме 32 477.28 руб., по контракту № 08/04 от 08.04.2019г. в сумме 23 294.07 руб., по контракту № 18/04 от 18.04.2019г. в сумме 17 132.72 руб., по контракту № 20/04 от 20.04.2019г. в сумме 15 847.35 руб., по контракту № 06/05 от 06.05.2019г. в сумме 23 365.07 руб., по контракту № 20/06 от 20.06.2019г. в сумме 8 217.87 руб., по контракту № 03/12 от 02.12.2019г. в сумме 17 210.11 руб..

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7 150.00 руб..

4. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

5. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                  Ю. А. Радвановская