АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-571/2022

г. Владивосток

24 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2022 года . 

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2022 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Буров А.В.,

Протокол ведет  секретарь судебного заседания Родионова В.Д.

 рассмотрев в судебном заседании дело по иску   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССП-МОНОЛИТ"   (ИНН 

<

***>; 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 

<

***>)  

к  краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"  (ИНН 

<

***>; 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 

<

***>)

о взыскании

при участии

от истца –ФИО1. по доверенности от 17.11.2021.

от ответчика – Болтик А.К. по доверенности № от 10.01.2022. 

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССП-МОНОЛИТ"   к  краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" о взыскании обеспечения в сумме 34335915,18 руб. (с учетом уточнений).

Истец поддерживает заявление об уточнение исковых требований. 

Ответчик не возражает.

Суд принимает уточнение исковых требований на сумму 34335915,18 руб. основного долга и процентов по ст.395 ГК РФ.

Исследовав материалы дела суд установил следующее.

20.07.2017 по результатам проведения электронного аукциона (извещение №0520200000417000010) между ООО «ССП-Монолит» (Подрядчик) и КГУП «Приморский водоканал» (Заказчик), заключен контракт № 87/17 (далее – Контракт), по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство объектов водопроводноканализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития «Михайловский» и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

В качестве обеспечения исполнения Контракта (п. 9.3) подрядчиком были перечислены денежные средства в размере 68 961 414 рублей. 

Во исполнение условий контракта ответчиком были приняты и оплачены работы на монтаж металлоконструкций производственных зданий, устройство самотечного коллектора, подливку баз колонн, обратную засыпку фундаментов, были подписаны акты выполненных работ КС-2 и КС-3 за период с февраля 2018 по июнь 2019 года на сумму 40 133 494 рублей. 

26.02.2020 в виду существенного нарушения заказчиком своих обязанностей, препятствующих исполнению Контракта, подрядчиком в адрес заказчика направлено уведомление (исх. № М-015 от 26.02.2020) о расторжении Контракта.

 С учетом вышеизложенного, Контракт считается прекращенным с 08.03.2020, что не оспаривается заказчиком и подрядчиком. 

С учетом акта сальдирования взаимных представлений (неотработанного аванса) по спорному контракту подлежащая взысканию сумма основного долга составляет 34 335 915,18 рублей, что подтверждено ответчиком.

Суд принимает признание ответчиком иска, так как это не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поскольку факт перечисления, как аванса, так и обеспечения подтверждены материалами дела.

В силу ст. 170 АПК РФ В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В силу пункта 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Врамках настоящего иска истцом предъявлены к взысканию с ответчика проценты, начисленные на сумму неосновательного обогащения по статье 395 ГК РФ.

Поскольку ответчик допустил просрочку в выплате, то истец обоснованно предъявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

С учетом установленного п.9.6 договора срока 30 дней со дня получения требования о возврате обеспечения и претензии содержащей такое требование и врученной ответчику 26.02.2020, проценты подлежат начислению с  28.03.2020.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума ВС РФ № 7 проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору, Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Размер процентов за период с 28.03.2020 по 17.03.2022, составляет 4023794,53 руб. 

Также подлежат взысканию проценты, начиная с 18.03.2022 по день фактической оплаты долга, исходя из ключевой ставки Банка России действовавшей в соответствующие периоды просрочки.

С учетом предоставления истцу отсрочки по уплате государственной пошлины и признании ответчиком части долга, с последнего подлежит взысканию 63724,00 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССП-МОНОЛИТ" 38359709,71 руб., составляющих 34335915,18 руб. основной задолженности, 4023794,53 руб. санкций, и в доход федерального бюджета 63724,00 руб. государственной пошлины.

Проценты по ст.395 ГК РФ на неоплаченную сумму 34335915,18 руб. взыскивать за каждый день просрочки, начиная  с 18.03.2022 в размере ключевой ставки Банка России действующей в соответствующие периоды, по дату полной оплаты долга.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья    Буров А.В.