Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-7656/2018

г. Благовещенск

10 января 2019 года

изготовление решения в полном объеме

09 января 2019 года

объявлена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «АмурСтройОкна-ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к

обществу с ограниченной ответственностью «Амуртрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 4 774 506,57 руб.,

при участии в заседании:

от истца: не явилось, извещено (ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 123 АПК РФ);

от ответчика: не явился, извещался заказным письмом № 44013, не вручено, возвращено;

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «АмурСтройОкна-ДВ» (далее – истец, ООО «АмурСтройОкна-ДВ») с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Амуртрансстрой» (далее – ответчик, ООО «Амуртрансстрой») о взыскании задолженности за ненадлежащее исполнение обязательств в части оплаты работ по договорам подряда от 16.08.2016, от  24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 в сумме 2 712 343 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.05.2018 по 24.08.2018 в сумме 62 495,36 руб.

Заявленные требования обоснованы тем, что ООО «АмурСтройОкна-ДВ» по договорам подряда от 16.08.2016, от  24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017, заключенным между истцом и ответчиком, в полном объеме выполнены работы по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах ответчика. Для оплаты выполненных работ ответчику выставлены счета-фактуры от 27.12.2016 № 249 на сумму 1 200 000 руб., от 01.04.2018 № 41 на сумму 5 012 343 руб. Выполненные истцом работы оплачены ответчиком не в полном объеме. 

В судебном заседании 19.12.2018 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) приняты к рассмотрению уточненные требования о взыскании с ответчика:

неустойки (пени) по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из ПВХ профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 в сумме 62 450,06 руб.; 

неустойки (пени) по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 в сумме 42 085,49 руб.;

основного долга по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016 в сумме 1 217 433 руб., неустойки (пени) за период с 06.12.2016 по 19.12.2018 в сумме 1 259 725,22 руб.; 

основного долга по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 17.02.2017 в сумме 34 600 руб., неустойки (пени) за период с 13.03.2017 по 19.12.2018 в сумме 22 386,20 руб.;

основного долга по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 04.07.2017 в сумме 63 100 руб., неустойки (пени) за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 в сумме 32 307,20 руб.;

основного долга по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 04.07.2017 в сумме 216 500 руб., неустойки (пени) за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 в сумме 110 848 руб.;

основного долга по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 01.09.2017 в сумме 1 174 100 руб., неустойки (пени) за период с 25.09.2017 по 19.12.2018 в сумме 529 519,10 руб.;

основного долга по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 22.09.2017 в сумме 6 610 руб., неустойки (пени) за период с 16.10.2017 по 19.12.2018 в сумме 2 842,30 руб.

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121 - 123 АПК РФ.

Судебное заседание проводилось в отсутствие представителей истца и ответчика на основании части 3 статьи 156 АПК РФ.

Исследовав доводы истца, материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

16.08.2016 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление и монтаж конструкций из ПВХ профиля (далее – договор от 16.08.2016), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести в соответствии с техническим заданием заказчика замеры проемов на объекте: ст. Магдагачи, 60-ти квартирный жилой дом; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из ПВХ профиля Montblanc-Quadro (70 мм), количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; осуществить установку изделий по указанному адресу, выполнить иные работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 16.08.2016 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 16.08.2016 установлена сумма договора в размере 344  963 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 16.08.2016 оплата по договору осуществляется в следующие сроки: в течение 15 календарных дней после выполнения работ по монтажу согласно пункту 4.1.1 договора.

Приемка работ, выполненных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день окончания таких работ путем подписания сторонами акта приема-передачи (пункт 5.1 договора от 16.08.2016).

В силу пункта 8.4 договора от 16.08.2016 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 0,1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 16.08.2016 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению и монтажу конструкций из ПВХ профиля по договору от 16.08.2016 на объекте: ст. Магдагачи, 60-ти квартирный жилой дом ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 344 963 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 344 963 руб. 

16.08.2016 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля (далее – договор от 16.08.2016), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести в соответствии с техническим заданием заказчика замеры проемов на объекте: ст. Магдагачи, 60-ти квартирный жилой дом; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из аллюминиевого профиля Provedal, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; осуществить установку изделий по указанному адресу, выполнить иные работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 16.08.2016 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 16.08.2016 установлена сумма договора в размере 1 251 230 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 16.08.2016 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка работ, выполненных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день окончания таких работ путем подписания сторонами акта приема-передачи (пункт 5.1 договора от 16.08.2016).

В силу пункта 8.4 договора от 16.08.2016 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 0,1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 16.08.2016 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого профиля по договору от 16.08.2016 на объекте: ст. Магдагачи, 60-ти квартирный жилой дом ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 1 251 230 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 1 251 230 руб.

24.10.2016 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление конструкций из ПВХ профилей (далее – договор от 24.10.2016), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести в соответствии с техническим заданием заказчика замеры проемов на объекте заказчика: дом отдыха локомотивных бригад на станции Сковородино; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из ПВХ профиля КВЕ-Эксперт, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; выполнить работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 24.10.2016 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 24.10.2016 установлена сумма договора в размере 3 121 240 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 24.10.2016 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка изделий, произведенных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день получения изделий путем подписания сторонами товарной накладной (пункт 5.1 договора от 24.10.2016).

В силу пункта 8.4 договора от 24.10.2016 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 24.10.2016 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению конструкций из ПВХ профилей по договору от 24.10.2016 на объекте заказчика: дом отдыха локомотивных бригад на станции Сковородино ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 3 121 240 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 3 121 240 руб.

17.02.2017 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление конструкций из ПВХ профилей (далее – договор от 17.02.2017), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести при условии наличия технического задания заказчика замеры проемов на объекте заказчика; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из ПВХ профиля Proplex Tend, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; выполнить работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 17.02.2017 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 17.02.2017 установлена сумма договора в размере 34 600 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 17.02.2017 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка изделий, произведенных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день получения изделий путем подписания сторонами товарной накладной (пункт 5.1 договора от 17.02.2017).

В силу пункта 8.4 договора от 17.02.2017 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 17.02.2017 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению конструкций из ПВХ профилей по договору от 17.02.2017 на объекте заказчика ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлен счет на оплату  от 17.02.2017 № 19 на сумму 34 600 руб.

04.07.2017 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление конструкций из ПВХ профилей (далее – договор от 04.07.2017), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести при условии наличия технического задания заказчика замеры проемов на объекте заказчика; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из ПВХ профиля КВЕ-Expert 70, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; выполнить работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 04.07.2017 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 04.07.2017 установлена сумма договора в размере 63 100 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 04.07.2017 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка изделий, произведенных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день получения изделий путем подписания сторонами товарной накладной (пункт 5.1 договора от 04.07.2017).

В силу пункта 8.4 договора от 04.07.2017 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 04.07.2017 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению конструкций из ПВХ профилей по договору от 04.07.2017 на объекте заказчика ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 63 100 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 63 100 руб.

04.07.2017 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление конструкций из алюминиевого профиля (далее – договор от 04.07.2017), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести при условии наличия технического задания заказчика замеры проемов на объекте заказчика; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из алюминиевого профиля Provedal, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; выполнить работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 04.07.2017 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 04.07.2017 установлена сумма договора в размере 216 500 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 04.07.2017 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка изделий, произведенных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день получения изделий путем подписания сторонами товарной накладной (пункт 5.1 договора от 04.07.2017).

В силу пункта 8.4 договора от 04.07.2017 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 04.07.2017 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению конструкций из алюминиевого профиля по договору от 04.07.2017 на объекте заказчика ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 216 500 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 216 500 руб.

01.09.2017 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление конструкций из ПВХ профилей (далее – договор от 01.09.2017), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести при условии наличия технического задания заказчика замеры проемов на объекте заказчика; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из ПВХ профиля Proplex Tend, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; выполнить работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 01.09.2017 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 01.09.2017 установлена сумма договора в размере 1 174 100 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 01.09.2017 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка изделий, произведенных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день получения изделий путем подписания сторонами товарной накладной (пункт 5.1 договора от 01.09.2017).

В силу пункта 8.4 договора от 01.09.2017 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 01.09.2017 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению конструкций из ПВХ профилей по договору от 01.09.2017 на объекте заказчика ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 1 174 100 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 1 174 100 руб.

22.09.2017 между ООО «Амуртрансстрой» (заказчик) и ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (подрядчик) заключен договор подряда на изготовление конструкций из ПВХ профилей (далее – договор от 22.09.2017), согласно пункту 1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства произвести при условии наличия технического задания заказчика замеры проемов на объекте заказчика; изготовить и передать в собственность заказчика изделия из ПВХ профиля, количество и иные характеристики которых приведены в приложении № 1 (эскиз) к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью; выполнить работы и действия, предусмотренные условиями настоящего договора и приложения № 2 (смета) к нему, которое является его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 22.09.2017 заказчик обязался в порядке и сроки, установленные настоящим договором, принять и оплатить изготовленные изделия и выполненные подрядчиком работы.

Пунктом 3.1 договора от 22.09.2017 установлена сумма договора в размере 6 610 руб., в том числе НДС, которая включает в себя стоимость изготовления изделий и стоимость работ, выполняемых в соответствии с приложением № 2, составляемой на основании пожеланий, требований заказчика и утвержденными им эскизами изделий (приложение № 1).

Согласно пункту 3.2 договора от 22.09.2017 при подписании настоящего договора за оказание работ и услуг оплата производится перечислением денежных средств от заказчика на расчетный счет подрядчика в сумме согласно пункту 3.1 договора.

Приемка изделий, произведенных подрядчиком по настоящему договору, осуществляется заказчиком в день получения изделий путем подписания сторонами товарной накладной (пункт 5.1 договора от 22.09.2017).

В силу пункта 8.4 договора от 22.09.2017 при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, подрядчик вправе применить к заказчику следующие санкции: потребовать выплаты неустойки из расчета 1% от суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 данного договора, за каждый день просрочки; потребовать оплаты дополнительных расходов, связанных с приостановкой работ (расходы на дополнительную транспортировку материала, проживание и доставку монтажных бригад).

Срок действия договора установлен сторонами в пункте 9.1 договора от 22.09.2017 с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по изготовлению конструкций из ПВХ профилей по договору от 22.09.2017 на объекте заказчика ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 6 610 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 6 610 руб.

Для оплаты выполненных по договорам подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 работ по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах заказчика ответчику выставлены счета-фактуры от 27.12.2016 № 249 на сумму 1 200 000 руб., от 01.04.2018 № 41 на сумму 5 012 343 руб.

Истец указывает, что работы подрядчика по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах ответчика, выполненные ООО «АмурСтройОкна-ДВ» по договорам подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 на общую сумму 6 212 343 руб., оплачены заказчиком частично в размере 3 500 000 руб. путем осуществления авансовых платежей платежными поручениями от 14.11.2016 № 968 на сумму 500 000 руб., от 06.12.2016 № 1095 на сумму 700 000 руб., от 10.02.2017 № 177 на сумму 500 000 руб., от 04.04.2017 № 480 на сумму 300 000 руб., от 30.05.2017 № 773 на сумму 1 000 000 руб., от 01.09.2017 № 1177 на сумму 500 000 руб.

Претензией от 01.06.2018 № 33 ответчику предложено оплатить возникшую задолженность в указанный в претензии срок, которая оставлена ответчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает необходимым уточненные исковые требования удовлетворить в полном объеме по следующим основаниям.

Исходя из толкования условий заключенных договоров от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 и возникших обязательственно-правовых отношений между сторонами, суд приходит к выводу, что в спорных правоотношениях подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно нормам статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В пункте 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Судом установлено, что ООО «АмурСтройОкна-ДВ» на основании договоров подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 обязалось осуществить работы по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах ответчика, а ООО «Амуртрансстрой» обязалось принять и оплатить эти работы.

В сметах к договорам подряда сторонами согласованы подлежащие выполнению подрядчиком виды, объемы работ, а также их стоимость.

Факт выполнения истцом работ по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах ответчика по договорам подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 на общую сумму 6 212 343 руб. подтверждается подписанными обеими сторонами актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 344 963 руб., на сумму 1 251 230 руб., на сумму 3 121 240 руб., на сумму 63 100 руб., на сумму 216 500 руб., на сумму 1 174 100 руб., на сумму 6 610 руб., счетом на оплату от 17.02.2017 № 19 на сумму 34 600 руб., справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 344 963 руб., на сумму 1 251 230 руб., на сумму 3 121 240 руб., на сумму 63 100 руб., на сумму 216 500 руб., на сумму 1 174 100 руб., на сумму 6 610 руб.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также счет на оплату от 17.02.2017 № 19 подписаны сторонами без возражений и замечаний, что свидетельствует об отсутствии у заказчика претензий к срокам, объему и качеству выполненных подрядчиком работ.

Выполненные истцом работы по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах ответчика по договорам подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 на общую сумму 6 212 343 руб. ответчиком оплачены частично в размере 3 500 000 руб. путем внесения авансовых платежей, что подтверждается платежными поручениями от 14.11.2016 № 968, от 06.12.2016 № 1095, от 10.02.2017 № 177, от 04.04.2017 № 480, от 30.05.2017 № 773, от 01.09.2017 № 1177 и не оспаривается ответчиком.

Произведенная ответчиком на общую сумму 3 500 000 руб. оплата выполненных подрядчиком работ отнесена ООО «АмурСтройОкна-ДВ» в счет оплаты работ по договорам подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, что не противоречит условиям договоров и назначениям платежей, указанным в платежных документах.

Так произведенная ответчиком оплата выполненных подрядчиком работ отнесена истцом в сумме 1 251 230 руб. (платежные поручения от 14.11.2016 № 968 на сумму 500 000 руб., от 06.12.2016 № 1095 на сумму 700 000 руб., от 10.02.2017 № 177 на сумму 51 230 руб. (частично)) в счет оплаты работ по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 16.08.2016; в сумме 344 963 руб. (платежные поручения от 10.02.2017 № 177 на сумму 344 963 руб. (частично)) в счет оплаты работ по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из ПВХ профиля от 16.08.2016; в сумме 1 903 807 руб. (платежные поручения от 10.02.2017 № 177 на сумму 103 807 руб. (частично), от 04.04.2017 № 480 на сумму 300 000 руб., от 30.05.2017 № 773 на сумму 1 000 000 руб., от 01.09.2017 № 1177 на сумму 500 000 руб.)  в счет оплаты работ по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016.

По расчету истца задолженность ответчика по оплате выполненных ООО «АмурСтройОкна-ДВ» работ составляет 2 712 343 руб., в том числе: 1 217 433 руб. по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016; 34 600 руб. по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 17.02.2017; 63 100 руб. по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 04.07.2017; 216 500 руб. по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 04.07.2017; 1 174 100 руб. по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 01.09.2017; 6 610 руб. по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 22.09.2017.

Доказательств оплаты указанной задолженности с приложением соответствующих документов, на момент рассмотрения настоящего спора, сторонами не представлено.

Положениями статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Названная правовая позиция сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, наличие задолженности перед истцом по оплате работ по изготовлению и монтажу конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля на объектах ответчика по договорам подряда от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017, арифметический расчет задолженности ответчиком не оспорены, контррасчет не представлен. Расчет задолженности судом проверен и признан верным.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика задолженности за выполненные работы по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016 в сумме 1 217 433 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 17.02.2017 в сумме 34 600 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 04.07.2017 в сумме 63 100 руб., по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 04.07.2017 в сумме 216 500 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 01.09.2017 в сумме 1 174 100 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 22.09.2017 в сумме 6 610 руб., являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Рассматривая уточненные требования истца о взыскании с ответчика пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договорам  подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017, суд приходит к следующим выводам.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения (часть 1 статьи 330 ГК РФ).

Судом установлено и ответчиком не оспаривается наличие просрочки по  исполнению обязательств в части оплаты выполненных работ по договорам подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017, в связи с чем, истцом правомерно начислена неустойка.

Пунктами 8.4 договоров подряда от 16.08.2016, от 24.10.2016, от 17.02.2017, от 04.07.2017, от 01.09.2017, от 22.09.2017 установлено, что при нарушении заказчиком сроков внесения денежных средств, предусмотренных пунктом 3.2 договоров,  подрядчик вправе потребовать выплаты неустойки из расчета 0,1 % от неоплаченной суммы договора, предусмотренной пунктом 3.1 договоров, за каждый день просрочки.

По уточненному расчету истца размер неустойки (пени) по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из ПВХ профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 составил 62 450,06 руб., по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 составил 42 085,49 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016 за период с 06.12.2016 по 19.12.2018 составил 1 259 725,22 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 17.02.2017 за период с 13.03.2017 по 19.12.2018 составил 22 386,20 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 04.07.2017 за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 составил 32 307,20 руб., по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 04.07.2017 за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 составил 110 848 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 01.09.2017 за период с 25.09.2017 по 19.12.2018 составил 529 519,10 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 22.09.2017 за период с 16.10.2017 по 19.12.2018 составил 2 842,30 руб.

Ответчик периоды, основания начисления и арифметический расчет пени не оспорил, контррасчет не представил.

В соответствии  с пунктом 71 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»  исходя из принципа, что гражданское законодательство регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (статья 2 ГК РФ),  неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны должника (ответчика), являющегося коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности.

Ответчик ходатайство о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности суду не представил.

На основании изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из ПВХ профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 в размере 62 450,06 руб., по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 в размере 42 085,49 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016 за период с 06.12.2016 по 19.12.2018 в размере 1 259 725,22 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 17.02.2017 за период с 13.03.2017 по 19.12.2018 в размере 22 386,20 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 04.07.2017 за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 в размере 32 307,20 руб., по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 04.07.2017 за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 в размере 110 848 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 01.09.2017 за период с 25.09.2017 по 19.12.2018 в размере 529 519,10 руб., по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 22.09.2017 за период с 16.10.2017 по 19.12.2018 в размере 2 842,30 руб.

ООО «АмурСтройОкна-ДВ» при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 36 874 руб. по платежному поручению № 622 от 07.09.2018.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины с уточненной суммы исковых требований (4 774 506,57 руб.) составляет 46 873 руб. 

В пункте 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» разъяснено, что в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в сумме 36 874 руб., в доход федерального бюджета в сумме 9 999 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амуртрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АмурСтройОкна-ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):

неустойку (пени) по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из ПВХ профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 в сумме 62 450 руб. 06 коп.; 

неустойку (пени) по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 16.08.2016 за период с 12.10.2016 по 10.02.2017 в сумме 42 085 руб. 49 коп.;

основной долг по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 24.10.2016 в сумме 1 217 433 руб., неустойку (пени) за период с 06.12.2016 по 19.12.2018 в сумме 1 259 725 руб. 22 коп.; 

основной долг по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 17.02.2017 в сумме 34 600 руб., неустойку (пени) за период с 13.03.2017 по 19.12.2018 в сумме 22 386 руб. 20 коп.;

основной долг по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 04.07.2017 в сумме 63 100 руб., неустойку (пени) за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 в сумме 32 307 руб. 20 коп.;

основной долг по договору подряда на изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля от 04.07.2017 в сумме 216 500 руб., неустойку (пени) за период с 26.07.2017 по 19.12.2018 в сумме 110 848 руб.;

основной долг по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 01.09.2017 в сумме 1 174 100 руб., неустойку (пени) за период с 25.09.2017 по 19.12.2018 в сумме 529 519 руб. 10 коп.;

основной долг по договору подряда на изготовление конструкций из ПВХ профиля от 22.09.2017 в сумме 6 610 руб., неустойку (пени) за период с 16.10.2017 по 19.12.2018 в сумме 2 842 руб. 30 коп.;

судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 36 874 руб.;

всего – 4 811 380 руб. 57 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амуртрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 999 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области

СудьяД.С. Аныш