АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-19028/2023

г. Владивосток

19 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена  13 декабря 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен  19 декабря 2023 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   фонда Приморского края "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к  обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬПСТРОЙ-ДВ"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании устранить недостатки, 

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 27.12.2022 № 484, диплом;

от ответчика – надлежаще извещены, не явились;

установил:

фонд Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края"    обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬПСТРОЙ-ДВ" об обязании устранить недостатки при капитальном ремонте систем отопления и теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, системы отопления и теплоснабжения многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень.

Ответчик, извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанного лица.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик представил отзыв на иск, по существу требования не оспорил.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между Фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (Заказчик) и ООО «Альпстрой-ДВ» (Подрядчик) по результатам электронного аукциона был заключен договор от 07.05.2021№ РТС225А210017(Д) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края (далее – Договор).

Согласно пункту 1.1 договора Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, в том числе систем отопления и теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, системы отопления и теплоснабжения многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, а Заказчик обязался принять результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Приемочной комиссией 07.06.2022 была проведена приемка выполненных работ по капитальному ремонту систем отопления и теплоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, по итогам которой составлен акт приемки выполненных работ № 04-207/05.

05.07.2022 приемочной комиссией была проведена приемка выполненных работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, по итогам которой составлен акт приемки выполненных работ № 04-216/12.

Приемочной комиссией 19.10.2021 была проведена приемка выполненных  работ по  капитальному  ремонту  системы  отопления  и теплоснабжения многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, по итогам которой составлен акт приемки выполненных работ № 04-410/05.

Платежными поручениями от 21.06.2022 № 297, от 21.06.2022 № 298, от 14.07.2022 № 935 Фондом произведена оплата ООО «Альпстрой-ДВ» за выполненные работы по капитальному ремонту систем отопления и теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень.

Платежным поручением от 10.11.2021 № 252 Фондом произведена оплата ООО «Альпстрой-ДВ» за выполненные работы по капитальному ремонту системы отопления и теплоснабжения многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень.

Согласно пункту 9.2 договора Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации (НТД) на срок 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

В соответствии с пунктом 9.4 Договора Подрядчик в период гарантийного срока обязан рассматривать обращения собственников помещений Объектов, указанных в пункте 1.1 Договора, а также организаций, осуществляющих управление данными Объектами, связанные с выполнением работ по Договору, а также исполнять законные требования об исполнении гарантийных обязательств по Договору в пользу заявителей по обращениям, с письменным уведомлением Заказчика  о  факте  поступления  обращения  и  о  результатах его рассмотрения. Срок направления уведомления не должен превышать пять рабочих дней с даты, когда Подрядчику стало известно о соответствующем факте.

Если в период гарантийной эксплуатации результатов выполненных работ обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан по требованию заказчика устранить их за свой счет и в установленные заказчиком сроки, но не более чем за 20 календарных дней. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами двусторонним актом.

30.01.2023 в адрес Фонда поступило обращение от управляющей организации ООО «Викториал» (исх. от 30.01.2023 №34) по вопросу необходимости направить полномочного представителя для обследования системы отопления многоквартирных домов №№ 7, № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень на предмет выявления и фиксаций течей и установление сроков устранения течей.

В рамках рассмотрения данного обращения специалистами отдела технического надзора Фонда 16.02.2023 осуществлен выезд на многоквартирный дом № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень с целью проведения осмотра и составления акта.

Подрядная организация ООО «Альпстрой-ДВ» была уведомлена об осмотре (исходящий от 15.02.2023 № 04-осп/00853-рс), однако явку своего представителя не обеспечила.

В ходе осмотра многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень установлено следующее:

-           в тепловом узле на подающем трубопроводе и грязевике наблюдаются язвенная коррозия, течь воды;

-           на магистральном трубопроводе DN65 в районе теплового узла наблюдаются язвенная коррозия, течь воды;

-           на врезках стояков отопления в магистральный трубопровод (узлы № 1, 2, 3) по резьбовым соединениям наблюдаются течи воды, трубопровод сильно корродирован (2 шт.);

-           на врезках стояков отопления в магистральный трубопровод (узлы № 1, 2,3) по резьбовым соединениям наблюдается коррозия трубопровода (7 шт.);

-           на стояке холодной воды по кв. № 58, 59 наблюдается течь воды.

В ходе осмотра многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень установлено следующее:

1.    в тепловом узле на подающем трубопроводе и грязевике наблюдаются язвенная коррозия, течь воды;

2.    управляющей организацией произведена замена участка подающего магистрального трубопровода DN65 (L = 80 см) с двумя отводами 90° из-за сильной течи под кв. 33 (подрядная организация не принимала мер по устранению замечаний);

3.    управляющей организацией произведена замена участков стального подающего магистрального трубопровода DN40 (L = 31 м), DN32 (L - 35 м), DN25 (L = 26 м) полипропиленовый трубопровод под первым и шестым подъездами из-за течей врезок стояков отопления и коррозии металла трубопровода (подрядная организация не принимала -мер по устранению замечаний);

4.    на врезках стояков отопления в магистральный трубопровод (узлы № 1, 2, 3) по резьбовым соединениям наблюдаются течи воды, трубопровод сильно корродирован (22 шт.);

5. на врезках стояков отопления в магистральный трубопровод (узлы № 1, 2, 3) по резьбовым соединениям наблюдается коррозия трубопровода (23 шт.).

Составленные акты осмотра от 16.02.2023 направлены в адрес ООО «Альпстрой-ДВ» (исходящий от 28.02.2023 № 04-псп/01087-пд) со сроком устранения недостатков в течение 20 календарных дней в соответствии с пунктом 9.6 Договора.

20.04.2023 в адрес Фонда от ООО «Град Сервис» поступило повторное обращение по вопросу неисполнения ООО «Альпстрой-ДВ» гарантийных обязательств в рамках Договора (входящий от 20.04.2023 № 1443-юр).

02.05.2023 Фондом вышеуказанное обращение перенаправлено в адрес ООО «Альпстрой-ДВ» с требованием устранить выявленные дефекты и предоставить акт об устранении выявленных дефектов, подписанный представителем ООО «Град Сервис» (исходящий от 02.05.2023 № 1443-п/юр).

13.06.2023 был проведен повторный осмотр выявленных дефектов.

Подрядная организация ООО «Альпстрой-ДВ» была уведомлена об осмотре (исходящий от 05.06.2023 № 04-исп/03187-км), однако явку своего представителя не обеспечила.

В ходе осмотра многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень установлено следующее:

- подающий и обратный магистральные трубопроводы системы теплоснабжения выполнены из труб стальных электросварных, системы горячего, холодного водоснабжения - из полипропиленовых труб;

-           на подающем трубопроводе ф 32 мм под кв. № 2 управляющей компанией установлен хомут в связи с течью;

-           на подающем и обратном трубопроводах ф 32 мм под кв. № 3 в местах соединения врезок ф 20 мм и магистральных трубопроводов наблюдается коррозия труб;

-           на подающем и обратном трубопроводах ф 57 мм под кв. № 21 в местах соединения врезок ф 20 мм и магистральных трубопроводов наблюдается коррозия труб;

-           на подающем трубопроводе ф 76 мм под кв. № 23 в месте соединения врезки ф 20 мм и магистрального трубопровода наблюдается коррозия труб;

-           на подающем и обратном трубопроводах ф 76 мм под кв. № 42 в местах соединения врезок ф 20 мм и магистральных трубопроводов наблюдается коррозия труб;

-           на подающем трубопроводе ф 32 мм под кв. № 63 в месте соединения врезки ф 20 мм и магистрального трубопровода наблюдается коррозия труб;

-           на подающем и обратном трубопроводах ф 32 мм под кв. № 64 в местах соединения врезок ф 20 мм и магистральных трубопроводов наблюдается коррозия труб;

-           на подающем трубопроводе ф 76 мм под кв. № 41 в сторону второго подъезда на врезке для сбросного вентиля ф 25 мм управляющей компанией установлен хомут. Под кв. № 41 наблюдается течь по штоку задвижки ф 80 мм, между задвижками ф 80 мм корродирован участок трубопровода ф 76 мм L=l,7 мп;

-           на подающем трубопроводе ф 76 мм от секционной задвижки ф 80 мм в сторону подъезда № 2 наблюдается коррозия металла на участке L=40 см, также подвержена коррозии резка для сбросного вентиля ф 25 мм;

-           на обратном трубопроводе ф 76 мм в сторону 4 подъезда сильная коррозия врезки для сбросного вентиля ф 25 мм;

-           обратный трубопровод (компенсатор) ф 57 мм между кв. № 44 и № 67 подвержен коррозии L=7 мп, наблюдается течь;

-           управляющей компанией в тепловом узле демонтирован грязевик ф 80 мм в связи с сильной коррозией металла и наличием течи воды;

-           в тепловом узле на участке горячего водоснабжения в местах соединения фитингов с обратным клапаном и фильтром наблюдается коррозия.

-           под кв. № 43 в связи с сильной течью воды управляющей компанией была произведена замена участка трубопровода из полипропиленовых труб ф 25 мм на трубы метапол.

В ходе осмотра многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень установлено следующее:

Подающий и обратный магистральные трубопроводы системы теплоснабжения выполнены из труб стальных электросварных, под первым и шестым подъездами из полипропиленовых труб (замена произведена силами управляющей организации).

В тепловом узле на подающем и обратном трубопроводах, грязевике наблюдается сильная коррозия;

По всей протяженности подающего и обратного стального магистрального трубопровода ф 89 мм, 76 мм, 57 мм, 40 мм, 32 мм, 25 мм, 20 мм общей длиной 334 мп наблюдается коррозия труб, местами сильная, в местах соединения стояков отопления ф 20 мм и магистральных трубопроводов наблюдается коррозия труб, на стояках отопления ф 20 мм местами по резьбовым соединениям наблюдаются капельные течи воды.

В целях устранения аварийных ситуаций в отопительный период 2022-2023 г. (устранение течей трубопроводов) Управляющей организацией произведена замена:

- участка подающего магистрального трубопровода ф 76 мм длиной 0,8 мп с двумя отводами 90° под кв. 33;

- участков стального подающего магистрального трубопровода на трубопровод из поттропиленых труб ф 40мм - 31 мп, ф 32 - 35 мп, ф 25 - 26 мп под первым и шестым подъездами.

Составленные акты осмотра от 13.06.2023 были направлены в адрес ООО «Альпстрой-ДВ» (исходящий от 23.06.2023 № 04-ИСП/03612-ПД) со сроком устранения недостатков в течение 20 календарных дней в соответствии с пунктом 9.6 Договора.

ООО «Альпстрой-ДВ» к производству вышеуказанных работ для устранения существующих дефектов не приступило.

Оставление ответчиком претензий по устранению недостатков без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Согласно ст. ст. 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

На основании ст. 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства (статья 754 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Содержание гарантийного обязательства включает право заказчика требовать от подрядчика обеспечения надлежащего качества результата выполненных работ и корреспондирующую ему обязанность подрядчика обеспечивать его с момента приемки и до окончания действия гарантийного срока.

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по выполнению работ.

По спору о ненадлежащем исполнении подрядчиком гарантийных обязательств бремя предоставления доказательств отсутствия вины подрядчика в возникновении недостатков, в том числе посредством доказывания причин образования спорных дефектов (отсутствия причинно-следственной связи), относится на подрядчика как лицо, принявшее на себя обязательство обеспечить соответствие результата выполненных работ требованиям качества (статьи 721, 722, 724, 755 ГК РФ).

В пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и на него в соответствии со статьей 65 АПК РФ возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ.

В соответствии с пунктом 9.2 договора Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации (НТД) на срок 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ, если не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок на этот элемент или часть здания, сооружения устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта (пункт 9.3 договора).

В силу п.2 ст.401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Таким образом, именно ответчик должен представить доказательства отсутствия своей вины в недостатках работ. Между тем таких доказательств суду не представлено.

Судом из материалов дела установлено, что требование заказчика об устранении недостатков при капитальном ремонте систем отопления и теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7, системы отопления и теплоснабжения многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень, заявлено в пределах гарантийного срока.

Факт ненадлежащего исполнения работ подтверждается материалами дела, в том числе актами осмотра многоквартирного дома № 7 от 16.02.2023, от 13.06.2023, и актами осмотра многоквартирного дома № 21 от 16.02.2023, от 13.06.2023.

Поскольку договором предусмотрена гарантия на выполненные работы, то в силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ ответчик должен нести ответственность за недостатки работ, обнаруженные в пределах этого срока. 

Ответчик будучи фактически извещенным о слушании дела, доказательств отсутствия своей вины не представил, ходатайства о назначении экспертизы не заявил.

На основании вышеизложенного, суд признает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Обязать  ООО «Альпстрой-ДВ» в течение 20 календарных дней с момента вступления настоящего решения в законную силу в рамках работ по устранению допущенных недостатков при капитальном ремонте систем отопления и теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень выполнить следующие виды и объемы работ:

 

Позиция КС-2

Вид работ по КС-2 (система отопления и теплоснабжения)

Необходимый объем работ

1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм

134 мп

2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

190 мп

3

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм

14 мп

5

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм

120 мп

7

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм /применительно диаметром до 50мм/

190 мп

9

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

190 мп

10

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

134 мп

24

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм

1 шт

58

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

0,66 м2

59

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

0,66 м2

54

Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками

324 мп

 

Позиция по КС-2

Вид работ по КС-2 (система горячего водоснабжения)

Необходимый объем работ

28

Установка фильтров диаметром: 50 мм

1 шт

29

Фильтр магнитный муфтовый, ФММ-65 /применительно dn 50/

1 шт

34

Клапаны обратные пружинные ИГЛ /Eagle/, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) размером 2

1 шт

 

Позиция по КС-2

Вид работ по КС-2 (система холодного водоснабжения)

Необходимый объем работ

2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

1 мп

12

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм

1 мп

2. Обязать  ООО «Альпстрой-ДВ» в течение 20 календарных дней с момента вступления решения в законную силу в рамках работ по устранению допущенных недостатков при капитальном ремонте системы отопления и теплоснабжения многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень выполнить следующие виды и объемы работ:

Позиция по КС-2

Вид работ по КС-2

Необходимый объем работ

1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм

155 мп

2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

271 мп

3

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм

25 мп

5

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм

130 мп

7

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм /прменительно диаметром до 50мм/

271 мп

9

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

271 мп

10

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

155 мп

17

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм

1 шт

70

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

0,86 м2

71

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

0,86 м2

54

Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками

426 мп

 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПСТРОЙ-ДВ" в пользу ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей 00 копеек.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                      Буров А.В.