Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1162/2021

06 мая 2021 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 29.04.2021

Решение изготовлено в полном объеме 06.05.2021

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Дмитриевой К.М., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Северная региональная строительная компания» (ИНН 1435318873, ОГРН 1171447003749) от 19.02.2021 № б/н к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юнимолл» (ИНН 1435327934, ОГРН 1171447017015) о взыскании 1 713 415 рублей задолженности и неустойки по договору подряда №УК-01/2020 от 13.01.2020, 

представители:

от истца: ФИО2 – директор общества (личность установлена по паспорту), ФИО3 – по доверенности от 07.10.2020 № 8 (диплом 103805 0004016 рег. № 192 от 30.05.2014); 

от ответчика: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Северная региональная строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском от 19.02.2021 № б/н к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юнимолл» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 713 415 рублей задолженности и неустойки по договору подряда №УК-01/2020 от 13.01.2020, в том числе основной долг в размере 1 557 650 руб., неустойка в размере 155 765 руб.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

О месте и времени судебного заседания ответчик извещен надлежащим образом. Определение суда от 25.02.2021 получено ответчиком 05.03.2021 согласно «Отслеживанию почтовых отправлений» (заказное письмо с почтовым уведомлением №67799957010600).

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Судом установлены обстоятельства дела.

13.01.2020 между ООО УК «Юнимолл» (Заказчик) и ООО «Северная региональная строительная компания» (Подрядчик) заключен договор подряда №УК-01/2020, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обшивке металлического каркаса (20 м*10 м) сэндвич панелями (толщина 200 мм, наполнитель – базальт), расположенного по адресу: 

<

...> км. Вилюйского тракта, д.34, принадлежащего Заказчику на праве собственности и сдать результат работы Заказчику в срок, установленный п.4.1 Договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора общая цена договора составляет 1 472 478 руб. и включает:

- стоимость работ по обшивке металлического каркаса сэндвич панелями, которая составляет 233 490 руб. (стоимость работ по обшивке 1м2 равна 500 рублей);

- стоимость сэндвич панелей кровельных, цвет (сер/сер), наполнитель базальт 200 мм (248,4 м2), которая составляет 670 680 руб. (стоимость 1 м2 равна 2 700 руб.);

- стоимость сэндвич панелей стеновых, цвет (сер/сер), наполнитель базальт 200 мм (218,58 м2), которая составляет 568 308 руб., стоимость 1 м2 равна 2 600 руб.).

Согласно пункту 3.2. Договора оплата по договору согласована сторонами и производится в следующем порядке:

- оплата за выполненные по обшивке металлического каркаса сэндвич панелями производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами актов приемки работ;

- оплата за сэндвич панелей кровельных, цвет (сер/сер), наполнитель базальт 200 мм (248,4 м2), производится не позднее  28 февраля 2020 года;

- стоимость сэндвич панелей стеновых, цвет (сер/сер), наполнитель базальт 200 мм (218,58 м2), производится не позднее  28 февраля 2020 года.

В соответствии с пунктом 4.1 Договора Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

- срок начала выполнения работ – 15 января 2020 года;

- срок окончания выполнения работ – 31 января 2020 года (включительно).

В силу пункта 5.1 Договора Заказчик обязуется осуществить в участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 календарных дней после истечения конечного срока выполнения работы и/или фактической готовности к сдаче, при этом преимущественной датой истечения конечного срока выполнения работы является дата указанная в пункте 4.1 настоящего договора, отклонение от которой допускается по причине простоя Заказчика, о чем Подрядчик обязан уведомлять Заказчика. по согласованию сторон, извещение о готовности результата работы к сдаче Заказчику не направляется.

Согласно пункту 6.3. Договора за нарушение условий договора в части своевременной оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,2% за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательства, от суммы подлежащей оплате, но не более 10% этой суммы.

Дополнительным соглашением №1 к договору подряда от 27.01.2020 стороны изменили пункт 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции: «Оплата по настоящему договору согласована сторонами, и производится Заказчиком в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами актов приемки работ», пункт 4.1. Договора изложен в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки: срок начала выполнения работ – 01 апреля 2020 года, срок окончания выполнения работ – 20 апреля 2020 года (включительно)».

23.04.2020 сторонами подписан акт №1 по договору подряда №УК-01/2020 от 13.01.2020, согласно которому Подрядчиком выполнены работы на сумму 1 310 150 руб., в том числе:

- кровельный сэндвич панель толщиной 200мм, наполнитель базальт, ед.измерения – м2, количество -  248,4, цена за 1 час. -  2 700 руб., сумма – 670 680 руб.;

- кровельный сэндвич панель толщиной 200мм, наполнитель базальт, ед.измерения – м2, количество -  225,950, цена за 1 час. -  2 600 руб., сумма – 587 470 руб.;

- изготовление фасонных элементов для сэндвич-панелей, ед.измерения – шт., количество -  1, цена за 1 час. -  52 000 руб., сумма – 52 000 руб.

17.06.2020 сторонами подписан акт приема-передачи выполненных работ по договору подряда №УК-01/2020 от 13.01.2020, согласно которому Подрядчиком выполнены работы на сумму 247 500 руб., в том числе: обшивка металлического каркаса (20м*10м) сэндвич панелями (толщина 200 мм. наполнитель – базальт), ед.измерения – м2, количество -  495, цена -  500 руб., сумма – 247 500 руб.

Истцом в адрес Заказчика направлена претензия от 31.08.2020 с требованием оплатить 1 557 650 руб. задолженности по договору подряда №УК-01/2020 от 13.01.2020. Претензия получена ответчиком 31.08.2020 вход.№079.

В связи с отсутствием оплаты выполненных работ, истец обратился в суд с настоящим иском.

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Отзыв по существу заявленных исковых требований не представил, в связи с чем суд в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Анализ материалов дела показывает, что между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из договора подряда, регулируемого главой 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является передача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке (статьи 711 и 746 Кодекса).

Суд, оценив представленные в дело акты №1 от 23.04.2020 на сумму 1 310 150 руб., №12 от 17.06.2020 на сумму 247 500 руб., подписанные со стороны ответчика без возражений по объемам, качеству и срокам выполнения работ, признает их надлежащими и достаточными доказательствами факта выполнения истцом работ и принятия их результата ответчиком.

Следовательно, у ответчика возникло обязательство по оплате выполненных истцом работ в сумме 1 557 650 рублей.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как установлено частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик  сумму долга не оспорил, доказательства оплаты не представил. 

С учетом изложенного суд считает обоснованным требование истца о взыскании с ответчика задолженности по договору в размере 1 557 650 руб.

Истец также просит взыскать пени в сумме 155 650 руб.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно пункту 6.3. Договора за нарушение условий договора в части своевременной оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,2% за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательства, от суммы подлежащей оплате, но не более 10% этой суммы.

Истец начислил неустойку исходя из следующего расчета:

         с 25.06.2020 по 03.02.2020 (224 дня): 1 557 650 х 224 х 0,2% = 697 827,20 руб.;

Вместе с тем, учитывая, что размер пени ограничен  10% от суммы задолженности, истец просит взыскать 155 765 руб. пени.

Расчет судом проверен и признан верным.

С учетом изложенного, требование истца в части взыскания неустойки подлежит удовлетворению в размере 155 765 руб.

Истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  государственная пошлина подлежит взысканию в доход федерального бюджета с  ответчика в размере 30 134 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юнимолл» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северная региональная строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору подряда №УК-01/2020 от 13.01.2020 в размере 1 557 650 руб., неустойку в размере 155 765 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юнимолл» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 134 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья

                                    В.С.Терских