02.10.2018 года Дело № А49-10316/2018  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 

Суд в составе председательствующего судьи Лапшиной Т.А., 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

решил:

Исковые требования удовлетворить полностью, расходы по  государственной пошлине отнести на ответчика.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой»  в срок до 01 декабря 2018 года устранить выявленные в период гарантийного  срока недостатки выполненных по муниципальному контракту № 136 от  04.09.2017 г. работ по благоустройству территории сквера по ул.  Садовая/Советская в р.п. Мокшан, а именно:  

- устранить дефекты в устройстве бордюрного камня на протяжении  696 метров на следующих участках:  

1. главная аллея с двух сторон, протяженность аллеи 95 метров; 

2. участок у выхода на ул. Советская с двух сторон, протяженность  аллеи 12 метров;  

3. аллея по южной стороне, с правой от центрального входа стороне  дорожки, протяженность аллеи 95 метро;  

4. аллея по западной стороне, с двух сторон, протяженность аллеи 72  метра;  

5. аллея от центральной площадки к юго-западному углу сквера, с  двух сторон, протяженность аллеи 65 метров;  

6. по радиусу центральной площадки, протяженностью 90 метров; 

- устранить дефекты асфальтового покрытия: провести проливку  трещин, выровнять неоднородость текстуры поверхности покрытия, на  

участках дорожек по центральной аллее, аллее с южной стороны парка, аллее  от центральной площадки к юго-западному углу сквера, на площадке в  северо-западной части сквера площадью 60 м2; привести в надлежащий вид  (устранить неровности) швы сопряжения полос асфальтового покрытия на  местах примыкания аллей к центральной площадке (кругу) и соединениях  аллей между собой.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «АвтоДорСтрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину  в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной  жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня  изготовления решения в полном объеме.  

Судья Т.А. Лапшина