Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-24681/24

26 июня 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о внесении изменений в государственный контракт,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт от 10.07.2018 № Ф. 2018.322600  следующие изменения.  

 Пункт 3.3 Контракта изложить в следующей редакции: 

 «3.3 Окончание выполнения работ: 78 (семьдесят восемь) месяцев с даты начала  выполнения работ в соответствии с Календарным графиком производства работ  (Приложение № 2 к Контракту).».  

 Пункт 18.1. Контракта изложить в следующей редакции: 

 «18.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и  действует до 01 марта 2025 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не  освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств».  

 Приложение № 2 «График производства работ» к Контракту изложить в новой  редакции в части продления сроков следующих видов работ:  

 В графическую часть Приложения № 1 «Календарный график производства работ» к  Контракту внести следующие изменения сроков выполнения отдельных видов работ:  

 Работы по комплексному озеленению (п.5 Графика) - срок выполнения с 50 месяца по  64 календарный месяц дополнить сроком с 75 месяца по 76 календарный месяц  включительно;  

 Работы по переустройству охранной зоны участка периметра ЛИИ им. Громова (п. 7  Графика) - срок выполнения с 33 по 77 календарный месяц включительно;  

 Работы по переустройству водопровода (п. 9 Графика) - срок выполнения с 14 месяца  по 73 календарный месяц включительно;  

 Работы по наружным сетям канализации (п.10 Графика) - срок выполнения с 13  месяцев по 73 календарный месяц включительно;  

 Работы по наружным сетям дождевой канализации (п. 11 Графика) - срок выполнения  с 13 месяцев по 73 календарный месяц включительно;  

 Работы по Локальным очистным сооружениям (п.12 Графика) - срок выполнения с 59  месяца по 74 календарный месяц включительно;  

 Работы по сетям связи (п.13 Графика) - срок выполнения с 7 месяца по 50 месяц и с 61  месяца по 62 месяц, дополнить сроком с 73 месяца по 77 календарный месяц включительно;  

 Работы по АСУД (п. 14 Графика) - срок выполнения с 31 месяца по 74 календарный  месяц включительно;  

 Работы по СЖОТ (п. 17 Графика) - срок выполнения с 52 месяца по 78 календарный  месяц включительно;  

 Работы по установке шумозащитных экранов (п. 18 Графика) - срок выполнения с 26  месяца по 73 календарный месяц включительно;  

 Работы по строительству автомобильной дороги (п.19 Графика) - срок выполнения с  15 месяца по 75 календарный месяц включительно;  

 Работы по строительству пешеходного перехода ПКО+52,95 (п. 20 Графика) - срок  выполнения с 14 месяца по 36 календарный месяц дополнить сроком выполнения с 62 месяца  по 74 календарный месяц включительно;  

 Работы по строительству пешеходного перехода ПК6+66,4 (п. 21 Графика) - срок  выполнения с 15 месяца по 51 календарный месяц дополнить сроком с 62 месяца по 74  календарный месяц включительно;  

 Работы по строительству пешеходного перехода ПК9+53,48 (п. 22 Графика) - срок  выполнения с 15 месяца по 51 календарный месяц дополнить сроком с 62-месяца по 74  календарный месяц включительно;  

 Работы по строительству пешеходного перехода ПК16+27,8 (п. 23 Графика) - срок  выполнения с 15 месяца по 53 календарный месяц дополнить сроком с 62 месяца по 76  календарный месяц включительно;  

 Работы по строительству пешеходного перехода ПК24+76,28 (П. 24 Графика) - срок  выполнения с 16 месяца по 53 календарный месяц дополнить сроком с 61 месяца по 73  календарный месяц включительно;  

 Работы по благоустройству территории (п. 25 Графика) - срок выполнения с 51 месяца  по 64 календарный месяц дополнить сроком с 72 месяца по 76 календарный месяц  включительно;  

 Пусконаладочные работы (п. 26 Графика) - срок выполнения 65 месяц дополнить  сроком с 71-месяца по 78 календарный месяц включительно.  

 Взыскать с Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция  дорожного строительства» в пользу АО «Стройтрансгаз» расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого  решения.  

Судья Е.А. Морозова