АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-17332/2023

03 апреля 2024 г.

г. Барнаул

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Мутылиной О.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску федерального государственного бюджетного учреждения  «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства  здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул) (ОГРН 

<

***> ИНН/КПП  

<

***>/222501001), место нахождения: 656045, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайстрой» (ОГРН  

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/220501001), место нахождения: 659100, 

<

...>) об обязании устранить недостатки в  выполненных и взыскании 147 572 руб. 71 коп.,  

при участии в заседании: 

от истца: ФИО1 - представителя по доверенности, ФИО2 -  представителя по доверенности, ФИО3 - представителя по доверенности;  

от ответчика: не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Алтайстрой» в течение 30  дней с даты вступления настоящего решения в законную силу устранить следующие  недостатки в работах, выполненных по контракту от 19.08.2022 № 0317100032922000183  на выполнение работ по устройству крылец, на объекте, расположенном в г. Барнауле  

ул. Ляпидевского, 1/3: 1. КРЫЛЬЦО 5 БЛОКА: 

- отслоение плитки полов крыльца от основания, разрушение клея, величина  уступов между смежными плитами составляет 3-5 мм, отклонение поверхности покрытия  от плоскости составляет 5 мм;  

2. КРЫЛЬЦО КИСЛОРОДНОЙ: 

- отслоение плитки полов крыльца от основания, разрушение клея, величина  

уступов между смежными плитами составляет 3-5 мм, отклонение поверхности покрытия  

от плоскости составляет 5 мм; 

- деформация ступеней, отслоение плитки от основания, разрушение клея,  

величина уступов между смежными плитами на ступенях составляет 4 мм;  

- отклонение поверхности покрытия пандуса от плоскости составляет 7мм, ширина  

швов между плитками облицовки пандуса имеет различную величину, величина уступов  

между смежными плитами пандуса составляет 3-6 мм; 3. КРЫЛЬЦО ПОЖАРНОГО ВХОДА 8 БЛОК: 

- деформация ступней, отслоение плитки от основания, разрушение клея, величина  

уступов между смежными плитами на ступенях составляет до 10 мм; 4. КРЫЛЬЦО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ: 

- деформация облицовки плиткой, наличие клея на поверхности плитки  

облицованной вертикальной поверхности крыльца, отслоение плиток от вертикальной  

поверхности крыльца; 

- деформация ступеней, отслоение плитки от основания, разрушение клея,  

величина уступов между смежными плитами на ступенях составляет 3-4 мм; 5. КРЫЛЬЦО ПОЖАРНОГО ВЫХОДА ИЗ СТОЛОВОЙ: 

- деформация облицованной вертикальной поверхности крыльца, отслоение плиток  

от вертикальной поверхности крыльца; 

- деформация ступеней, отслоение плитки от основания, разрушение клея,  

величина уступов между смежными плитками на ступенях составляет до 10 мм; 

6. КРЫЛЬЦО РАЗГРУЗОЧНОЕ В СТОЛОВУЮ: 

- отслоение плиток от вертикальной поверхности крыльца;  - отличия по цвету отдельных плит облицованной поверхности пандуса;  

7. КРЫЛЬЦО ПОЖАРНОГО ВЫХОДА БЛОКА № 9:  

- деформация ступеней, отслоение плитки от основания, величина уступов между  

смежными плитками на ступенях составляет до 7 мм; 

8. КРЫЛЬЦО ПОЖАРНОГО ВЫХОДА ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ:  - отклонение поверхности покрытия от плоскости составляет 8 мм;  9. КРЫЛЬЦО ПОЖАРНОГО ВЫХОДА БЛОКА № 6:  

- отслоение плиток от вертикальной поверхности крыльца;  - величина уступов между смежными плитами составляет 3 мм;  

10. КРЫЛЬЦО СТОЛОВОЙ: - деформация ступней, отслоение плитки от основания, разрушение клея; 

- отклонение поверхности покрытия от плоскости составляет 5 мм;  11. КРЫЛЬЦО ПОЖАРНОГО ВЫХОДА ИЗ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА:  

- величина уступов между смежными плитами составляет 3 мм;  

- деформация ступеней, отслоение плитки от основания, разрушение клея,  

величина уступов между смежными плитками на ступенях составляет до 5 мм. В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайстрой» в пользу  

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр  

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (г. Барнаул) 6 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате  государственной пошлины и 50 000 руб. в счет возмещения судебных издержек.  

Возвратить федеральному государственному бюджетному учреждению  «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства  здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул) из федерального бюджета РФ 1 500  руб. государственной пошлины..  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин