Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-9025/2020

г. Рязань

17 марта 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2021 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Ушаковой И.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску муниципального учреждения культуры "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (г. Рязань, ОГРН 

<

***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

Управление культуры администрации Пронского муниципального района (391140, Рязанская обл., p.п. Пронск, пл. Горького, д. 1)

Отдел капитального строительства и дорожной деятельности администрации Пронского муниципального района (391140, Рязанская область, Пронский район, рп. Пронск, площадь Горького, д. 1).

об обязании исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (дверные проемы) №0859200001118004211-0395725-01 от 18.06.2018,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности №21 от 21.01.2021, предъявлен диплом о высшем юридическом образовании  23468 от 11.07.2013, личность установлена на основании предъявленного паспорта.

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом 

 

установил:

муниципальное учреждение культуры "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (далее ответчик) с требованием об обязании общества с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (г. Рязань, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента  вступления решения  суда  в законную силу выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту  №0859200001118004211-0395725-01 от 18.06.2018 на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (дверные проемы), путем устранения за свой счет дефектов, зафиксированных в акте от 19.11.2019 б/н по обследованию гарантийного участка объекта по муниципальному контракту  №0859200001118004211-0395725-01 от 18.06.2018 на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (дверные проемы).

Ответчик  в судебное заседание не явился, своих представителей не направил. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие указанного лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке, предусмотренном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует: 18 июня 2018 года между Муниципальным учреждением культуры «Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальньш район» (далее -Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» (далее - Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0859200001118004211-0395725-01 на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК «Районный Дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район» (дверные проемы) (далее - Контракт), по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства своевременно выполнить работы по текущему ремонту в здании филиала Маклаковский  сельский Дом  культуры  МУК  «Районный Дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район» (дверные проемы) (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Состав и объем работ определяется согласно локально сметному расчету и техническому заданию (Приложение №1 к Контракту). Место выполнения работ: 391148, 

<

...> (раздел 1 Контракта).

Настоящий Контракт вступил в силу с момента подписания и действовал по 31 декабря 2018 года (п. 15.1. Контракта).

Согласно п. 2.1. Контракта общая цена Контракта составляет 216982,19руб.

В цену Контракта включены все расходы Подрядчика на выполнение под-рядных работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям настоящего Контракта; транспортные расходы; все подлежащие в связи с выполнением работ расходы на страхование, уплату налогов (в том числе налог на добавленную стоимость), пошлин, сборов и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат оплате.

В соответствии с пп. 6.3., 6.4. Контракта оплата за фактически выполненные работы производится на основании выставленного Подрядчиком счета, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

В п. 1.3. Контракта Стороны согласовали календарные сроки выполнения работ с момента заключения Контракта и до 10 сентября 2018 года в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).

Пунктами 7.1., 7.3., 7.4. Контракта Подрядчик обязался выполнить работы с соблюдением нормативно - технических документов, в сроки, предусмотренные Контрактом и предписаниями (актами) Заказчика; обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Контракту) и письменными указаниями Заказчика, а так же исполнять предписания Заказчика, выдаваемые в случае некачественного выполнения работ, в установленные предписанием сроки.

В рамках контракта работы Подрядчиком выполнены, Заказчиком приняты, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на сумму 216 982 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 19 копеек.

Выполненные работы были оплачены Подрядчику в полном объеме по платежному поручению №873846 от 08.10.2018 года.

Согласно п. 9.1. Контракта гарантии качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

В п. 9.2. Контракта на выполненные подрядные работы установлен гарантийный срок устранения дефектов - 5 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о необходимости направления представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка объекта с указанием даты, времени и места. Результаты обследования оформляются актом с указанием сроков их устранения (пункт 9.4. Контракта)

Пунктом 9.5. Контракта предусмотрено, что выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации объекта Подрядчик обязан устранять за свой счет и в сроки, установленные актом согласно п. 9.4. Контракта.

В ходе эксплуатации объекта в период течения гарантийного срока Заказчиком были выявлены дефекты препятствующие нормальной эксплуатации объекта и требующие устранения.

В связи с чем 14 ноября 2019 года Подрядчику было направлено извещение №114 от 13.11.2019 года о необходимости направления представителя Подрядчика для совместного обследования гарантийного участка объекта и подписания акта, фиксирующего дефекты, согласования сроков их устранения.

19 ноября 2019 года по результатам работы комиссии совместно с директором ООО «СТРОИ ИНДУСТРИЯ» составлен и утвержден акт №б/н по обследованию гарантийного участка объекта по муниципальному контракту № 0859200001118004211-0395725-01 от 18 июня 2018 года на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК «Районный Дом культуры муниципального образования -Пронский муниципальный район» (дверные проемы) (далее - акт), в котором зафиксирован факт наличия дефектов, а именно:

Фойе 1 этаж - провес верхнего бруса дверной коробки входа в зрительный зал;

Карман сцена, карман   - разрушение окраски дверного полотна с внутренней и наружной стороны;

Центральный вход со стороны администрации - коррозия (ржавчина) металла на входной двери; разрушение покрасочного покрытия

При составлении вышеуказанного акта Подрядчик факт наличия дефектов не отрицал и подписал без замечаний и возражений.

В последующем 18 декабря 2019 года Заказчик направил Подрядчику Требование об устранении дефектов выявленных в гарантийный период и отраженных в акте (исх. № 123/1 от 11 декабря 2019 года), в котором предложил устранить выявленные дефекты в срок не позднее 01 июня 2020 года, а так же согласовать в письменном виде конкретные сроки устранения выявленных дефектов.

В ответ на данное Требования от Подрядчика поступила информация, что дефекты, выявленные в ходе эксплуатации объекта будут устранены с наступлением благоприятных погодных условий.

20 января 2020 года Заказчик направил письмо от 09 января 2020 года №2 с требованием устранить выявленные дефекты и установить конкретные сроки их устранения.

12 февраля 2020 Заказчик обязался выполнить работы по гарантийным обязательствам в срок до 31 июля 2020 (исх. №25 от 12.02.2020 года).

Невыполнение Подрядчиком своих обязательств по устранению выявленных дефектов явилось основанием вновь направить письмо от 23 июля 2020 года №112 с требованием в срок не позднее 31 июля 2020 года устранить выявленные дефекты выполненных работ, которое было оставлено Подрядчиком без ответа. В нарушение пункта 9.6. Контракта, выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации объекта Подрядчиком в добровольном порядке не устранены, претензионные требования Заказчика не исполнены.

 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.10.2011 № 9382/11, в регулировании подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами ГК РФ: в части, не урегулированной статьями 763 - 767 названного Кодекса, должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4 главы 37 Кодекса, а затем - общие положения о договоре подряда (параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, данный спор подлежит разрешению с учетом норм о договоре строительного подряда и общих норм о подряде, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение под-рядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям - обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Положениями ст. 722 ГК РФ установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (п. 3 ст. 724 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 ГК РФ прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

Взяв на себя гарантийные обязательства по качеству выполненной работы в течение 5 (Пяти) лет с момента подписания акта сдачи-приемки работ, ответчик как подрядчик в силу п. 2 ст. 755 ГК РФ несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии со статьей 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1-5 статьи 724 ГК РФ. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 ГК РФ, составляет пять лет.

Согласно пункту 4 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины Подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Качественное выполнение спорных работ  ответчиком не подтверждено и не опровергнуты достоверными и допустимыми доказательствами, в связи с этим требование истца подлежит удовлетворению, с отнесением госпошлины на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (г. Рязань, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента  вступления решения  суда  в законную силу выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту  №0859200001118004211-0395725-01 от 18.06.2018 на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (дверные проемы), путем устранения за свой счет дефектов, зафиксированных в акте от 19.11.2019 б/н по обследованию гарантийного участка объекта по муниципальному контракту  №0859200001118004211-0395725-01 от 18.06.2018 на текущий ремонт в здании филиала Маклаковский сельский Дом культуры МУК "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (дверные проемы).

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (г. Рязань, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения культуры "Районный дом культуры муниципального образования - Пронский муниципальный район" (Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по уплате госпошлины 6000руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

 

Судья                                                                                 И.А. Ушакова