АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-18953/2019

г. Владивосток

23 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 23 сентября 2020 года.

          Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 3» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации: 06.06.1995)

к обществу с ограниченной ответственностью «Востокстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации: 05.04.2016)

о взыскании 142 043 рублей 41 копеек

при участии: стороны не явились, извещены,

установил:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 3» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Востокстрой» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 30 389 рублей 21 копеек, штрафа в размере 111 654 рублей 20 копеек.

          Определением суда от 22.10.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением от 23.12.2019 суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

          Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи с чем суд в порядке статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в их отсутствие.

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Между КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3» (Заказчик) и ООО «ВостокСтрой»  (Подрядчик), заключен контракт от 22.10.2018 № Ф.2018.490466, по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по текущему ремонту помещений учреждения (далее - «Работы»), подлежащих выполнению Подрядчиком на объекте по адресу: 

<

...> и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническим заданием (Приложение № 1), сметной документацией (Приложение № 2), календарным планом выполнения работ (Приложение № 3) (п. 1.2).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта общая цена Контракта составляет 5 582 708 (пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот восемь) рублей 70 копеек, НДС не предусмотрен.

Согласно пункту 2.5.2 Контракта оплата работ (этапа работ) будет производится поэтапно за каждый выполненный этап работы в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 3). Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 банковских дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (этапа работы) (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (этапа работы) и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с приложением № 3 к Контракту (Календарный планвыполнения работ) предусмотрено, что ремонт помещений цокольного этажа и первого этажа должен быть выполнен не позднее 15.12.2018.

Работы по ремонту цокольного этажа и первого этажа на сумму 1 383 948 рублей 89 копеек выполнены и сданы ответчиком по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 от 11.03.2019.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 7.8 Контракта, оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 14 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 2 дней, после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка.

25.05.2019, 11.06.2019 в адрес ООО «ВостокСтрой» направлены претензии с требованием об оплате неустойки и штрафа. 

Неисполнение указанного требования в добровольном порядке явилось основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в суд. 

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.

Между сторонами сложились правоотношения по контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе). 

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статьям 702, 711 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В силу статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 7 статьи 34 Закона о контрактной системе).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (пункт 8 статьи 34 Закона о контрактной системе).

 

В силу пункта 7.6 контракта за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Согласно пункта 7.5 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика (исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере фиксированной суммы согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, что составляет 2 % цены Контракта – 111 654 рублей 20 копеек.

Поскольку ответчиком допущена просрочка выполнения работ требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно. 

Неустойка начислена истцом только за нарушение срока работ по ремонту цокольного этажа и первого этажа от стоимости данных работ в  акту от 11.03.2019.

Расчет суммы неустойки за период с 17.12.2018 по 11.03.2019 судом проверен, признан верным. При этом ключевая ставка Банка России обоснованно применена истцом на дату исполнения обязательства, а именно на дату акта сдачи-приемки выполненных работ 11.03.2019, что соответствует правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.09.2019 №308-ЭС19-8291 по делу № А15-1198/2018.

 

Ответчиком не заявлено о снижении неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом заявленная истцом сумма пени меньше расчета пени, исходя из двукратной учетной ставки Банка России.

Таким образом, с ответчика, подлежит взысканию неустойка в заявленном размере 30 389 рублей 21 копеек.

Истцом также заявлено о взыскании штрафа по пункту 7.5 контракта в размере 111 654 рублей 20 копеек за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

В соответствии с пунктом 7.5 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика (исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере фиксированной суммы согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, что составляет 2 % цены Контракта – 111 654 рублей 20 копеек.

Как установлено решением Арбитражного суда Приморского края от 26.06.2020 по делу № А51-1627/2020, вступившим в законную силу, в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств по контракту, 31.10.2019 заказчик направил в адрес подрядчика письмо исх. № 680 от 31.10.2019 «Об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчика», контракт является расторгнутым. 

Указанным выше решением суда также удовлетворены требования о взыскании с ответчика штрафа по пункту 5.7 контракта за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 111 654 рублей 20 копеек. 

Между тем заявленное по настоящему рассматриваемому делу А51-18953/2020 требование о взыскании штрафа не содержит обоснованных доводов по основаниям начисления штрафа в размере 111 654 рублей 20 копеек.

Из текста иска и пояснений истца в судебном заседании истцом не обосновано за какое именно неисполнение или ненадлежащее исполнения Подрядчиком обязательств начислен штраф. Из материалов дела также не представляется возможным установить за какое именно нарушение начислен штраф, учитывая, что ранее по делу № А51-1627/2020 уже взыскан штраф за неисполнение в полном объеме и ненадлежащее исполнение ответчиком, принятых на себя  обязательств по спорному контракту. При этом иные нарушения, за которые также может быть взыскан штраф, ответчиком  в настоящем деле в нарушение статьи 65 АПК РФ не подтверждены. 

Таким образом, суд отказывает в удовлетворении требований о взыскании штрафа в размере 111 654 рублей 20 копеек.

По результатам рассмотрения спора, расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

          Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Востокстрой» в пользу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника №3» 30 389 (тридцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 21 копеек неустойки, 1 126 (одна тысяча сто двадцать шесть) рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

          В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Исполнительный лист выдается после вступления решения суда в законную силу по ходатайству взыскателя.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

          Судья                                                                             Зайцева Л.В.