Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-41851/2019

09 сентября 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  09 сентября 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ" (адрес:  Россия 193079, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТ С/ПОМ 2Н; Россия 197101, Санкт-Петербург, ул.Кронверская д.23,пом.304, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОМСТРОЙ" (адрес:  Россия 299011, Севастополь, ул. Володарского д. 3, пом. 1-4, ОГРН:  

<

***>);

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 21.03.2019

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 02.07.2019

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (далее – ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМСТРОЙ» (далее – ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ») о взыскании 2 409 852,14 руб. задолженности по договору подряда от 12.08.2015 № 22 и 172 353,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.04.2018 по 10.04.2019.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Представитель ответчика поддержал возражения против заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (субподрядчик) и ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ» (подрядчик) заключили договор подряда от 12.08.2015 № 22, по условиям которого субподрядчик в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 3) и Графиком выполнения СМР обязуется своими силами в определенный Договором К срок выполнить комплекс Работ на Объекте, и передать Работы Подрядчику в соответствии с утвержденной Проектной документацией, выданной Генподрядчиком Подрядчику, Рабочей документацией и НТД, действующими на территории Российской Федерации, а Подрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

По пункту 3.1 договора единичная расценка составляет 18500 руб. за 1 куб.м бетона, объемы отражены в Графике выполнения СМР. Окончательная цена договора определяется по факту выполненных работ на основании Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справок по форме КС-3.

Согласно пункту 4.3 договора оплата за фактически выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика с расчетного счета Подрядчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика. В случае изменения своего расчетного счета Субподрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Подрядчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Подрядчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.

Оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ производится Подрядчиком в течение 180 (сто восемьдесят) банковских дней после подписания Подрядчиком оформленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригиналов счета и счета-фактуры. При этом сумма аванса или части аванса, перечисленного Подрядчиком Субподрядчику, зачитывается в стоимость выполненных Субподрядчиком Работ, на основании Акта о зачете аванса.

Оплата поставленного оборудования осуществляется в течение 90 (девяносто) банковских дней на основании товарных накладных формы ТОРГ-12, актов о приеме (поступлении) оборудования формы ОС-14, актов о приемке оборудования в монтаж формы ОС-15, актов установки оборудования, не требующего монтажа, оригиналов счета и счета-фактуры.

В силу пункта 4.4 договора одновременно с представлением документов, указанных в пункте 4.3 Договора Субподрядчиком предоставляет их в электронном виде, в формате Microsoft Excel, а акты о приемке выполненных работ (формы № КС-2) еще и в сметной программе «Госстройсмета».

По пункту 4.5 договора оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 95 (девяносто пять)% от цены Договора. Оставшаяся часть цены Договора будет выплачена Субподрядчику при / окончательном расчете.

Согласно пункту 4.6 договора окончательный расчет по Договору производится в течение 90 (девяносто) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Договору.

В силу пункта 4.7 договора документы на оплату выполненных работ передаются Субподрядчиком Подрядчику под роспись, либо направляются заказным письмом. Указанные документы должны быть представлены до 25-го числа отчетного месяца, а за декабрь до 15 января следующего года.

По пункту 4.8 договора ежемесячное подписание Подрядчиком и Субподрядчиком форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию Генподрядчиком. Оно лишь подтверждает факт их выполнения Субподрядчиком и определяет сумму промежуточного финансирования. По Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) к Подрядчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ.

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» представил в материалы дела двусторонние акты формы КС-2 о выполнении работ по спорному договору.

Исходя из акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.09.2017 задолженность подрядчика по спорному договору составила 3 709 852,14 руб.

В период с 15.12.2018 по 26.04.2018 подрядчик оплатил 1 300 000 руб., в связи с чем задолженность составила 2 409 852,14 руб.

Субподрядчик направил претензию от 21.11.2017 об оплате долга, однако подрядчик задолженность не оплатил, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

По пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Факт выполнения субподрядчиком работ на сумму 3 709 852,14 руб. подтверждается представленными в материалы дела актами формы КС-2, подписанными подрядчиком без возражений по объему и качеству.

Как следует из материалов дела, стороны подписали итоговый акт от 05.12.2016 окончания работ по спорному договору.

В отзыве ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ» подтвердило наличие задолженности по договору в размере 2 409 852,14 руб.

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты работ в полном объеме, требование о взыскании 2 409 852,14 руб. долга подлежит удовлетворению.

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» просит взыскать также проценты, начисленные на сумму основного долга по статье 395 ГК РФ за период с 27.04.2018 по 10.04.2019 в размере 172 353,94 руб. с учетом контррасчета ответчика.

Расчет проверен судом и признан верным. Требование о взыскании 172 353,94 руб. процентов подлежит удовлетворению. В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 2 409 852,14 руб. задолженности, 172 353,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМСТРОЙ» в доход федерального бюджета 35911 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.