АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-10072/2025

г. Нижний Новгород                                                                                        09 сентября 2025 года

резолютивная часть решения объявлена                                                               14 августа 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Трясковой Надежды Викторовны (шифр 9-228),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шлюндиной Ю.Е.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью «Развитие»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «А2 ТЭК»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

о взыскании 2 417 464,55  рублей,

при участии представителей сторон:

от  истца: ФИО1 (доверенность от 06.06.2025),

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 10.04.2025),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Развитие»  обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «А2 ТЭК»  о взыскании 2 393 529,25  руб. долга, 23 935,30  руб. неустойки.

Истец в судебном заседании заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит взыскать с ответчика 1 686 380,20  руб. задолженности по договору от 27.05.2022г., 16 863,80  руб. неустойки.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение судом принято.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, явку своего представителя в суд не обеспечил, мотивированный отзыв на исковое заявление не направил.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд установил следующее.

ООО «Развитие» (истец, субподрядчик») и ООО «А2 ТЭК» (ответчик, подрядчик) подписали договор подряда от 27.05.2022 г. № ЖКР/р-4022/4/10 на выполнение комплекса работ по завершению строительства: «Четвертая и пятая очередь строительства многоквартирного дома переменной этажности, инженерная и транспортная инфраструктура, расположенного и по адресу: 

<

...>» от 03.12.2021 г., идентификатор объекта - р- 4022, заключенного между АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (генподрядчик) и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области (заказчик), а также в рамках договора № 22 от 01.02.2022г.. заключенного между ООО «А2 ТЭК» (подрядчик) и АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (генподрядчик).

В соответствии с пунктом 2.1 договора субподрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства объекта в соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями договора, нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и строительного контроля, и передать результат работ подрядчику.

Согласно пункту 2.2 договора истец обязался выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по работы по внутренней отделке стен, потолков и полов в соответствии с разделом 3. «Архитектурные решения. Шифр 04-РА-23-419-ПД-АР», виды и объем которых указаны в спецификации № 1 (Приложение №2).

Место выполнения работ, согласно п.2.4 договора: 

<

...> д. ЮЛ. Земельный участок с кадастровым № 52:21:0000125:60, площадью 19 153 кв. м.

В соответствии с п. 3.3. сроки выполнения работ по внутренней отделке стен, потолков и полов: с 01 июня 2022 г. по 30 сентября 2022 г. с учетом графика производства работ.

Согласно пункту 4.1. цена договора определена в соответствии со спецификацией (Приложение №2) и составляет 50 987 071,09 (пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС (20%) 8 497 845,18 (восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 18 коп.

Порядок оплаты по договору установлен в пункте 4.2 договора.

В соответствии с п.4.2.1 авансовый платеж по договору составляет 30% от цены договора, что составляет 15 296 121,33 (пятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч сто двадцать один) рубль 33 копейки, включая НДС (20%) в сумме 2 549 353,56 (два миллиона пятьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 56 коп. и оплачивается двумя траншами.

Первый транш в размере 15% от цены договора, что составляет 7 648 060,67 (семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьдесят) рублей 67 копеек, включая НДС (20%) в сумме 1 274 676,78 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 78 коп. оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату (п. 4.2.2. договора);

Второй транш в размере 15% от цены договора, что составляет 7 648 060,67 (семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьдесят) рублей 67 копеек, включая НДС (20%) в сумме 1 274 676,78 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 78 коп. оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения первого транша на основании выставленного на оплату счета (п. 4.2.3. договора).

Согласно п. 4.2.4. оставшуюся сумму подрядчик выплачивает субподрядчику за фактически выполненные и принятые подрядчиком, генподрядчиком работы в течение пяти банковских дней в соответствии с условиями п. 5.3. договора, с учетом оплаченной суммы, указанной в п. 4.2.1.

Приемка фактически выполненных субподрядчиком работ за прошедший отчетный период (календарный месяц) согласно п. 5.3. осуществляется в следующем порядке:

Не позднее 2-го числа отчетного периода, субподрядчик направляет подрядчику подписанные и согласованные всеми сторонами договора, включая АО «СЗ НО «Дирекция по строительству», Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области, документы в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ.

После завершения производства работ субподрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения данных работ обязан письменно уведомить подрядчика о завершении работ и готовности предъявить работы к приемке и передачи его генеральному подрядчику с приложением документов, необходимых для приемки (пункт 5.7 договора).

В соответствии с пунктом 5.8. договора подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7. договора, осуществляет осмотр выполненных работ при участии генподрядчика, осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора.

В случае нарушения подрядчиком, генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых работ по договору субподрядчик имеет право взыскать с подрядчика, генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа (пункт 17.2. договора).

В силу принятых на себя обязательств истец выполнил работы надлежащим образом, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 01.10.2024 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 01.10.2024.

Истец в адрес ответчика направил документы, предусмотренные п.5.7 договора.

По мнению истца, ответчик уклоняется от приемки части работ по договору.  Акт о приемке выполненных работ от 01.02.2025 №2, справка о стоимости выполненных работ от 01.02.2025 №2 ответчиком не подписаны.

Истец направил претензию от 21.02.2025 № 3/а2тэк  в адрес ответчика с требованием об отплате задолженности за выполненные работы и неустойку.

В ответ на претензию ответчик сообщил, что работы по акту 01.02.2025 №2 выполнены с недостатками и не могут быть приняты к приемке.

Не согласившись с ответчиком, истец обратился в суд с настоящим иском.

Рассмотрев исковые требования, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд счел иск подлежащим удовлетворению исходя из следующего. 

В силу статей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По правилам статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно части 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьёй 711 ГК РФ.

Согласно положениям статьи 753 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Поскольку факт выполнения работ подтверждается материалами дела и ответчиком не оспорен, требование истца о взыскании суммы задолженности в размере 1 686 380,20 руб. является правомерным.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 16 863,80 руб. неустойки за период с 27.02.2025 по 04.04.2025.

В силу статей 330, 331 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пеней). Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 17.2. договора предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком, генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых работ по договору субподрядчик имеет право взыскать с подрядчика, генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

Материалами дела установлено, что требование о взыскании неустойки является обоснованным и правомерным. 

Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

С учетом изложенного, требование о взыскании неустойки также подлежит удовлетворению.

Судебные расходы, понесенные истцом относятся на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "А2 ТЭК" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Развитие" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) 1 686 380 рублей 20 копеек долга и 16 863 рубля 80 копеек неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "А2 ТЭК" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 76 010 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья                                                                                                                           Н.В. Тряскова