10458_6282561  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-16376/19

03 декабря 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе: судьи Новожиловой М. А.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Крамаренко Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Южная строительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании, 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная  компания» безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному  контракту от 25.08.2017 № 124 «Выполнение работ по капитальному ремонту  (реставрации) объекта культурного наследия «Архитектурно-скульптурный комплекс  «Львы», в течение тридцати календарных дней начиная с 20 апреля 2020 года выполнить  работы по требующим ремонта:  

 парапетам балюстрад фонтана на площади 15,3 кв.м., а именно: демонтаж  шпаклевки, затем грунтовка, шпаклевка, повторная грунтовка и окраска в количестве двух  раз водостойкой краской серого цвета;  

колоннам балюстрад на площади 8,8 кв.м, а именно: демонтаж шпаклевки, затем  грунтовка, шпаклевка, повторная грунтовка и окраска в количестве двух раз водостойкой  краской серого цвета;  

основанию балюстрад на площади 17,45 кв.м, а именно: демонтаж шпаклевки,  затем грунтовка, шпаклевка, повторная грунтовка и окраска в количестве двух раз  водостойкой краской серого цвета;  

замене покрытия из мраморной крошки на площади 15 кв.м, а именно заменить  покрытие из мраморной крошки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная Строительная  Компания» в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Новожилова М. А.