Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-2599/2018

03 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  03 мая 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью  "Строй групп" (адрес:  Россия 199155, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/3Н ОФИС9, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: закрытое акционерное общество "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" (адрес:  Россия 192148, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> лит.А, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 1 497 634 руб. 20 коп. 

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 28.02.2018

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 22.12.2017

установил:

ООО "Строй групп" предъявил иск о взыскании с ЗАО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" 1 293 852 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 203 783 руб. 20 коп. неустойки за несвоевременную оплату на основании договора подряда № П-035/15-07 от 15.07.2014.

Ответчик по основному долгу возражений не представил, просит уменьшить неустойку по ст.333 ГК РФ. 

Определением от 15.02.2018 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства. 

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор подряда  № П-035/15-07 от 15.07.2014, согласно условиям которого истец обязался выполнить работы по строительству двух дополнительных сенохранилищ и крытого дезбарьера, в ответчик принять результат и уплатить обусловленную договором цену. 

Стоимость работ составляет 2 037 832 руб. 00 коп. 

Срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Истец выполнил работы на сумму 1 743 852 руб. 00 коп., что подтверждается подписанным сторонами актом формы КС-2 № 1 от 29.12.2014. 

До настоящего времени оплата не произведена. 

В соответствии с п.8.3 договора ответчику начислена неустойка за просрочку платежа с учетом 10% ограничения от стоимости в размере 203 783 руб. 20 коп. 

Суд считает, что с учетом ходатайства ответчика о применении ст.333 ГК РФ неустойка может быть уменьшена до 174 385 руб. 00 коп. 

Расходы по государственной пошлине полностью относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с закрытого акционерного общества "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй групп" 1 468 237 руб. 00 коп., из них: 1 293 852 руб. 00 коп. основного долга и 174 385 руб. 00 коп. неустойки, а также 28 357 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.