1476/2022-433345(2) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 26 декабря 2022 года 

по делу А33-17656/2022 Красноярск

20 декабря 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Востокавтоматика» в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить по договору № СВ-ТР-690 от 10.03.2022 работы по установке почтовых ящиков в многоквартирных  домах, расположенных по адресам: 

<

...> согласно оформленной заявке № 1 от 24.03.2022.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Востокавтоматика» в  пользу общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Жилищные  системы Красноярска» 224 151,15 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ  по договору № СВ-ТР-690 от 10.03.2022, 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Востокавтоматика» в  доход федерального бюджета 6 793 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Жилищные системы Красноярска» в доход федерального бюджета 2 028 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Р. Смольникова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 29.12.2021 1:06:17Кому выдана Смольникова Елена Рудольфовна