Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

      Именем Российской Федерации

     

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А21-2432/2020

г. Калининград

30 ноября   2020  года

Резолютивная часть решения объявлена 10 ноября 2020г.

Полный текст решения изготовлен 30  ноября 2020г. (в связи с болезнью судьи). 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи  Талалас Е.А., 

При ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда по адресу: 236040, 

<

...>,  исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «КАРТЭ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Министерству природных ресурсов и экологии Калининградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

об обязании принять работы

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности, паспорту, диплому;

от ответчика: ФИО3, по доверенности, паспорту, диплому; ФИО4, по доверенности, паспорту, диплому,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «КАРТЭ» (далее по тексту – истец, Общество) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Министерству природных ресурсов и экологии Калининградской области (далее – ответчик, Министерство) об обязании принять работы, а именно:

работы по искусственному лесовосстановлению в объеме 26,8 га, включая: Северное участковое лесничество - квартал 53 выдел 1 - 3,6га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га; квартал 14 выдел 2 - 12,3га; Семеновское участковое лесничество: квартал 19 выдел 17 - 0,1га; квартал 19 выдел 30 - 0,2га квартал 32 выдел 11 - 2,3га; квартал 21 выдел 20 - 2,0га;

работы по дополнению лесных культур в объеме 33,7 га, включая: Северное участковое лесничество - квартал 4 выдел 5 - 4,3га; квартал 5 выдел 11 - 2,2га; квартал 9 выдел 3 - 2,8га; квартал 9 выдел 6 - 2,2га; квартал 10 выдел 6 - 5,7га; квартал 18 выдел 1 - 3,1га; квартал 53 выдел 1 - 3,6га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га; Балтийское участковое лесничество - квартал 38 выдел 22 - 0,4га; квартал 36 выдел 13 - 0,3га; квартал 62 выдел 3 - 0,6га; квартал 218 выдел 6 - 0,7га; Семеновское участковое лесничество квартал 18 выдел 9 - 1,5га;

работы по уходу за лесными культурами в объеме 25,8 га, включая: Северное участковое лесничество квартал 53 выдел 1 - 3,6га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га (второй уход); квартал 4 выдел 5 - 4,3га (второй уход), квартал 5 выдел 11 - 2,2 га, квартал 9 выдел 6 - 2,2 га; Семеновское участковое лесничество - квартал 19 выдел 17 - 0,1га; квартал 19 выдел 30 - 0,2га; Балтийское участковое лесничество - Квартал 61 выдел 13 - 0,6 га;

работы по уходу за молодняками в объеме 16,4 га, включая: Светлогорское участковое лесничество - квартал 69 выдел 40 - 1,9га; квартал 75 выдел 23 - 1,4га; квартал 47 выдел 20 - 1,0га; Балтийское участковое лесничество - квартал 150 выдел 7 - 1,5га; квартал 22 выдел 8 - 4,3га; квартал 61выдел 4 - 0,5га; Семеновское участковое лесничество - квартал 136 выдел 8 - 3,7га квартал 163 выдел 23 - 0,2га, квартал 40 выдел 32 - 1,9га;

работы по прочистке и обновлению противопожарных полос в объеме 13,781 км, включая: Балтийское участковое лесничество - квартал 62 выдел 8 - 47м; квартал 62 выдел 6 - 96м; квартал 62 выдел 20 - 131м; квартал 62 выдел 2 - 547м; квартал 116 выдел 2 - 400м; Светлогорское участковое лесничество - квартал 76 выдел 1 - 0,21 км, квартал 76 выдел 3 - 0,18 км, квартал 76 выдел 4 - 0,07 км, квартал 76 выдел 5 - 0,07 км, квартал 76 выдел 6 - 0,1 км, квартал 76 выдел 7 - 0,43 км, квартал 76 выдел 10 - 0,19 км, квартал 76 выдел 14 - 0,33 км, квартал 76 выдел 20 - 0,23 км, квартал 76 выдел 19 - 0,24 км, квартал 76 выдел 22 - 0,05 км, квартал 76 выдел 21 - 0,07 км, квартал 76 выдел 23 - 0,03 км, квартал 81 выдел 5 - 0,08 км, квартал 81 выдел 4 - 0,05 км, квартал 81 выдел 7 - 0,13 км, квартал 81 выдел 8 - 0,18 км, квартал 81 выдел 13 - 0,24 км, квартал 81 выдел 14 - 0,13 км, квартал 85 выдел 7 - 0,01 км, квартал 85 выдел 8 - 0,08 км, квартал 85 выдел 10 - 0,85 км, квартал 90 выдел 17 - 0,08 км, квартал 90 выдел 23 -0,24 км, квартал 90 выдел 22 - 0,18 км, квартал 90 выдел 25 - 0,17 км, квартал 90 выдел 33 - 0,21 км, квартал 90 выдел 32 - 0,13 км, квартал 90 выдел 31 - 0,13 км, квартал 90 выдел 29 - 0,15 км, квартал 28 выдел 39 - 0,07 км, квартал 28 выдел 33 - 0,02 км, квартал 28 выдел 41 - 0,29 км, квартал 28 выдел 40 -0,03 км, квартал 28 выдел 42 - 0,12 км, квартал 28 выдел 62 - 0,15 км, квартал 28 выдел 54 - 0,2 км, квартал 40 выдел 23 - 0,26 км, квартал 40 выдел 42 - 0,5 км, квартал 40 выдел 19 - 0,07 км, квартал 40 выдел 20 -0,18 км, квартал 95 выдел 24 - 0,32 км, квартал 95 выдел 33 - 0,25 км, квартал 95 выдел 16 - 0,04 км, квартал 95 выдел 35 - 0,39 км, квартал 95 выдел 36 - 0,1 км, квартал 95 выдел 25 - 0,12 км, квартал 95 выдел 26 - 0,24 км, квартал 95 выдел 27 - 0,07 км, квартал 95 выдел 1 5 - 0,68 км, квартал 95 выдел 14 -0,14 км, квартал 95 выдел 13 - 0,27 км, квартал 95 выдел 5 - 0,07 км, квартал 95 выдел 6 - 0,32 км, квартал 95 выдел 28 - 0,43 км, квартал 95 выдел 43 - 0,1 км, квартал 95 выдел 40 - 0,09 км, квартал 95 выдел 39 -0,08 км, квартал 95 выдел 37 - 0,68 км, квартал 95 выдел 38 - 0,09 км, квартал 97 выдел 1 - 0,46 км, квартал 97 выдел 8 - 0,08 км, квартал 97 выдел 3 - 0,16 км, квартал 97 выдел 4 - 0,19 км;

работы по реконструкции дорог п/п назначения в объеме 6,22 км, включая: Переславское участковое лесничество - квартал 37 выдел 31 - 0,2км; квартал 33 выдел 32 - 1,3км; Балтийское участковое лесничество - Кварталы 32,33 - 0,8км; кварталы 34,35 - 1,97км; кварталы 76,77,78 - 1,95км;

работы по прочистке и обновлению просек в объеме 3,901 км, включая: Семеновское участковое лесничество - квартал 167 выдел 21 - 0,85км; Светлогорское участковое лесничество - квартал 46 выдел 15 - 1,151 км; квартал 81 выдел 16 - 0,4км; квартал 36 выдел 32 - 0,8км; Матросовское участковое лесничество квартал 48 выдел 33 - 0,7км;

работы по прокладке просек в объеме 1 км, включая: Матросовское участковое лесничество квартал 13 выдел 26 - 1,0км.

биотехнические мероприятия в объеме 71,5 га, включая: Семеновское участковое лесничество -квартал 18 выдел 30 - 0,8га; квартал 18 выдел 27 - 0,6га; квартал 19 выдел 4 - 0,6га; квартал 19 выдел 3 -0,7га; Светлогорское участковое лесничество - квартал 36 выдел 4 - 3,5га; квартал 36 выдел 5 - 1,4га; квартал 36 выдел 6 - 2,2га; квартал 97 выдел 24 - 20,6га; квартал 97 выдел 33 - 9,0га; квартал 97 выдел 19 - 3,2га; квартал 97 выдел 1 - 2,2га; квартал 97 выдел 26 - 4,8га; Балтийское участковое лесничество квартал 36 выдел 1 - 3,1га; квартал 37 выдел 16 - 4,6га; квартал 38 выдел 21 - 3,2га; квартал 39 выдел 3 -3,7га; Переславское участковое лесничество - квартал 49 выдел 3 - 7,3га.

В  судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме. Направил письменные пояснения. Ходатайство о назначении экспертизы оставил на усмотрение суда.

Ответчик возражал по доводам, изложенным в отзыве на иск. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд установил.

14 февраля 2012 года между ООО «КАРТЭ» (Арендатор) и Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области (Арендодатель) заключен договор аренды лесного участка № 200-з.д. (далее – Договор аренды), в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности, определенный в пункте 2 главы 1 Договора (далее – лесной участок) в целях заготовки древесины.

 В силу пп. 11 п. 12 раздела 3 Договора аренды Арендатор обязан осуществлять мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом, противопожарное обустройство лесов на лесном участке на условиях, в объемах и в сроки, которые указаны в приложении № 7 к договору и проекте освоения лесов, в том числе: 

- строительство, содержание и ремонт дорог противопожарного назначения; 

- прокладку противопожарных минерализованных полос почвообразующими орудиями либо иными способами; 

- уход за противопожарными минерализованными полосами; 

- проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов; 

- ежедневно информировать Арендодателя о пожарной обстановке на арендуемом лесном участке в пожароопасный период; 

- профилактические меры борьбы с вредными организмами – наземные истребительные меры борьбы биологическим методом, при возникновении очагов вредных организмов, проводить их локализацию и ликвидацию; 

- благоустройство территории; 

 - искусственное лесовосстановление (посадку леса, согласно проектам лесовосстановления); 

- комбинированное лесовосстановление; 

- содействие естественному лесовосстановлению; 

- дополнение лесных культур; 

- уход за лесными культурами до момента перевода в лесопокрытую площадь; 

- отвод лесосек под рубки; 

- уход за молодняками, согласно проекту рубок ухода; 

- в случае обнаружения незаконной порубки, совершенной третьими лицами, незамедлительно информировать о данном факте Арендодателя и правоохранительные органы для принятия ими соответствующих мер; 

- выполнять работы по воспроизводству лесов в случае изменения состояния лесных насаждений, вызванных стихийными бедствиями, пожарами, ветровалами, болезнями и другими неблагоприятными факторами после подписания настоящего договора, по соглашению с Арендодателем и с соответствующими изменениями в проекте освоения лесов. 

К Договору аренды было заключено Дополнительное соглашение от 23.03.2018 года, в рамках которого Приложение № 7 к Договору аренды было изложено в редакции Приложения № 10 к дополнительному соглашению от 23 марта 2018 года – Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке. В указанном перечне перечислены мероприятия (далее – Лесохозяйственные работы), которые Истец должен производить ежегодно. 

Как указывает истец, за 2019 год он надлежащим образом осуществил Лесохозяйственные работы, однако Ответчик уклоняется от приемки указанных работ: 

1. Работы по искусственному лесовосстановлению в объеме 26,8 га:

Истец в соответствии с письмом исх. № 72 от 08.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по искусственному лесовосстановлению по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 53 выдел 1 – 3,6га; квартал 72 выдел 1 – 6,3га; квартал 14 выдел 2 – 12,3га. Указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки от 28.05.2019 года. 

В части квартала 72 выдела 1 Истец повторно пытался сдать работы, что подтверждается письмом исх. № 180 от 12.09.2019 года, адресованному Министру природных ресурсов и экологии Калининградской области. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актами камеральной и натурной приемки выполненных работ от 02.10.2019 года. 

Истец в соответствии с письмом исх. № 84 от 23.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по искусственному лесовосстановлению по Семеновскому участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 19 выдел 17 – 0,1га; квартал 19 выдел 30 – 0,2га. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом натурного осмотра выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 14.06.2019 года. 

Истец выполнил работы по искусственному лесовосстановлению по Семеновскому участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 32 выдел 11 – 2,3га, что подтверждается письмом исх. № 228 от 28.10.2019. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 12.11.2019 (в отношении квартала 32 выдела 11) 

Истец выполнил работы по искусственному лесовосстановлению по Семеновскому участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 21 выдел 20 – 2,0га, что подтверждается Письмом исх. № 256 от 27.11.2019. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 13.12.2019. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по искусственному лесовосстановлению в объеме 26,8 га, включая: Северное участковое лесничество - квартал 53 выдел 1 – 3,6га; квартал 72 выдел 1 – 6,3га; квартал 14 выдел 2 – 12,3га; Семеновское участковое лесничество: квартал 19 выдел 17 – 0,1га; квартал 19 выдел 30 – 0,2га квартал 32 выдел 11 – 2,3га; квартал 21 выдел 20 – 2,0га. 

2. Работы по дополнению лесных культур в объеме 33,7 га: 

Истец в соответствии с письмом исх. № 72 от 08.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по дополнению лесных культур по Балтийскому участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 38 выдел 22 – 0,4га; квартал 36 выдел 13 – 0,3га; квартал 62 выдел 3 – 0,6га; квартал 218 выдел 6 – 0,7га. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом натурного осмотра выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 23.05.2019 года. 

Истец в соответствии с письмом исх. № 81 от 17.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по дополнению лесных культур по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 4 выдел 5 – 4,3га; квартал 5 выдел 11 – 2,2га; квартал 9 выдел 3 – 2,8га; квартал 9 выдел 6 – 2,2га; квартал 10 выдел 6 – 5,7га; квартал 18 выдел 1 – 3,1га. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом натурного осмотра выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 29.05.2019 года. Также указанным актом не были приняты направленные на утверждение работы по дополнению лесных культур Семеновского участкового лесничества – квартал 18 выдел 9 – в объеме 1,5 га. 

Истец в соответствии с письмом исх. № 72 от 08.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по искусственному лесовосстановлению по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 53 выдел 1 – 3,6га; квартал 72 выдел 1 – 6,3га. 

Указанные работы не были приняты по Акту камеральной и натурной приемки от 28.05.2019 года в связи с тем, что не хватает посадочных мест. Было дано устное пояснение о необходимости осуществить работы по дополнению лесных культур. 

Истец в соответствии с письмом исх. 165 от 29.08.2019 направил на согласование и приемку выполненные работы по дополнению лесных культур по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 53 выдел 1 – 3,6га, а также в соответствии с письмом исх. № 180 от 12.09.2019 работы по дополнению лесных культур по Северному участковому лесничеству квартал 72 выдел 1 – 6,3га. 

Однако указанные работы не были приняты Ответчиком. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по дополнению лесных культур в объеме 33,7 га, включая: Северное участковое лесничество - квартал 4 выдел 5 – 4,3га; квартал 5 выдел 11 – 2,2га; квартал 9 выдел 3 – 2,8га; квартал 9 выдел 6 – 2,2га; квартал 10 выдел 6 – 5,7га; квартал 18 выдел 1 – 3,1га; квартал 53 выдел 1 – 3,6га; квартал 72 выдел 1 – 6,3га; Балтийское участковое лесничество - квартал 38 выдел 22 – 0,4га; квартал 36 выдел 13 – 0,3га; квартал 62 выдел 3 – 0,6га; квартал 218 выдел 6 – 0,7га; Семеновское участковое лесничество квартал 18 выдел 9 – 1,5га. 

3. Работы по уходу за лесными культурами в объеме 25,8 га: 

Истец в соответствии с письмом исх. № 81 от 17.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по уходу за лесными культурами по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 72 выдел 1 – 6,3 га. 

Однако в соответствии с Актом натурного осмотра выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 29.05.2019 года в приемке указанных работ было отказано. 

Истец повторно произвел работы по уходу за лесными культурами по Северному участковому лесничеству (второй уход) в Балтийском участковом лесничестве в следующих объемах: квартал 72 выдел 1 – 6,3 га, что подтверждается письмом исх. № 180 от 12.09.2019 года. 

Также Истцом были направлены в соответствии с письмом исх. № 165 от 29.08.2019 года на согласование и приемку выполненные работы по уходу за лесными культурами по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 53 выдел 1 – 3,6га. 

Однако указанные работы были не приняты Ответчиком, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ от 02.10.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 158 от 20.08.2019 года Истцом были направлены на согласование и приемку выполненные работы по уходу за лесными культурами по Северному участковому лесничеству (второй уход) в следующих объемах: квартал 4 выдел 5 – 4,3 га, квартал 5 выдел 11 – 2,2 га. 

Однако указанные работы были не приняты Ответчиком, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ от 10.10.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 196 от 30.09.2019 года Истцом были направлены на согласование и приемку выполненные работы по уходу за лесными культурами по Северному участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 9 выдел 6 – 2,2 га. 

В соответствии с письмом исх. № 198 от 04.10.2019 года Истцом были направлены на согласование и приемку выполненные работы по уходу за лесными культурами по Семеновскому участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 19 выдел 17 – 0,1га, квартал 19 выдел 30 – 0,2га. 

Однако указанные работы были не приняты Ответчиком, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ от 18.10.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 207 от 09.10.2019 года Истец направил на согласование и приемку работы по уходу за лесными культурами в следующем объеме: Квартал 61 выдел 13 – 0,6га. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 01.11.2019 года. 

В связи с замечаниями, изложенными в Акте, Истец повторно направил на согласование работы, что подтверждается письмом исх. № 8 от 17.01.2020 года. 

Однако работы приняты не были. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по уходу за лесными культурами в объеме 25,8 га, включая: Северное участковое лесничество квартал 53 выдел 1 – 3,6га; квартал 72 выдел 1 – 6,3га; квартал 72 выдел 1 – 6,3га (второй уход); квартал 4 выдел 5 – 4,3га (второй уход), квартал 5 выдел 11 – 2,2 га, квартал 9 выдел 6 – 2,2 га; Семеновское участковое лесничество - квартал 19 выдел 17 – 0,1га; квартал 19 выдел 30 – 0,2га; Балтийское участковое лесничество - Квартал 61 выдел 13 – 0,6 га. 

4. Работы по уходу за молодняками в объеме 16,4 га: 

В соответствии с письмом исх. № 73 от 08.05.2019 года Истец направил на согласование и приемку работы по уходу за молодняками в следующем объеме: Балтийское участковое лесничество, квартал 22  выдел 8 – 4,3 га. 

Указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом натурного осмотра выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 23.05.2019 года. 

Также не были приняты работы по уходу за молодняками в следующем объеме: Светлогорское участковое лесничество, квартал 69 выдел 40 – 1,9га, квартал 75 выдел 23 – 1,4га, что подтверждается Актом камеральной и натурной проверки от 15.05.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 111 от 09.07.2019 года Истец направил на согласование и приемку указанные работы повторно, однако работы не приняты по настоящее время. 

В соответствии с письмом исх. № 164 от 29.08.2019 года Истец направил на согласование и приемку работы по уходу за молодняками в следующем объеме: Балтийское участковое лесничество – квартал 150 выдел 7 – 1,5 га, Светлогорское участковое лесничество – квартал 47 выдел 20 – 1,0га. 

Однако указанные работы приняты не были, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 13.09.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 207 от 09.10.2019 года Истец направил на согласование и приемку работы по уходу за молодняками в следующем объеме: Квартал 61 выдел 4 – 0,5га. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 01.11.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 85 от 27.12.2018 года Истец направил Ответчику на согласование работы по уходу за молодняками в Семеновском участком лесничестве – квартал 136 выдел 8 – 3,7 га. 

Однако указанные работы приняты не были, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки от 21.01.2019 г. 

В соответствии с письмом исх. № 53 от 17.04.2019 года Истец направил Ответчику на согласование работы по уходу за молодняками в Семеновском участком лесничестве – квартал 163 выдел 23 – 0,2га. 

Однако указанные работы приняты не были, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки от 16.05.2019 года. 

В соответствии с письмом исх. № 287 от 27.12.2019 года Истец направил Ответчику на согласование работы по уходу за молодняками в Семеновском участком лесничестве – квартал 40 выдел 32 – 1,9 га. 

Однако указанные работы приняты не были, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки за период с 21.01.2020 года по 23.01.2020 года. 

С учетом обстоятельств, изложенных в Акте, Истец повторно направил на приемку указанные работы, что подтверждается письмом исх. № 19 от 04.02.2020 года. 

Однако работы приняты не были.

 Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по уходу за молодняками в объеме 16,4 га, включая: Светлогорское участковое лесничество - квартал 69 выдел 40 – 1,9га; квартал 75 выдел 23 – 1,4га; квартал 47 выдел 20 – 1,0га; Балтийское участковое лесничество - квартал 150 выдел 7 – 1,5га; квартал 22 выдел 8 – 4,3га; квартал 61выдел 4 – 0,5га; Семеновское участковое лесничество - квартал 136 выдел 8 – 3,7га квартал 163 выдел 23 – 0,2га, квартал 40 выдел 32 – 1,9га. 

5. Работы по прочистке и обновлению противопожарных полос в объеме 13,781 км: 

Истец в соответствии с письмом исх. № 72 от 08.05.2019 года направил заместителю министра – начальнику департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области ФИО5 на согласование и приемку выполненные работы по прочистке и обновлению противопожарных полос по Светлогорскому участковому лесничеству в следующих объемах: квартал 76 выдел 1 – 0,21 км, квартал 76 выдел 3 – 0,18 км, квартал 76 выдел 4 – 0,07 км, квартал 76 выдел 5 – 0,07 км, квартал 76 выдел 6 – 0,1 км, квартал 76 выдел 7 – 0,43 км, квартал 76 выдел 10 – 0,19 км, квартал 76 выдел 14 – 0,33 км, квартал 76 выдел 20 – 0,23 км, квартал 76 выдел 19 – 0,24 км, квартал 76 выдел 22 – 0,05 км, квартал 76 выдел 21 – 0,07 км, квартал 76 выдел 23 – 0,03 км, квартал 81 выдел 5 – 0,08 км, квартал  81 выдел 4 – 0,05 км, квартал 81 выдел 7 – 0,13 км, квартал 81 выдел 8 – 0,18 км, квартал 81 выдел 13 – 0,24 км, квартал 81 выдел 14 – 0,13 км, квартал 85 выдел 7 – 0,01 км, квартал 85 выдел 8 – 0,08 км, квартал 85 выдел 10 – 0,85 км, квартал 90 выдел 17 – 0,08 км, квартал 90 выдел 23 – 0,24 км, квартал 90 выдел 22 – 0,18 км, квартал 90 выдел 25 – 0,17 км, квартал 90 выдел 33 – 0,21 км, квартал 90 выдел 32 – 0,13 км, квартал 90 выдел 31 – 0,13 км, квартал 90 выдел 29 – 0,15 км, квартал 28 выдел 39 – 0,07 км, квартал 28 выдел 33 – 0,02 км, квартал 28 выдел 41 – 0,29 км, квартал 28 выдел 40 – 0,03 км, квартал 28 выдел 42 – 0,12 км, квартал 28 выдел 62 – 0,15 км, квартал 28 выдел 54 – 0,2 км, квартал 40 выдел 23 – 0,26 км, квартал 40 выдел 42 – 0,5 км, квартал 40 выдел 19 – 0,07 км, квартал 40 выдел 20 – 0,18 км, квартал 95 выдел 24 – 0,32 км, квартал 95 выдел 33 – 0,25 км, квартал 95 выдел 16 – 0,04 км, квартал 95 выдел 35 – 0,39 км, квартал 95 выдел 36 – 0,1 км, квартал 95 выдел 25 – 0,12 км, квартал 95 выдел 26 – 0,24 км, квартал 95 выдел 27 – 0,07 км, квартал 95 выдел 15 – 0,68 км, квартал 95 выдел 14 – 0,14 км, квартал 95 выдел 13 – 0,27 км, квартал 95 выдел 5 – 0,07 км, квартал 95 выдел 6 – 0,32 км, квартал 95 выдел 28 – 0,43 км, квартал 95 выдел 43 – 0,1 км, квартал 95 выдел 40 – 0,09 км, квартал 95 выдел 39 – 0,08 км, квартал 95 выдел 37 – 0,68 км, квартал 95 выдел 38 – 0,09 км, квартал 97 выдел 1 – 0,46 км, квартал 97 выдел 8 – 0,08 км, квартал 97 выдел 3 – 0,16 км, квартал 97 выдел 4 – 0,19 км. 

Данное мероприятие проводилось уже по существующим минерализованным полосам, аналогичная работа осуществлялась Истцом в 2018 году и была принята ответчиком в соответствии с Актами № 14, 20 за декабрь 2018 года. 

Несмотря на это, Ответчиком работы приняты не были, что подтверждается Актом натурного осмотра выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 24.05.2019 года в связи с тем, что «в указанных выделах минерализованные полосы не проложены». 

В связи с указанной ситуацией Истец направил Ответчику письмо исх. № 65 от 29.04.2019 года о том, что работы по прочистке и обновлению минерализованных полос проводятся в местах, где они были ранее созданы (в 2017 и 2018 году). 

В соответствии с письмом исх. № 188 от 24.09.2019 года Истец направил Ответчику на согласование работы по прочистке и обновлению противопожарных полос в Балтийском участком лесничестве – квартал 62 выдел 8 – 47м; квартал 62 выдел 6 – 96м; квартал 62 выдел 20 – 131м; квартал 62 выдел 2 – 547м. 

Однако указанные работы приняты не были, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки от 11.10.2019 года. 

В соответствии с Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 18.12.2019 года не были приняты работы по прочистке и обновлению противопожарных полос в Балтийском участковом лесничестве – квартал 116 выдел 2 в объеме 400 м. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по прочистке и обновлению противопожарных полос в объеме 13,781 км, включая: Балтийское участковое лесничество - квартал 62 выдел 8 – 47м; квартал 62 выдел 6 – 96м; квартал 62 выдел 20 – 131м; квартал 62 выдел 2 – 547м; квартал 116 выдел 2 – 400м; Светлогорское участковое лесничество – квартал 76 выдел 1 – 0,21 км, квартал 76 выдел 3 – 0,18 км, квартал 76 выдел 4 – 0,07 км, квартал 76 выдел 5 – 0,07 км, квартал 76 выдел 6 – 0,1 км, квартал 76 выдел 7 – 0,43 км, квартал 76 выдел 10 – 0,19 км, квартал 76 выдел 14 – 0,33 км, квартал 76 выдел 20 – 0,23 км, квартал 76 выдел 19 – 0,24 км, квартал 76 выдел 22 – 0,05 км, квартал 76 выдел 21 – 0,07 км, квартал 76 выдел 23 – 0,03 км, квартал 81 выдел 5 – 0,08 км, квартал 81 выдел 4 – 0,05 км, квартал 81 выдел 7 – 0,13 км, квартал 81 выдел 8 – 0,18 км, квартал 81 выдел 13 – 0,24 км, квартал 81 выдел 14 – 0,13 км, квартал 85 выдел 7 – 0,01 км, квартал 85 выдел 8 – 0,08 км, квартал 85 выдел 10 – 0,85 км, квартал 90 выдел 17 – 0,08 км, квартал 90 выдел 23 – 0,24 км, квартал 90 выдел 22 – 0,18 км, квартал 90 выдел 25 – 0,17 км, квартал 90 выдел 33 – 0,21 км, квартал 90 выдел 32 – 0,13 км, квартал 90 выдел 31 – 0,13 км, квартал 90 выдел 29 – 0,15 км, квартал 28 выдел 39 – 0,07 км, квартал 28 выдел 33 – 0,02 км, квартал 28 выдел 41 – 0,29 км, квартал 28 выдел 40 – 0,03 км, квартал 28 выдел 42 – 0,12 км, квартал 28 выдел 62 – 0,15 км, квартал 28 выдел 54 – 0,2 км, квартал 40 выдел 23 – 0,26 км, квартал 40 выдел 42 – 0,5 км, квартал 40 выдел 19 – 0,07 км, квартал 40 выдел 20 – 0,18 км, квартал 95 выдел 24 – 0,32 км, квартал 95 выдел 33 – 0,25 км, квартал 95 выдел 16 – 0,04 км, квартал 95  выдел 35 – 0,39 км, квартал 95 выдел 36 – 0,1 км, квартал 95 выдел 25 – 0,12 км, квартал 95 выдел 26 – 0,24 км, квартал 95 выдел 27 – 0,07 км, квартал 95 выдел 15 – 0,68 км, квартал 95 выдел 14 – 0,14 км, квартал 95 выдел 13 – 0,27 км, квартал 95 выдел 5 – 0,07 км, квартал 95 выдел 6 – 0,32 км, квартал 95 выдел 28 – 0,43 км, квартал 95 выдел 43 – 0,1 км, квартал 95 выдел 40 – 0,09 км, квартал 95 выдел 39 – 0,08 км, квартал 95 выдел 37 – 0,68 км, квартал 95 выдел 38 – 0,09 км, квартал 97 выдел 1 – 0,46 км, квартал 97 выдел 8 – 0,08 км, квартал 97 выдел 3 – 0,16 км, квартал 97 выдел 4 – 0,19 км. 

6. Работы по реконструкции дорог п/п назначения в объеме 6,22 км: 

В соответствии с письмом исх. № 175 от 09.09.2019 года Истец направил на согласование и приемку работы по реконструкции дорог п/п назначения в следующем объеме: Переславское участковое лесничество, квартал 37 выдел 31 – 0,2км; квартал 33 выдел 32 – 1,3км. 

Указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ от 02.10.2019 года. 

Также Ответчиком не приняты работы по реконструкции дорог п/п назначения: - в Балтийском участковом лесничестве – кварталы 32, 33 в объеме 0,8 км, кварталы 34, 35 в объеме 1,97 км, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 14.01.2020 года. - в Балтийском участковом лесничестве – кварталы 76, 77 78 в объеме 1,95 км, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 18.12.2019 года. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по реконструкции дорог п/п назначения в объеме 6,22 км, включая: Переславское участковое лесничество - квартал 37 выдел 31 – 0,2км; квартал 33 выдел 32 – 1,3км; Балтийское участковое лесничество – Кварталы 32,33 – 0,8км; кварталы 34,35 – 1,97км; кварталы 76,77,78 – 1,95км. 

7. Работы по прочистке и обновлению просек в объеме 3,901 км: 

В соответствии с письмом исх. № 53 от 17.04.2019 года Истец направил на согласование и приемку работы по прочистке и обновлению просек в следующем объеме: Семеновское участковое лесничество - квартал 167 выдел 21 – 0,85км; Светлогорское участковое лесничество - квартал 46 выдел 15 – 1,151км; квартал 81 выдел 16 – 0,4км; квартал 36 выдел 32 – 0,8км. 

Однако указанные работы не были приняты, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ от 15.05.2019 года, от 16.05.2019 года. 

Повторно указанные работы были направлены на приемку в соответствии с письмом исх. № 287 от 27.12.2019 года. 

Также не были приняты работы по прочистке и обновлению просек в Матросовском участковом лесничестве – квартал 48 выдел 33 – в объеме 0,7 км, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 14.01.2020 года. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по прочистке и обновлению просек в объеме 3,901 км, включая: Семеновское участковое лесничество - квартал 167 выдел 21 – 0,85км; Светлогорское участковое лесничество - квартал 46 выдел 15 – 1,151 км; квартал 81 выдел 16 – 0,4км; квартал 36 выдел 32 – 0,8км; Матросовское участковое лесничество квартал 48 выдел 33 – 0,7км. 

8. Работы по прокладке просек в объеме 1 км: 

Истцом были выполнены работы по прокладке просек в Матросовском участковом лесничестве – квартал 13 выдел 26 в объеме 1,0 км, однако указанные работы не были приняты Ответчиком, что  подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 14.01.2020 года. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом работы по прокладке просек в объеме 1 км, включая: Матросовское участковое лесничество квартал 13 выдел 26 – 1,0км. 

9. Биотехнические мероприятия в объеме 71,5 га: 

Истцом были выполнены биотехнические мероприятия объеме 71,5 га, включая: Семеновское участковое лесничество - квартал 18 выдел 30 – 0,8га; квартал 18 выдел 27 – 0,6га; квартал 19 выдел 4 – 0,6га; квартал 19 выдел 3 – 0,7га; Светлогорское участковое лесничество - квартал 36 выдел 4 – 3,5га; квартал 36 выдел 5 – 1,4га; квартал 36 выдел 6 – 2,2га; квартал 97 выдел 24 – 20,6га; квартал 97 выдел 33 – 9,0га; квартал 97 выдел 19 – 3,2га; квартал 97 выдел 1 – 2,2га; квартал 97 выдел 26 – 4,8га; Балтийское участковое лесничество квартал 36 выдел 1 – 3,1га; квартал 37 выдел 16 – 4,6га; квартал 38 выдел 21 – 3,2га; квартал 39 выдел 3 – 3,7га; Переславское участковое лесничество - квартал 49 выдел 3 – 7,3га, что подтверждается Письмом исх. № 287 от 27.12.2019. 

Биотехнические мероприятия в Балтийском участковом лесничестве: квартал 36 выдел 1 – 3,1 га; квартал 37 выдел 16 – 4,6га; квартал 38 выдел 21 – 3,2га; квартал 39 выдел 3 – 3,7га не были приняты Ответчиком, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве от 14.01.2020 года. 

Биотехнические мероприятия в Семеновском участковом лесничестве - квартал 18 выдел 30 – 0,8га; квартал 18 выдел 27 – 0,6га; квартал 19 выдел 4 – 0,6га; квартал 19 выдел 3 – 0,7га; в Светлогорском участковом лесничестве - квартал 36 выдел 4 – 3,5га; квартал 36 выдел 5 – 1,4га; квартал 36 выдел 6 – 2,2га; квартал 97 выдел 24 – 20,6га; квартал 97 выдел 33 – 9,0га; квартал 97 выдел 19 – 3,2га; квартал 97 выдел 1 – 2,2га; квартал 97 выдел 26 – 4,8га; в Переславском участковом лесничестве - квартал 49 выдел 3 – 7,3га не были Ответчиком, что подтверждается Актом камеральной и натурной приемки выполненных работ ООО «КАРТЭ» в Калининградском лесничестве в период от 21.01.2020 года по 23.01.2020 года. 

Таким образом, Ответчиком не были приняты выполненные Истцом биотехнические мероприятия в объеме 71,5 га, включая: Семеновское участковое лесничество - квартал 18 выдел 30 – 0,8га; квартал 18 выдел 27 – 0,6га; квартал 19 выдел 4 – 0,6га; квартал 19 выдел 3 – 0,7га; Светлогорское участковое лесничество - квартал 36 выдел 4 – 3,5га; квартал 36 выдел 5 – 1,4га; квартал 36 выдел 6 – 2,2га; квартал 97 выдел 24 – 20,6га; квартал 97 выдел 33 – 9,0га; квартал 97 выдел 19 – 3,2га; квартал 97 выдел 1 – 2,2га; квартал 97 выдел 26 – 4,8га; Балтийское участковое лесничество квартал 36 выдел 1 – 3,1га; квартал 37 выдел 16 – 4,6га; квартал 38 выдел 21 – 3,2га; квартал 39 выдел 3 – 3,7га; Переславское участковое лесничество - квартал 49 выдел 3 – 7,3га. 

Полагая, что отказом принять выполненные работы по охране, защите и воспроизводству лесов ответчик нарушил права и законные интересы ООО «КАРТЭ», истец обратился в суд с настоящим иском. 

Суд признал иск  подлежащим удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации по договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса.

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом (часть 3 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации).

Согласно части 2 статьи 2 Лесного кодекса Российской Федерации имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Частью 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 данного Кодекса, или использующими леса в соответствии с указанным Кодексом лицами.

В силу статьи 61 Лесного кодекса Российской Федерации воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (часть 2 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации).

В п. 18 раздела 4 Договора аренды установлен порядок приемки лесохозяйственных работ: «все лесохозяйственные объекты подлежат обязательной приемке-сдаче сторонами в течение первой декады месяца, следующего за моментом окончания работ. Приемка работ на объектах, окончание работ на которых приходится на зимний период, производится с наступлением бесснежного периода. 

В течение трех дней с момента окончания работ, если окончание работ происходит в бесснежный период и в течение недели с момента схода снежного покрова в зимне-весенний период, Арендатор направляет Арендодателю уведомление об окончании работ на объекте. 

Арендодатель обязан в двадцатидневный срок с момента получения уведомления произвести приемку работ. 

Для осуществления приемки Арендодатель направляет Арендатору извещение, содержащее сведения о дате, времени и месте проведения приемки работ, а также сведения о лице, уполномоченном осуществлять приемку работ от имени Арендодателя. 

О результате приемки работ составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон. 

Уведомления и извещения направляются сторонами посредством факсимильной связи с последующим почтовым отправлением данных документов. 

Договором установлен срок на приемку работ, соответственно, все замечания и возражения относительно приемки должны быть представлены в 20-дневный срок.

Истцом был представлен в материалы дела протокол осмотра письменного доказательства от 26.09.2020 года 78 АБ 9208020, удостоверенный ФИО6, врио ФИО7, нотариуса нотариального округа СанктПетербурга (осмотр электронной почты Истца – carteoffice@gmail.com), в котором были осмотрены и удостоверены письма от Ответчика Истцу, которыми Ответчик направлял Истцу Акты камеральной и натурной приемки по истечении установленного договором срока  20-дневного срока.

Из изложенного следует, что Ответчиком не был соблюден порядок приемки работ, предусмотренный п. 18 раздела 4 Договора аренды. Ответчик, получив от Истца уведомления об окончании работ на объекте, не принял меры к направлению в адрес Истцу извещения о дате, времени и месте проведения  приемки выполненных арендатором работ с целью обеспечения участия в приемке представителей  арендатора. Соответственно, Истец был лишен возможности принимать участие в приемке работ. Все акты натурного осмотра составлены без участия и без уведомления Истца, и, как указано выше, с нарушением срока.

Истцом в материалы дела представлено Заключение эксперта № 003082 от 24.01.2020, составленное ООО «Лесные Экспертизы», подтверждающее качество лесохозяйственных работ. Указанное заключение содержит выводы о том, что качество работ, выполненных  Истцом, соответствует требованиям Приказа Минприроды России № 188 от 25.03.2019 г. «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», Приказа Минприроды России № 626 от 22.11.2017 «Об утверждении Правил ухода за лесами», Постановления Правительства РФ № 417 т 30.06.2007 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

Доводы представителей ответчика, что указанное заключение не может быть принято в качестве  доказательства по делу судом отклоняется в силу следующего.

Исследовав экспертное заключение, суд  считает, что оно подготовлено экспертом ФИО8   в соответствии с требованиями законодательства, при непосредственном осмотре 5-ти лесных участков, проведении необходимых измерений и фотографировании. В заключении отражены все необходимые сведения, выводы эксперта ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, противоречия в выводах отсутствуют, в связи с чем, указанное экспертное заключение может быть использовано в качестве надлежащего доказательства по делу.

Доказательств, опровергающих выводы, изложенные в Заключении, со стороны Ответчика не представлено. 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

На основании части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами.

Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

Суд самостоятельно оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие подлежат установлению.

Таким образом, именно суду, рассматривающему дело по существу, принадлежит право решения вопроса о необходимости получения для правильного разрешения спора дополнительных доказательств, в том числе и заключения экспертизы.

Принимая во внимание изложенное, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства истца о   назначение судебной экспертизы, что  приведет к необоснованному затягиванию судебного процесса.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 236007, 

<

...>) принять исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «КАРТЭ» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>) работы по охране, защите и воспроизводству лесов, а именно:

работы по искусственному лесовосстановлению в объеме 26,8 га, включая: Северное участковое лесничество - квартал 53 выдел 1 - 3,6га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га; квартал 14 выдел 2 - 12,3га; Семеновское участковое лесничество: квартал 19 выдел 17 - 0,1га; квартал 19 выдел 30 - 0,2га квартал 32 выдел 11 - 2,3га; квартал 21 выдел 20 - 2,0га;

работы по дополнению лесных культур в объеме 33,7 га, включая: Северное участковое лесничество - квартал 4 выдел 5 - 4,3га; квартал 5 выдел 11 - 2,2га; квартал 9 выдел 3 - 2,8га; квартал 9 выдел 6 - 2,2га; квартал 10 выдел 6 - 5,7га; квартал 18 выдел 1 - 3,1га; квартал 53 выдел 1 - 3,6га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га; Балтийское участковое лесничество - квартал 38 выдел 22 - 0,4га; квартал 36 выдел 13 - 0,3га; квартал 62 выдел 3 - 0,6га; квартал 218 выдел 6 - 0,7га; Семеновское участковое лесничество квартал 18 выдел 9 - 1,5га;

работы по уходу за лесными культурами в объеме 25,8 га, включая: Северное участковое лесничество квартал 53 выдел 1 - 3,6га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га; квартал 72 выдел 1 - 6,3га (второй уход); квартал 4 выдел 5 - 4,3га (второй уход), квартал 5 выдел 11 - 2,2 га, квартал 9 выдел 6 - 2,2 га; Семеновское участковое лесничество - квартал 19 выдел 17 - 0,1га; квартал 19 выдел 30 - 0,2га; Балтийское участковое лесничество - Квартал 61 выдел 13 - 0,6 га;

работы по уходу за молодняками в объеме 16,4 га, включая: Светлогорское участковое лесничество - квартал 69 выдел 40 - 1,9га; квартал 75 выдел 23 - 1,4га; квартал 47 выдел 20 - 1,0га; Балтийское участковое лесничество - квартал 150 выдел 7 - 1,5га; квартал 22 выдел 8 - 4,3га; квартал 61выдел 4 - 0,5га; Семеновское участковое лесничество - квартал 136 выдел 8 - 3,7га квартал 163 выдел 23 - 0,2га, квартал 40 выдел 32 - 1,9га;

работы по прочистке и обновлению противопожарных полос в объеме 13,781 км, включая: Балтийское участковое лесничество - квартал 62 выдел 8 - 47м; квартал 62 выдел 6 - 96м; квартал 62 выдел 20 - 131м; квартал 62 выдел 2 - 547м; квартал 116 выдел 2 - 400м; Светлогорское участковое лесничество - квартал 76 выдел 1 - 0,21 км, квартал 76 выдел 3 - 0,18 км, квартал 76 выдел 4 - 0,07 км, квартал 76 выдел 5 - 0,07 км, квартал 76 выдел 6 - 0,1 км, квартал 76 выдел 7 - 0,43 км, квартал 76 выдел 10 - 0,19 км, квартал 76 выдел 14 - 0,33 км, квартал 76 выдел 20 - 0,23 км, квартал 76 выдел 19 - 0,24 км, квартал 76 выдел 22 - 0,05 км, квартал 76 выдел 21 - 0,07 км, квартал 76 выдел 23 - 0,03 км, квартал 81 выдел 5 - 0,08 км, квартал 81 выдел 4 - 0,05 км, квартал 81 выдел 7 - 0,13 км, квартал 81 выдел 8 - 0,18 км, квартал 81 выдел 13 - 0,24 км, квартал 81 выдел 14 - 0,13 км, квартал 85 выдел 7 - 0,01 км, квартал 85 выдел 8 - 0,08 км, квартал 85 выдел 10 - 0,85 км, квартал 90 выдел 17 - 0,08 км, квартал 90 выдел 23 -0,24 км, квартал 90 выдел 22 - 0,18 км, квартал 90 выдел 25 - 0,17 км, квартал 90 выдел 33 - 0,21 км, квартал 90 выдел 32 - 0,13 км, квартал 90 выдел 31 - 0,13 км, квартал 90 выдел 29 - 0,15 км, квартал 28 выдел 39 - 0,07 км, квартал 28 выдел 33 - 0,02 км, квартал 28 выдел 41 - 0,29 км, квартал 28 выдел 40 -0,03 км, квартал 28 выдел 42 - 0,12 км, квартал 28 выдел 62 - 0,15 км, квартал 28 выдел 54 - 0,2 км, квартал 40 выдел 23 - 0,26 км, квартал 40 выдел 42 - 0,5 км, квартал 40 выдел 19 - 0,07 км, квартал 40 выдел 20 -0,18 км, квартал 95 выдел 24 - 0,32 км, квартал 95 выдел 33 - 0,25 км, квартал 95 выдел 16 - 0,04 км, квартал 95 выдел 35 - 0,39 км, квартал 95 выдел 36 - 0,1 км, квартал 95 выдел 25 - 0,12 км, квартал 95 выдел 26 - 0,24 км, квартал 95 выдел 27 - 0,07 км, квартал 95 выдел 1 5 - 0,68 км, квартал 95 выдел 14 -0,14 км, квартал 95 выдел 13 - 0,27 км, квартал 95 выдел 5 - 0,07 км, квартал 95 выдел 6 - 0,32 км, квартал 95 выдел 28 - 0,43 км, квартал 95 выдел 43 - 0,1 км, квартал 95 выдел 40 - 0,09 км, квартал 95 выдел 39 -0,08 км, квартал 95 выдел 37 - 0,68 км, квартал 95 выдел 38 - 0,09 км, квартал 97 выдел 1 - 0,46 км, квартал 97 выдел 8 - 0,08 км, квартал 97 выдел 3 - 0,16 км, квартал 97 выдел 4 - 0,19 км;

работы по реконструкции дорог п/п назначения в объеме 6,22 км, включая: Переславское участковое лесничество - квартал 37 выдел 31 - 0,2км; квартал 33 выдел 32 - 1,3км; Балтийское участковое лесничество - Кварталы 32,33 - 0,8км; кварталы 34,35 - 1,97км; кварталы 76,77,78 - 1,95км;

работы по прочистке и обновлению просек в объеме 3,901 км, включая: Семеновское участковое лесничество - квартал 167 выдел 21 - 0,85км; Светлогорское участковое лесничество - квартал 46 выдел 15 - 1,151 км; квартал 81 выдел 16 - 0,4км; квартал 36 выдел 32 - 0,8км; Матросовское участковое лесничество квартал 48 выдел 33 - 0,7км;

работы по прокладке просек в объеме 1 км, включая: Матросовское участковое лесничество квартал 13 выдел 26 - 1,0км.

биотехнические мероприятия в объеме 71,5 га, включая: Семеновское участковое лесничество -квартал 18 выдел 30 - 0,8га; квартал 18 выдел 27 - 0,6га; квартал 19 выдел 4 - 0,6га; квартал 19 выдел 3 -0,7га; Светлогорское участковое лесничество - квартал 36 выдел 4 - 3,5га; квартал 36 выдел 5 - 1,4га; квартал 36 выдел 6 - 2,2га; квартал 97 выдел 24 - 20,6га; квартал 97 выдел 33 - 9,0га; квартал 97 выдел 19 - 3,2га; квартал 97 выдел 1 - 2,2га; квартал 97 выдел 26 - 4,8га; Балтийское участковое лесничество квартал 36 выдел 1 - 3,1га; квартал 37 выдел 16 - 4,6га; квартал 38 выдел 21 - 3,2га; квартал 39 выдел 3 -3,7га; Переславское участковое лесничество - квартал 49 выдел 3 - 7,3га.

Взыскать с  Министерства  природных ресурсов и экологии Калининградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 236007, 

<

...>) в пользу   Общества  с ограниченной ответственностью «КАРТЭ» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>) 6 000   рублей в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.

Возвратить  Обществу  с ограниченной ответственностью «»КАРТЭ»  федерального бюджета 6 000   рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий одного месяца  со дня его принятия.

СудьяЕ.А. Талалас

 (подпись, фамилия)