Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-96318/2020

18 июля 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,    

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА" (190121, Санкт-Петербург город, улица Союза Печатников, 7, литер А, пом. 2Н, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГЛОРИЯ" (190005, Санкт-Петербург город, 7-я Красноармейская улица, дом 19, литера А, помещение 10Н, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 22.04.2019; 

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГЛОРИЯ" (далее – Фирма) о взыскании:

- 1779124,04 руб. задолженности, 177912,40 руб. неустойки за 549 дней просрочки по состоянию на 29.05.2019 по договору от 31.07.2017 № 17-07-31-ГЛР/С28/КР (далее – Договор № С28/КР) 

- 2756820,39 руб. задолженности, 275682,04 руб. неустойки за 537 дней просрочки по состоянию на 29.05.2019 по договору от 31.07.2017 № 17-07-31-ГЛР/С28/Ф (далее – Договор № С28/Ф),

- 2630804,51 руб. задолженности, 263080,45 руб. неустойки за 468 дней просрочки по состоянию на 29.05.2019 по Договору от 31.07.2017 № 17-07-31-ГЛР/С1/Ф (далее – Договор № С1/Ф). 

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчиком) и Фирмой (заказчиком) заключены Договоры № С28/КР, № С28/Ф, № С1/Ф на следующих условиях.

По условиям Договора № С28/КР заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 28, литера А. 

По условиям Договора № С28/Ф заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 28, литера А. 

По условиям Договора № С1/Ф заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 1/8, литера А. 

Согласно п. 2.1:

- Договора КР № С28/КР общая стоимость договора согласована сторонами в сметном расчете и составляет 4094107,58 руб.; 

- Договора № С28/Ф общая стоимость договора согласована сторонами в сметном расчете и составляет 6876033,78 руб.; 

- Договора № С1/Ф общая стоимость договора согласована сторонами в сметном расчете и составляет 4760262,66 руб. 

В соответствии с п.п. 2.2. и 2.2.1. Договоров оплата стоимости договора осуществляется заказчиком на основании выставленных подрядчиком счетов, путем безналичного перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в выставленном им счете, в следующем порядке: 

- Договора С28/КР аванс в размере 1228232,27 руб. производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после получения счета и счета-фактуры от подрядчика. Оплата производится при условии поступления денежных средств от финансирующей организации (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга или ее правопреемника) на расчетный счет заказчика; 

- Договора С28/Ф аванс в размере 2062810,13 руб. производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после получения счета и счета-фактуры от подрядчика. Оплата производится при условии поступления денежных средств от финансирующей организации (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга или ее правопреемника) на расчетный счет заказчика;

- Договора КР С1/Ф аванс в размере 1428078,80 руб. производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после получения счета и счета-фактуры от подрядчика. Оплата производится при условии поступления денежных средств от финансирующей организации (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга или ее правопреемника) на расчетный счет заказчика.

В силу п.2.2.2: 

- Договора С28/КР окончательный расчет в размере 2865875,31 руб. производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после получения счета на оплату и счета-фактуры от подрядчика. Счет выставляется подрядчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится при условии поступления денежных средств от финансирующей организации (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга или ее правопреемника) на расчетный счет заказчика. 

- Договора С28/Ф окончательный расчет в размере 4813223,65 руб. производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после получения счета на оплату и счета-фактуры от подрядчика. Счет выставляется подрядчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится при условии поступления денежных средств от финансирующей организации (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга или ее правопреемника) на расчетный счет заказчика. 

- Договора КР С1/Ф окончательный расчет в размере 3332183,23 руб. производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после получения счета на оплату и счета-фактуры от подрядчика. Счет выставляется подрядчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится при условии поступления денежных средств от финансирующей организации (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга или ее правопреемника) на расчетный счет заказчика.

В соответствии с п.3.1.1: 

- Договора № С28/КР начало работ – день, следующий за днем подписания акта приема-передачи объекта в работу.

- Договора С28/Ф начало работ - день, следующий за днем получения разрешения (ордер ГАТИ) на установку лесов; 

- Договора № КР С1/Ф начало работ - день, следующий за днем получения разрешения (ордер ГАТИ) на установку лесов.

Согласно п. 3.1.2: 

- Договора № С28/КР, в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2017 № 1, окончание работ – 90 календарных дней со дня начала работ;

- Договора № С28/Ф, в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2017 № 1 окончание работ – 90 календарных дней со дня начала работ;

- Договора № КР С1/Ф, в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2017 № 1, окончание работ – 90 календарных дней со дня начала работ.

В силу п.п. 3.5. Договоров в течение 5 рабочих дней с момента предъявления работ к сдаче заказчик подписывает акт и справку либо, при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах направляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков с указанием срока их устранения. В этом случае приемка выполненных работ производится заказчиком после устранения подрядчиком всех выявленных недостатков и отступлений о Договора в сроки, в объеме и порядке, установленном заказчиком. 

В соответствии с п.п. 5.4. Договоров при нарушении заказчиком сроков оплаты выполненных работ  подрядчик имеет право потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга. При этом понимается, что неустойка не взимается за просрочку оплаты авансовых платежей, перечисляемых заказчиком до начала выполнения подрядчиком работ. 

Подрядчик выполнил работы: 

- по Договору № С28/КР согласно актам о приемке выполненных работ от 21.11.2017 № 1 на сумму 1716173,11 руб., от 21.11.2017 № 2 на сумму 1741183,20 руб., справкам о стоимости выполненных работ и затрат; 

- по Договору № С28/Ф согласно актам о приемке выполненных работ от 09.12.2017 № 1 на сумму 2124964,62 руб., от 09.12.2017 № 2 на сумму 3144665,90 руб., справкам о стоимости выполненных работ и затрат;

- по Договору № С1/Ф согласно актам о приемке выполненных работ от 16.02.2018 № 1 на сумму 4226770,72 руб., от 16.02.2018 № 2 на сумму 282112,59 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат. 

Заказчик не оплатил работы: 

- по Договору № С28/КР стоимостью 1779124,04 руб.; 

- по Договору № С28/Ф стоимостью 2756820,39 руб.; 

- по Договору № С1/Ф стоимостью 2630804,51 руб.

Фирма обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу о взыскании неотработанного аванса по Договорам (дело № А56-104802/2018).

Общество в рамках того же дела подало встречный иск о взыскании с Фирмы  7166748,94 руб. задолженности и 716674,89 руб. неустойки по Договорам.

Решением суда от 29.05.2019 по делу № А56-104802/2018 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск возвращен. 

В связи с неоплатой Фирмой задолженности и неустойки Общество обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт выполнения работ:

- по Договору № С28/КР подтверждается актами о приемке выполненных работ от 21.11.2017 № 1 на сумму 1716173,11 руб., от 21.11.2017 № 2 на сумму 1741183,20 руб., справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными подрядчиком в одностороннем порядке;

- по Договору № С28/Ф подтверждается актами о приемке выполненных работ от 09.12.2017 № 1 на сумму 2124964,62 руб., от 09.12.2017 № 2 на сумму 3144665,90 руб., справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными подрядчиком в одностороннем порядке;

- по Договору № С1/Ф подтверждается актами о приемке выполненных работ от 16.02.2018 № 1 на сумму 4226770,72 руб., от 16.02.2018 № 2 на сумму 282112,59 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными подрядчиком в одностороннем порядке.

В силу ч. 1 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.05.2019 по делу № А56-104802/2018 следует, что акты по спорным договорам формы КС-2, КС-3 направлены Обществом Фирме с сопроводительными письмами и по электронной почте; мотивированных отказов от их подписания не направлено; некоммерческая организация "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" пояснила, что работы по адресам объектов спорных договоров выполнены Фирмой 21.11.2017, 09.12.2017, 16.02.2018. 

Ответчик мотивированного отзыва в материалы дела не представил.

Суд удовлетворяет требования о взыскании задолженностей в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 177912,40 руб. неустойки за 549 дней просрочки по состоянию на 29.05.2019 по договору № С28/КР, 275682,04 руб. неустойки за 537 дней просрочки по состоянию на 29.05.2019 по договору № С28/Ф, 263080,45 руб. неустойки за 468 дней просрочки по состоянию на 29.05.2019 по Договору № С1/Ф. 

Суд проверил расчет неустойки и признал его верным.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требования о взыскании неустоек в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГЛОРИЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА"

- 1779124,04 руб. задолженности, 177912,40 руб. неустойки по договору от 31.07.2017 № 17-07-31-ГЛР/С28/КР; 

- 2756820,39 руб. задолженности, 275682,04 руб. неустойки по договору от 31.07.2017 № 17-07-31-ГЛР/С28/Ф; 

- 2630804,51 руб. задолженности, 263080,45 руб. неустойки по Договору от 31.07.2017 № 17-07-31-ГЛР/С1/Ф;

- 4000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГЛОРИЯ" в доход федерального бюджета 58417 руб. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.