4649/2020-432866(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-45269/2020

21 декабря 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2020 года. Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2020 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Коросташова А.А.  

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  МАШИНОСТРОЕНИЯ" (адрес: Россия 190020, 

<

...> ЛИТ. Б, ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН-СПБ"  (адрес: Россия 191124, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании, при участии: - от истца: ФИО2 по доверенности от 28.12.2019, - от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.01.2020, 

установил:

Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  МАШИНОСТРОЕНИЯ" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  Обществу с ограниченной ответственностью "КРОН-СПБ" о взыскании 16 452 470 руб.  71 коп. неустойки по договору от 30.11.2017 № 37/8122-Д.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в  полном объёме, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.  

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, суд  установил следующее.  

30.11.2017 между сторонами заключен договор № 37/8122-Д (далее - Договор), в  соответствии с условиями которого Ответчик обязался выполнить по заданию Истца  работы по изготовлению заготовок крепежных изделий для разъемных соединений АЭУ  по ГОСТ 23304-78 из стали 38ХНЗМФА (далее - Работы) и сдать результаты Работ  Истцу, а Истец обязался принять и оплатить результаты Работ.  

Сроки изготовлений заготовок для АЭС «Куданкулам» установлен Календарным  планом в соответствии с Приложением № 2 к Договору.  

Согласно Приложению № 2 к Договору Работы по изготовлению заготовок для  АЭС «Куданкулам» должны быть завершены Ответчиком в следующие сроки: 1  

комплект - 15.01.2018, 2 комплект - 15.02.2018, 3 комплект - 15.06.2018, 4 комплект15.08.2018.  

Ответчик допустил нарушение сроков выполнения Работ. Просрочка изготовления  первого комплекта заготовок для АЭС «Куданкулам» составила 332 дня, второго  комплекта - 301 день, третьего комплекта - 515 дней, четвертого комплекта - 454 дня.  

В соответствии с п. 6.1 Договора, за нарушение сроков выполнения Работ,  Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,3% от цены невыполненных в  срок Работ за каждый день просрочки.  

Общая сумма неустойки, подлежащая уплате Истцу, составила, согласно  прилагаемому к настоящему исковому заявлению расчету, 16 452 470 руб. 71 коп.  

Истец направил Ответчику досудебную претензию, ответа на данную претензию  до настоящего времени не поступило.  

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

Статьей 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в  договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами  или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренным законом.  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Проверив расчет начисления неустойки, суд признал его обоснованным. Однако,  рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера неустойки, суд, учитывая фактор  несоразмерности последствиям просрочки исполнения обязательства, а также учитывая  принцип гражданского права о соразмерности ответственности последствиям  нарушения обязательства, счел возможным применить статью 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации в отношении неустойки, начисленной на основании п.  6.1 Договора по следующим основаниям.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.  

Принимая во внимание компенсационный характер гражданско-правовой  ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения  обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь,  которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

В пункте 42 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от  01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при решении вопроса об  уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть  уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе  обстоятельства, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к последствиям  нарушения обязательства.  

В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными  судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что  критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы  неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств;  длительность неисполнения обязательств и другие обстоятельства.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в Определении от 21.12.2000 N 263-О, гражданское законодательство  предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и  меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее  исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной  ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.  

Системный анализ положений действующего законодательства о неустойке,  конституционно-правовой смысл указанной нормы, изложенный в Определении  Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О, позволяют  прийти к выводу о том, что к основополагающим принципам российского права, в  частности, относится и принцип обеспечения нарушенных прав, гарантией реализации  которого является соблюдение требования о соразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательств, предусмотренного статьей 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Из указанного выше следует, что неустойка является мерой гражданско-правовой  ответственности должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  договорных обязательств и носит компенсационный характер по отношению к  возможным убыткам кредитора, направленный на восстановление нарушенных прав, а  не карательный (штрафной) характер.  

Поэтому, неустойка в силу статьи 333 ГК РФ по своей правовой природе носит  компенсационный характер и не может являться средством извлечения прибыли и  обогащения со стороны кредитора.  

Проверив расчет начисления неустойки, суд признал его обоснованным. Однако,  рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера неустойки, суд первой  инстанции, учитывая фактор несоразмерности последствиям просрочки исполнения  обязательства, а также учитывая принцип гражданского права о соразмерности  ответственности последствиям нарушения обязательства, счел возможным применить  статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении неустойки,  начисленной на основании п. 28.1.3 Контракта по следующим основаниям.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.  

Принимая во внимание компенсационный характер гражданско-правовой  ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения  обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь,  которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

В пункте 42 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от  01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при решении вопроса об  уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть  

уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе  обстоятельства, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к последствиям  нарушения обязательства.  

Учитывая изложенное, а также заявление ответчика об уменьшении неустойки суд  считает возможным применить положения статьи 333 ГК РФ, и исходя из общей суммы  начисленной неустойки, определить общий размер ответственности в размере 6 500 000  руб. 00 коп.  

В остальной части иска следует отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КРОН-СПБ" в пользу  Акционерного общества "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  МАШИНОСТРОЕНИЯ" 6 500 000 руб. неустойки, 105 262 руб. судебных расходов по  уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Коросташов А.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 06.09.2020 7:12:55

 Кому выдана Коросташов Алексей Анатольевич