Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

 

Суд в составе судьи Хмелевцевой А.С., 

руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Отказ Администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от требований в части пунктов 4, 5 просительной  части (о взыскании 515 575 рублей, 75 304,98 рубля) принять, в указанной части производство  по делу – прекратить.  

Ходатайство Администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о рассмотрении дела в ее отсутствие –  удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РостовСтройПодряд»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный срок с момента вступления в законную  силу судебного акта по настоящему делу безвозмездно устранить выявленные недостатки  работ по муниципальным контрактам от 30.07.2019 № 0318300019719000292, от 03.06.2019 №  0318300010719000135 по благоустройству общественной территории ул. Октябрьской от  железнодорожного вокзала до площади Жукова и ул. Переселенческой в г. Тихорецк, а  именно:  

восстановить существующие отводы ливневых стоков согласно акта от 15.12.2020 о  выявленных в период гарантийного срока недостатках выполненных работ по  муниципальному контракту;  

обеспечить наличие разуклонки территории с соблюдением перепадов высот в  следующих местах в 

<

...> на повороте к магазину «Кроп пиво»  площадь 16 м²; район кафе «Инфинити» площадь 40 м²; район магазина «Зоомир» и магазина  «Цветы» площадь 116,25 м²; ул. Переселенческая, угол Ж/Д вокзала и цветочного магазина  площадь 150 м²;  

устранить ржавчину по периметру ограждения 345,6 м; 

уложить асфальтобетонную смесь, соответствующую требованиям, установленным в  нормативно-технической документации, а именно техническим заданиям, локальным  сметным расчетам (приложения № 3 к контрактам), ГОСТ 9128-2013 по показателю  водонасыщения и зерновому составу и рекомендуемому содержанию вяжущего в смеси.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РостовСтройПодряд»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации Тихорецкого городского  поселения Тихорецкого района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) стоимость затрат на  самостоятельное устранение выявленных в период гарантийного срока дефектов в сумме 113  091 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РостовСтройПодряд»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 10 393 рубля.  

Решение суда может быть обжаловано в течение 1 месяца в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд.  

Судья А.С. Хмелевцева