АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-8929/23-131-165

г. Москва

10 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2023 года  Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2023 года  

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истец ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ  ДОРОГИ"  

ответчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЧУРИНСКИЙ  ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД "МИЛОРЕМ"  

о взыскании 1 030 255 руб. 92 коп. в заседании приняли участие: от истца: ФИО2 по доверенности от 30.11.2020г. № МОСК НЮ-20/Д от ответчика: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ  ДОРОГИ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ  ОБЩЕСТВУ "МИЧУРИНСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД "МИЛОРЕМ" о  взыскании 1 030 255 руб. 92 коп. неустойки по договору № 4667895 на выполнение работ  по ремонту и модернизации тягового подвижного состава от 29.12.2021 г.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного  разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Дело  рассмотрено в отсутствие представителей ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.  

Через канцелярию суда посредством электронной почты от ответчика поступило  заявление о проведении судебного заседания о проведении судебного заседания в его  отсутствие, отзыв на исковое заявление, в котором просит применить ст. 333 ГК РФ.  

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, представил документы во  исполнение определения суда, представил возражение на отзыв ответчика против  применения ст. 333 ГК РФ возражал.  

Ответчик возражений не заявил. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска,  доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав в судебном заседании  полномочных представителей сторон, которые поддержали и изложили свои позиции по  делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования  подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик)  был заключен договор № 4667895 на выполнение работ по ремонту и модернизации  тягового подвижного состава от 29.12.2021 г., в соответствии с которым заказчик  поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства произвести ремонт и/или  модернизацию тягового подвижного состава в Плановом объеме, а также, в случае  необходимости, дополнительные работы.  

Согласно п. 7.1.12 договора закреплена обязанность подрядчика устранять  недостатки в результатах работ, допущенные по вине работников подрядчика, своими  силами и за свой счет, гарантировать качество выполненных работ и исполнять  гарантийные обязательства в соответствии с условиями договора.  

В ходе исполнения указанного договора АО «МЛРЗ «Милорем» допустил просрочку  выполнения гарантийного ремонта тепловоза серии 2М62У № 018 (тепловоз) в части  устранения дефектов ранее выполненного среднего ремонта (CP) данного тепловоза.  

09.07.2022г. на тепловозе были выявлены дефекты: неисправность гидромуфты,  посторонний гул подпятника вентилятора, компрессор КТ-7 выбрасывает масло,  турбокомпрессор ТК32-06 выбрасывает масло, расходует масло РЧО, не собирается  силовая  

схема 4 и 12 позиций. 

В соответствии с требованиями приложения № 28 к договору Заказчиком в адрес  Подрядчика направлено уведомление от 12.07.22 г. № ИСХ-985/МСК ТЧЭ-27 о вызове  представителей АО «МЛРЗ «Милорем» для проведения рекламационной работы.  

АО «МЛРЗ «Милорем» телеграфным уведомлением от 12.07.22 г. № 0117 ( № ИСХ1948/1810) согласовало участие своего представителя ФИО3 в расследовании  причин неисправности тепловоза и составлении акта-рекламации по данному случаю  (доверенность от 17.07.2022 г. № 279/1).  

17 июля 2022 г. представителями Заказчика и Подрядчика составлен акт-рекламация   № МСК/27/97.1, согласно пункту 15 которого АО «МЛРЗ «Милорем» признано виновным  за возникновение дефекта (без замечаний).  

Пунктом 17 акта-рекламации местом устранения дефектов определено СЛД Орел,  силами и за счет АО «МЛРЗ Милорем».  

Согласно пункту 18 приложения № 28 к договору устранение дефектов работ  подрядчиком или работниками сервисного локомотивного депо на территории сервисного  локомотивного депо производится в срок не более 8 (восьми) календарных дней со дня  оформления акта передачи локомотива ремонтному предприятию. В случае  необходимости поставки запасных частей для устранения дефекта ранее выполненного  ремонта на территорию заказчика, срок выполнения гарантийного ремонта продлевается  до 15 (пятнадцати) календарных дней.  

В рассматриваемом случае срок гарантийного ремонта составил 15 календарных  дней.  

Срок гарантийного ремонта по устранению дефектов тепловоза истек 26 июля 2022  г.  

20 октября 2022 г. выявленные дефекты тепловоза были устранены, о чем  составлены: акт приемки локомотива от ремонтного предприятия (сервисной компании)  по форме ТУ-31 № 31-1728-221020172457, а также акт осмотра и выполнения работ по  гарантийному ремонту тягового подвижного состава.  

Просрочка устранения дефекта тепловоза с 26.07.22 г. по 20.10.22 г. (включительно)  составила 86 календарных дней.  

Пунктом 12.4. договора предусмотрено, что в случае, если по вине  подрядчика нарушаются определенные согласно пункту 5.1 договора сроки выполнения  работ, а также сроки устранения дефектов, согласно пунктам 16 и 18 приложения № 28 к  договору, подрядчик уплачивает заказчику неустойку, размер которой рассчитывается по  приведенной в договоре формуле.  

Согласно условиям Договора, размер условных расходов указан без НДС. 

Пунктом 12.12 договора предусмотрено, что для целей расчета неустойки стороны  применяют цену (стоимость) в том размере, в котором такая цена (стоимость) оплачена  или подлежит оплате с учетом НДС (20%).  

Предъявленная сумма неустойки рассчитана по формуле. Формула определена  пунктом 12.4. договора.  

В формуле используют убытки ОАО «РЖД», возникшие в результате нахождения  локомотива в ремонте сверх оговоренного в договоре срока, и рост цен на отраслевом  рынке «производство машин и оборудования, транспортных средств», определяемый  Минэкономразвития РФ.  

Все значения формулы (убытки от необоснованной просрочки ремонта и рост цен)  также подтверждены документально и согласованы сторонами.  

Неустойка учитывает расходы истца на замещение ремонтируемого локомотива  другим локомотивом.  

Стороны в договоре специально оговорили сумму расходов (на замещение  ремонтируемого локомотива другим локомотивом), которые ОАО «РЖД» несет при  нахождении локомотива в ремонте.  

Сумма расходов обозначена в Приложении № 30 к договору и составляет за тепловоз  серии 2М62: 3 493 605,07 руб.  

Договоренность сторон о том, что сумма расходов на замещение ремонтируемого  локомотива другим локомотивом, будет учтена при определении неустойки, содержится в  п. 12.4. договора. В формуле расчета использовано значение «Z» - сумма расходов на  замещение локомотива.  

Неустойка учитывает индексы повышения цен в период с 2021 года (год заключения  договора) до 2022 года (год завершения ремонта).  

При определении размера неустойки также использованы показатели повышения цен  на рынке «производство машин и оборудования, транспортных средств», определяемые  Минэкономразвития РФ.  

Использование этих данных для целей расчета суммы неустойки согласовано  сторонами в п. 12.4. договора.  

В формуле расчета неустойки использовано значение «I актуализация» - показатель  повышения цен. Учитываются данные о повышении цен на протяжении двух лет - с 2021  года по год завершения ремонта.  

Таким образом, размер неустойки является полностью обоснованным, соответствует  степени нарушения обязательства, учитывает понесенные расходы истца, подтверждается  объективными данными о повышении цен. Формула расчета неустойки согласована  сторонами в договоре.  

АО «МЛРЗ «Милорем» было свободен при заключении договора (ст. 421 ГК РФ).  Являясь субъектом предпринимательской деятельности, заключив договор, добровольно  принял на себя обязательства и нес риск их неисполнения в соответствии с условиями  обязательства, в том числе в виде неустойки за ненадлежащее исполнение договорных  обязательств.  

Подписав договор, АО «МЛРЗ «Милорем» согласилось с тем, что размер неустойки  за ненадлежащее исполнение обязательства экономически обоснован и соответствует  последствиям ненадлежащего исполнения обязательства.  

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес АО «МЛРЗ  «Милорем» была направлена претензия от 21.11.2022 г. № ИСХ-24192/ЦТ об оплате  неустойки. Претензия оставлена без удовлетворения.  

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано  

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:  передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право  требовать от должника исполнения его обязанности.  

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и  односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Расчет суммы неустойки проверен судом, обоснован и подлежит удовлетворению в  заявленном размере.  

Как следует из п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку  по заявлению должника о таком уменьшении.  

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016  г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7)  даны разъяснения применения положений ст. 333 ГК РФ. Так, в п. 72 постановления N 7  указано, что заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть  сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом  апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам  производства в суде первой инстанции. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика (п. 73).  

Как следует из материалов дела, ответчик при рассмотрении дела в отзыве на  исковое заявление просил уменьшить заявленную истцом сумму неустойки на основании  ст. 333 ГК РФ.  

Наличие в материалах дела заявления ответчика об уменьшении неустойки истцом  не оспаривается.  

Ходатайство ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ суд считает  подлежащим удовлетворению в связи со следующим.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем  интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333  ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.  

Вместе с тем, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000 N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ  содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой  ответственности и оценкой ущерба.  

Таким образом, суд считает необходимым применить ст. 333 ГК РФ и снизить  размер неустойки до суммы 700 000 руб., учитывая конкретные обстоятельства дела и  принимая во внимание то, что заявленная неустойка явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательств.  

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на  ответчика. Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 г. № 6 при  уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной  пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая  подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.  

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 333, 702,  711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 4, 27, 65, 67-68,  71, 102, 110, 121, 123, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МИЧУРИНСКИЙ  ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД "МИЛОРЕМ" (адрес: 393761, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата регистрации 11.10.2010) в пользу ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (адрес: 107174,  РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ  БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 23.09.2003, ИНН: 

<

***>) сумму неустойки в размере 700 000 руб. и расходы  по оплате государственной пошлины в размере 23 303 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

 Судья Ю.В.Жбанкова