360/2022-127867(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-8548/2022

20 декабря 2022 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Индейкиной Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Егоровой О.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации муниципального  образования муниципального района «Корткеросский» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «РК-Строй» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>),  

об обязании устранить выявленные недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РК-Строй» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 20 календарных дней с момента вступления  

решения в законную силу устранить недостатки выполненных работ, выявленных в ходе  

эксплуатации многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми,  

<

...>, а именно: 

- восстановить натяжной потолок в коридоре возле помещения санузла квартиры №  

1; 

- отрегулировать двери в комнате возле помещения санузла квартиры № 1;  - постелить линолеум в помещениях квартиры № 2;  

- установить наличники в дверных проемах помещений квартиры № 2; - отрегулировать двери в помещениях квартиры № 2; 

- закрепить к стене дверную коробку в помещении спальни возле подсобного  

помещения квартиры № 3; 

- восстановить линолеум в помещении спальни возле подсобного помещения  

квартиры № 3; 

- устранить следы плесени на стенах в помещении санузла квартиры № 3;  - восстановить работоспособность вентиляции во всех квартирах;  

- выровнять все крыльца многоквартирного дома по горизонту и примыканию к  

дому в соответствии с проектной документацией; 

- восстановить металлическую обшивку по всему периметру здания  

многоквартирного дома. В остальной части в иске отказать. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  

решения в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РК-Строй» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации  6000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики  Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме. Кассационная жалоба на  решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Индейкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 9:24:04Кому выдана Индейкина Юлия Александровна