1000010_2258935  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-488/2019

г. Белгород

25 апреля 2019 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ю.Ю. Дробышева 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОПФР ПО  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО  "Строитель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании штрафа и пени в  сумме 112 716 руб. 02 коп. и понуждению к устранению недостатков  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 101 от 14.02.2019 г.; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования ОПФР ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с ООО "Строитель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ОПФР ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  111 767,42 руб. штрафа, 948,60 руб. пени по Государственному контракту от 06.06.2016 г.   № 94.  

Обязать ООО "Строитель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный  срок после вступления решения в законную силу, за счет собственных сил и средств  устранить выявленные недостатки по результатам работ по государственному контракту  от 06.06.2016 г. № 94 по капитальному ремонту административного здания Управления  Пенсионного фонда Российской Федерации в Ракитянском районе Белгородской области,  

расположенного по адресу Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул.  Пролетарская, дом 31, а именно:  

- произвести работы по устранению трещин и отслоение слоя шпатлевки по  цокольной части здания на заднем и двух боковых фасадах площадью 28,1 м2;  

- произвести работы по устранению трещин и отслоение слоя шпатлевки по  наружным стенам здания на главном, заднем и двух боковых фасадах площадью 99,58 м2;  

- произвести работы по устранению трещин и отслоение слоя шпатлевки по  межэтажному поясу, расположенному по всему периметру здания на фасаде между 1 и 2  этажами площадью 30,98 м2;  

- произвести работы по устранению трещин и отслоения слоя шпатлевки на  наружных оконных откосах 1 этажа, расположенных справа от главного входа и над  входом в подвал площадью 2,38 м2;  

- произвести работы по устранению трещин и отслоения слоя шпатлевки на стенах  входной группы и пандуса по всей площади площадью 28,1 м2;  

- произвести работы по устранению отслоения шпатлевки на левой стене  лестничной клетки при входе в подвал площадью 4 м2;  

- произвести работы по устранению трещин и отслоения слоя шпатлевки на стенах  коридора и узла ввода в подвале площадью 21м2;  

- произвести работы по устранению трещин и отслоения слоя шпатлевки на стенах  помещений архива в подвале площадью 18,36 м2;  

- произвести работы по устранению трещины в шпатлевке оконного откоса в  архиве на 1 этаже (помещение № 8) площадью 0,68 м2;  

- произвести работы по устранению трещины в шпатлевке на стенах в архиве на 1  этаже (помещение № 8) площадью 44,9 м2;  

- произвести работы по устранению отслоения шпатлевки по стенам в архиве на 1  этаже (помещение № 9) площадью 56,6 м2;  

- произвести работы по устранению трещины шпатлевки на оконном откосе в  кабинете № 12 на 1 этаже площадью 0,6 м2;  

- произвести работы по устранению трещины в шпатлевке оконных откосов в  помещении серверной на 2 этаже площадью 3,1 м2;  

- произвести работы по устранению отслоение шпатлевки по стенам в помещении  серверной на 2 этаже площадью 61,3  

Взыскать с ООО "Строитель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 10 381 руб. госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Белгородской области в установленном законом порядке.  

Судья Ю.Ю. Дробышев