АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-25198/2018

г. Ставрополь

16 апреля 2021 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Минеева А.С., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по иску министерства имущественных отношений  Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс», Ставропольский  край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по передаче квартир по  государственному контракту от 21.11.2014 № 0121200001914000095-0150067-02 за период с  27.01.2018 по 31.10.2018 в размере 46 926 рублей 39 копеек,  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс»  Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>,  

к министерству имущественных отношений Ставропольского края г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>,  

о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по государственному контракту от  21.11.2014 № 0121200001914000095-0150067-02 в размере 62 518 рублей 50 копеек.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

исковые требования министерства имущественных отношений Ставропольского края,  г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс»,  Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, в пользу министерства  имущественных отношений Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>,  неустойку за неисполнение обязательств по передаче квартир по государственному  контракту от 21.11.2014 № 0121200001914000095-0150067-02 за период с 27.01.2018 по  03.05.2018 в размере 4 912 (Четыре тысячи девятьсот двенадцать) рублей 08 копеек.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  

«Жилсервис плюс», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 1082650004095,  удовлетворить.  

Взыскать с министерства имущественных отношений Ставропольского края,  г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Жилсервис плюс», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, штраф за  неисполнение обязательств по государственному контракту от 21.11.2014   № 0121200001914000095-0150067-02 в размере 62 518 (Шестьдесят две тысячи пятьсот  восемнадцать) рублей 50 копеек.  

В результате зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с  министерства имущественных отношений Ставропольского края, г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис  плюс», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, штраф за неисполнение  обязательств по государственному контракту от 21.11.2014 № 0121200001914000095- 0150067-02 в размере 57 606 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей 42 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс»,  Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, в доход бюджета Российской  Федерации государственную пошлину в размере 209 (Двести девять) рублей 35 копеек.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо- Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.С. Минеев