Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-31685/17

10 ноября 2017 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 07 ноября 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2017 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Кудрявцевой Е.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрел в судебном заседании  дело по иску ООО "СоноРэй Медикал Груп" к ГКУ МО "ДЕЗ" о взыскании по государственному контракту от 16.11.2015 № 0148200005415000695 3 022 102,06 руб. основного долга, 129 648,18 руб. пеней, 604 420,41 руб. штрафа,

по встречному иску ГКУ МО "ДЕЗ" к ООО "СоноРэй Медикал Груп"  о взыскании 8 295 670,14 руб. неустойки,

при участии в судебном заседании - согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СоноРэй Медикал Груп" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ГКУ МО "ДЕЗ" о взыскании по контракту от 16.11.2015 № 0148200005415000695 3 022 102,06 руб. основного долга, 129 648,18 руб. пеней и 604 420,41 руб. штрафа.

ГКУ МО "ДЕЗ" заявлен встречный иск к ООО "СоноРэй Медикал Груп"  о взыскании 8 295 670,14 руб. неустойки.

В судебном заседании представители ООО "СоноРэй Медикал Груп"  исковые требования поддержали, против удовлетворения встречного иска к ГКУ МО "ДЕЗ"  возражали.

В судебном заседании представитель к ГКУ МО "ДЕЗ" исковые требования поддержала, против удовлетворения исковых требований ООО "СоноРэй Медикал Груп"   возражала.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав доводы представителей ООО "СоноРэй Медикал Груп" и ГКУ МО "ДЕЗ", суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, между ООО "СоноРэй Медикал Груп" (поставщик) и ГКУ МО "ДЕЗ" (заказчик) заключен государственный контракт 16.11.2015 № 0148200005415000695, в соответствии с которым поставщик обязуется передать заказчику рабочее место отоларинголога в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров, являющейся неотъемлемой частью Контракта, в сроки, установленные в Графике поставки, являющемся неотъемлемой частью Контракта, по адресам указанным в приложении № 6 к Контракту.

Цена контракта составляет 30 221 020, 61 руб.

Пунктом 3.3 контракта предусмотрено, что в рамках исполнения Контракта поставка товара и ввод его в эксплуатацию осуществляется с момента заключения Контракта до 01.12.2015.

ГКУ МО "ДЕЗ" указывает, что в нарушение ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства по поставке товара и вводу его в эксплуатацию ООО "СоноРэй Медикал Груп" исполнило в полном объеме 01.08.2016, что подтверждается Актом о полном исполнении государственного контракта, в связи с чем, истец обратился к ответчику с требованием об оплате неустойки на основании пункта 7.3 контракта. 

В соответствии с пунктом 7.3 контракта в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Согласно расчету ГКУ МО "ДЕЗ" размер неустойки подлежащий взысканию с ООО "СоноРэй Медикал Груп" составляет 8 295 670,14 руб.

Возражая относительно исковых требований ГКУ МО "ДЕЗ", ООО "СоноРэй Медикал Груп" ссылается на многочисленные нарушение заказчиком обязательств по контракту, которые привели к тому, что ООО "СоноРэй Медикал Груп" по причинам, которые от него не зависели, не имело возможности своевременно приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ МО "Дмитровская городская больница" и ГБУЗ МО "Чеховская центральная районная поликлиника", в установленный контрактом срок, а также провести инструктаж сотрудников ГБУЗ МО "Орехово - Зуевская центральная городская больница".

В соответствии с пунктом 1.7.3.2 Технического задания (Приложение № 3 к государственному контракту) на часть (единицу) товара, для которого требуется осуществление сборки, установки, монтажа, наладки, испытаний и иных действий для организации его нормального функционирования Поставщик при координации Заказчика, в срок десять рабочих дней с даты заключения Контракта предоставляет Заказчику письменные предложения к размещению, хранению товара и вводу его в эксплуатацию, в том числе указывает перечень подготовительных работ, необходимых для выполнения со стороны Заказчика.

Согласно статье 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Поставка оборудования ООО "СоноРэй Медикал Груп" в установленный контрактом срок подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными и актами приема - передачи товара.

Вместе с тем, в материалы дела представлено письмо ООО "СоноРэй Медикал Груп"  в адрес ГКУ МО "ДЕЗ" с просьбой донести до получателей Требований к помещениям для монтажа ЛОР установки, а также сообщить о готовности помещений (т. 1 л.д. 99), а также письмо ООО "СоноРэй Медикал Груп"  в адрес ГКУ МО "ДЕЗ" о неготовности помещений в ГБУЗ МО "Дмитровская городская больница" и ГБУЗ МО "Чеховская центральная районная поликлиника", что не позволяет провести работы по монтажу, сборке, приемо - сдаточных испытаний и инструктажа персонала (приобщено к материалам дела в ходе судебного заседания).

Не своевременное исполнение обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, подтверждается письмом ГБУЗ МО "Дмитровская городская больница" (т. 1 л.д. 105), актом сервисного обслуживания от 30.11.2015 о неготовности помещения к монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ МО "Чеховская центральная районная поликлиника" (т. 3 л.д. 98).

Неготовность помещения к монтажу оборудования в ГБУЗ МО "Дмитровская городская больница" подтверждается актом от 22.07.2016, подписанный поставщиком и получателем.

Из акта ввода в эксплуатацию медицинского оборудования от 08.12.2015 следует, что пусконаладочные работы проведены в ГБУЗ МО "Орехово - Зуевская центральная городская больница" проведены в срок, установленный контрактом (27.11.2015).

В ходе судебного разбирательства, возражая против иска ГКУ МО "ДЕЗ", представители ООО "СоноРэй Медикал Груп" указали, что акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования ГБУЗ МО "Орехово - Зуевская центральная городская больница" был подписан только 08.12.2015 в связи с тем, что получателем не были предприняты надлежащие меры для проведения Поставщиком инструктажа сотрудников 27.11.2015, при том, что специалист ООО "СоноРэй Медикал Груп" находился в ГБУЗ МО "Орехово - Зуевская центральная городская больница" в указанную дату. Провести инструктаж для сотрудников больницы ООО "СоноРэй Медикал Груп" реально имело возможность только 08.12.2015.  

Согласно статье 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Статьи 401, 404 ГК РФ устанавливают освобождение или снижение размера ответственности должника в виду наличия вины кредитора в ненадлежащем исполнении обязательств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. 

Судом установлено наличие обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении ГКУ МО "ДЕЗ" своих обязательств (неготовность помещения к монтажу и вводу в эксплуатацию, обеспечение наличия сотрудников для проведения инструктажа), вследствие которых ответчик не имел возможности выполнить условия контракта в установленные сроки.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств бесспорно свидетельствующих о нарушении ООО "СоноРэй Медикал Груп" обязательств по государственному контракту  ГКУ МО "ДЕЗ" в материалы дела не  представлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что правовых и фактических оснований для удовлетворения требования ГКУ МО "ДЕЗ" не имеется.

В отношении требования ООО "СоноРэй Медикал Груп" к ГКУ МО "ДЕЗ" о взыскании по контракту от 16.11.2015 № 0148200005415000695 3 022 102,06 руб. основного долга, 129 648,18 руб. пеней и 604 420,41 руб. штрафа судом установлено следующее.

Во исполнение принятых на себя обязательств по контракту ООО "СоноРэй Медикал Груп" в установленный контрактом срок поставило  ГКУ МО "ДЕЗ" оборудование, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными и актами приема - передачи товара. 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. При этом односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 310 ГК РФ). 

Ответчик принятые обязательства по оплате исполнил частично, задолженность составляет 3 022 102,06 руб.

Доказательств оплаты спорной суммы основного долга ГКУ МО "ДЕЗ" в материалы дела не представлено.

За просрочку оплаты ООО "СоноРэй Медикал Груп" обоснованно начислена неустойка, а за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту обоснованно начислен штраф  в соответствии с п. 7.2 контракта.

Расчет пеней, штрафа судом проверен, ответчиком не оспорен.

С учетом изложенного исковые требования ООО "СоноРэй Медикал Груп" подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования ООО "СоноРэй Медикал Груп" удовлетворить.

Взыскать с ГКУ МО "ДЕЗ" в пользу ООО "СоноРэй Медикал Груп" по государственному контракту от 16.11.2015 № 0148200005415000695 3 022 102,06 руб. основного долга, 129 648,18 руб. пеней, 604 420,41 руб. штрафа и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 41 781 руб.

В удовлетворении встречного иска ГКУ МО "ДЕЗ" отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья                                                         Е.И. Кудрявцева