АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-155834/23-67-1293

г. Москва

09 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 28 сентября 2023 года Полный текст решения изготовлен 09 октября 2023 года 

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (191028,  РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, СОЛЯНОЙ ПЕР., Д. 9, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 57-Н, 58-Н, 59-Н,  60-Н, 61-Н, 62-Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН:  

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРСМ  СИБИРИ" (660074, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК Г, ФИО2, ЗД.  14, СТР. 2, ОФИС 606, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.11.2012,  ИНН: 

<

***>) о взыскании 102 275 262,28 руб.,  

при участии: от истца: ФИО3, дов. от 16.11.2022г. от ответчика: неявка, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (далее – истец)  обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРСМ СИБИРИ" (далее – ответчик) о  взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ неустойки по  договору от 13.07.2021 № 1920187379552554164000000/2021/1662/432 за период с  01.05.2022 по 01.03.2023 в размере 78 574 193 руб. 94 коп.  

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился,  отзыв не представил.  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании  следующего.  

Как усматривается из материалов дела, между Федеральным государственным  унитарным предприятием «Главное управление специального строительства» (далее -  Генподрядчик, ФГУП «ГУСС») и Обществом с ограниченной ответственностью  «ЕРСМ СИБИРИ» (далее - Подрядчик, ООО «ЕРСМ СИБИРИ») заключен договор от  13.07.2021 № 1920187379552554164000000/2021/1662/432 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «реконструкция биологических очистных сооружений  производительностью 1400 мЗ/сут» войсковая часть 52015 г. Комсомольск-на-Амуре,  Хабаровский край (шифр объекта 015-3), (далее - Договор).  

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором  строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Пунктом 2.1 Договора установлено, что Генподрядчик осуществляет  финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а  Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями  Договора, в том числе Технического задания (Приложение № 1 к настоящему  Договору), и работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в  соответствии с условиями Договора (далее-Работы).  

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение  его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ,  другими законами или иными правовыми актами.  

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,  подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для  государственных нужд) положения, предусмотренные для договора подряда,  применяются, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.  

В соответствие с ч. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат  и оплатить обусловленную цену.  

На основании ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Цена Договора составляет Цена Договора составляет 309 219 224 (триста девять  миллионов двести девятнадцать тысячи двести двадцать четыре) рубля 00 копеек.  

В соответствии с приложением № 2 к Договору Цена Договора состоит: 

СМР - 257 620 308 рублей; оборудование - 147 313 952 рубля; прочие - 4 284 964  рубля  

Согласно пункту 5.2 Договора, Подрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы в срок до 30 апреля 2022 года, подписание Итогового акта приемки  выполненных работ в срок до 13 мая 2022 года.  

В нарушение данных требований, работы Ответчиком не выполнены, Итоговый  акт приемки выполненных работ не подписан.  

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны  по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими  законами или договором.  

Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими  законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от  договора (исполнения договора) (ст. 310 ГК РФ) может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора).  

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не  предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или  договором. Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное  уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ,  если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими  законами, иными правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая  или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон (абзац 2 пункта 13  Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54  «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»).  

Согласно пункту 2 названной нормы в случае одностороннего отказа от  договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ  допускается, договор считается расторгнутым или измененным.  

Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает специальной  формы, в которой должен быть выражен отказ от исполнения договора и не  устанавливает какого-либо предварительного порядка извещения другой стороны о  намерении прекратить договор, а определяет лишь условия возникновения такого  права.  

Следовательно, волеизъявление на отказ от договора может содержаться в  письменном документе, направленном подрядчику, а также может быть выражено в  любых фактических действиях (заключение договора с другим подрядчиком на  выполнение тех же работ, составление претензии, подача иска в суд и т.п.).  

Статьями 715, 717 ГК РФ презюмируется право заказчика в любое время до  сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику  часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения  извещения об отказе заказчика от исполнения договора.  

Согласно ст. 708 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии с ч. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает  своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько  медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе  отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Пунктом 19.2, п. 19.5.1 Договора установлено, что Генподрядчик вправе в  одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения  Подрядчиком сроков выполнения Работ, включая промежуточные этапы Работ, более  чем на 14 (четырнадцать) календарных дней. При этом Стороны согласились с тем, что  отставание от сроков производства работ на 14 календарных дней является  

существенным и свидетельствует о том, что работы по Договору не будут выполнены  Подрядчиком надлежащим образом.  

В связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору  Генподрядчиком в адрес Подрядчика было направлено уведомление-претензия об  одностороннем отказе от исполнения Договора и возврате неотработанного аванса (от  16.02.2023 ИСХ-ДСУ-37дсп), согласно которой Договор расторгнут с 01.03.2023.  

Несмотря на расторжение Договора с 01.03.2023 ООО «ЕРСМ Сибири»  требования, указанные в уведомлении-претензии, не исполнены, задолженность не  погашена, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим  иском.  

На основании п. 17.3 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком  своих обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе потребовать  уплату неустойки (штраф) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от  стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до  даты фактического завершения выполнения Работ.  

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также  период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по  существу ответчиком.  

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика неустойки по  договору от 13.07.2021 № 1920187379552554164000000/2021/1662/432 за период с  01.05.2022 по 01.03.2023 в размере 78 574 193 руб. 94 коп. подлежат удовлетворению в  полном объеме.  

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на  исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле  доказательствам.  

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРСМ  СИБИРИ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 

<

***>) неустойку по договору от 13.07.2021  

 № 1920187379552554164000000/2021/1662/432 за период с 01.05.2022 по 01.03.2023 в  размере 78 574 193 (семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто  девяносто три) руб. 94 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000  (двести тысяч) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев