АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Октябрьский проспект, д. 14, 600025, г. Владимир; http: // vladimir.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ  резолютивная часть 

 г. Владимир Дело № А11-5901/2019  "20" января 2020 года  

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Митропан  И.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Шестериковой Ю.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  иску  

общества с ограниченной ответственностью "ВладЗастройщик", 

<

...>, этаж 1, офис 1, пом. 7; ОГРН  (

<

***>), ИНН (

<

***>),  

к администрации города Владимира, 

<

...>; ОГРН (

<

***>), ИНН (

<

***>),  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора: ФИО1 (

<

...>), ФИО2 (

<

...>), ФИО3 (г. Владимир,  

ул. Фейгина, д. 26, кв. 1), ФИО4 (г. Владимир,  

ул. Фейгина, д. 28, кв. 4), ФИО5 (

<

...>),  

 о внесении изменений в договор от 17.12.2015 № 01-10/202 путем  заключения дополнительного соглашения к договору.  

Руководствуясь статьями 17, 104, 110, 167-171, 176, 318, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1.  Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "ВладЗастройщик" удовлетворить.  

2. Обязать администрацию города Владимира внести изменения в  договор от 17.12.2015 № 01-10/202 «О развитии застроенной территории  квартала, ограниченного улицами Фейгина, Северной, Крупской, 1-ой  Пионерской в городе Владимире» путем заключения дополнительного  

соглашения к договору, в котором пункты 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 4.1 изложить в  следующей редакции:  

«3.1.3. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную  собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления  гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по  договорам социального найма, договорам найма специализированного  жилого помещения и расположенных на застроенной территории.  

Срок исполнения не позднее 96 (девяносто шести) месяцев с момента  утверждения проекта планировки застроенной территории.  

Созданные (приобретенные) и передаваемые жилые помещения  для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений,  предоставленных по договорам социального найма, договорам найма  специализированного жилого помещения и расположенных на  застроенной территории, должны отвечать требованиям, установленным  Жилищным законодательством Российской Федерации.  

3.1.6. Осуществить строительство на застроенной территории в  соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной  территории в срок не позднее 110 (ста десяти) месяцев со дня утверждения  проекта планировки застроенной территории.  

3.1.7 Осуществить при необходимости в установленном порядке  строительство, и (или) реконструкцию объектов инженерной  

инфраструктуры, объектов коммунально-бытового назначения,  предназначенных для обеспечения застроенной территории, в срок позднее  110 (ста десяти) месяцев со дня утверждения проекта планировки  застроенной территорий.  

4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами при условии соблюдения Сторонами порядка обеспечения  исполнения обязательств по Договору, установленного разделом  

7 Договора, и действует в течение 10 (десяти) лет с момента вступления  его в силу.».  

Исполнительный лист выдается в порядке, предусмотренном статьей  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

3. Взыскать с администрации города Владимира за счет казны  муниципального образования город Владимир в пользу общества с  ограниченной ответственностью "ВладЗастройщик" расходы по уплате  государственной пошлине в сумме 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается в порядке, предусмотренном статьей  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской  области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий  

двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного  акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья И.Ю. Митропан