126/2018-59292(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-3708/2018

г. Хабаровск

08 мая 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Никитиной О.П.  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску по иску муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства города  Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 681000, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Импульс»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680007,  

<

...>, оф. 203Б) об обязании  устранить недостатки работ по муниципальному контракту № 1 от 25.01.2016  г.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Импульс» в  течение 30 (тридцать) календарных дней со дня вступления в законную силу  решения суда безвозмездно устранить недостатки строительно-монтажных  работ по муниципальном контракту № 1 от 25.01.2016г. на выполнение работ  строительству объекта «Жилой дом № 54 по ул. Пионерской в микрорайоне  

 № 16 в г. Комсомольске-на-Амуре» с соблюдением требований проектной  документации (шифр 06/10/14п), действующих строительных норм и правил  ГОСТ 6810-2002, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87, МДС 12-30.2006, ГОСТ  52749-2007 а именно: в доме 54 по ул. Пионерской в г. Комсомольске-на- Амуре:  

в квартире № 9: 

-во всех помещениях квартиры в местах примыкания стен и потолка  произвести работы по частичной замене штукатурного и окрасочного слоя,  включая предварительные работы по обработке стен противогрибковым  составом, произвести замену и оклейку обоев;  

-в кухне, в комнатах ( № 1, № 2, № 3) устранить продувание и утеплить  оконный проем, в том числе произвести работы по демонтажу откосов и  подоконника, работы по заделке щелей, работы по заполнению монтажных  швов пенным утеплителем, с последующим проведением работ по  восстановлению откосов, а также отрегулировать запорную арматуру  оконных блоков и балконной двери.  

в квартире № 14: 

- кухня, комнаты (зал, спальня) - устранить причину продувания и  утеплить в том числе произвести работы по демонтажу откосов и  подоконника, работы по заделке щелей, работы по заполнению монтажных  швов пенным утеплителем, с последующим проведением работ по  восстановлению откосов), а также отрегулировать запорную арматуру  оконного блока, заменить резиновый уплотнитель;  

-в жилых комнатах в местах примыкания стен и потолка произвести  отделочные работы, включая предварительные работы по обработке стен и  потолка противогрибковым составом, покраску, переклейку обоев;  

-в кухне в местах проседание стяжки пола на участках, где проложен  трубопровод центрального отопления, произвести работы по демонтажу  напольного покрытия, доливке цементной стяжки, с последующим  проведением работ по восстановлению напольного покрытия,  

-в санузеле в углу в месте примыкания стен произвести отделочные  работы включая предварительные работы по обработке стен  противогрибковым составом, покраску;  

в квартире № 16: 

- в помещении кухни в местах примыкания стен и потолка в районе  вентиляционного канала произвести работы по частичной замене  штукатурного и окрасочного слоя, включая предварительные работы по  обработке стен противогрибковым составом;  

-в помещении комнаты с правой стороны от входа произвести работы по  частичной замене штукатурного и окрасочного слоя, включая  предварительные работы по обработке стен противогрибковым составом;  

-во всех помещениях квартиры в местах примыкания стен и потолка  произвести работы по частичной замене штукатурного и окрасочного слоя,  включая предварительные по обработке стен противогрибковым составом,  произвести замену и оклейку обоев;  

- в кухне, в комнате № 1 с левой стороны от входа – устранить причину  продувания и утеплить оконный проем, в том числе произвести работы по  демонтажу откосов оконного и балконного блока, подоконника, балконного  порога, работы по заделке щелей, работы по заполнению монтажных швов  пенным утеплителем, с последующим проведение работ по восстановлению  откосов), а также отрегулировать запорную арматуру оконных блоков и  балконной двери;  

в квартире № 18: 

- торцевая комната (слева) - отрегулировать запорную арматуру оконных  блоков и балконной двери, заменить резиновый уплотнитель; произвести  просушку стен комнаты, затем произвести отделочные работы, включая  предварительные по обработке стен и потолка противогрибковым составом,  покраску, переклейку обоев;  

- кладовая – произвести работы по частичной замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные по обработке стен  противогрибковым составом;  

- торцевая комната (справа) - отрегулировать запорную арматуру  оконного блока, заменить резиновый уплотнитель; на стене над окном в  месте примыкания стен и потолка (вдоль всей стены), на стенах справа и  слева от окна, в месте примыкания стен и потолка по периметру всей  комнаты произвести отделочные работы, включая предварительные работы  по обработке стен и потолка противогрибковым составом, покраску,  переклейку обоев;  

-комната (справа по коридору) - отрегулировать запорную арматуру  оконного блока, заменить резиновый уплотнитель; на стене над окном в  месте примыкания стен и потолка, на стене под окном произвести  отделочные работы, включая предварительные работы по обработке стен и  потолка противогрибковым составом, покраску, переклейку обоев.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Импульс» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Никитина О.П.