Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-41370/19

11 июля 2019 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 июля 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2019 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Ж.П. Борсова ,

при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Василенко А.Д.,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО "ДЕКАРТ СК"

к Муниципальному бюджетному учреждению "ЖКХ и благоустройство" Дмитровского городского округа Московской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта, о взыскании, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу с/з. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДЕКАРТ СК" обратилось в арбитражный суд с иском к МБУ "ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" Дмитровского городского округа Московской области: 

- о признании недействительным одностороннего отказа от 11.04.2018 года от исполнения муниципального контракта №0848300037418000029-0947598-02 от 07.03.2018 г.,

- о применении последствия недействительности в виде возврата банковской гарантии;

- о взыскании задолженности за фактически оказанные услуг в размере 445 824,11 руб.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

На основании Протокола № 0848300037418000029-02 от 09.02.2018 г., опубликованного на сайте www.zakupki.gov.ru, между ООО «Декарт СК» (Исполнитель) и МКУ «ЖКХ и благоустройство» (Заказчик) был заключен муниципальный контракт № 0848300037418000029-0947598-02 от 07.03.2018 г. на оказание услуг по уборке придомовых (дворовых) территорий жилого фонда городского поселения Дмитров, а также услуг по содержанию и ремонту объектов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, находящихся на данных территориях, по итогам электронного аукциона № 0848300037418000029, проводимого и опубликованного на сайте www.zakupki.gov.ru. Цена контракта - 1 042 838, 33 руб. (один миллион сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь   рублей 33 коп.)

Исковые требования мотивированы тем, что с начала действия Договора Исполнитель направлял Заказчику письма (исх.№2 от 07.03.2018 г., исх. №3 от 12.03.2018 г., исх.2 от 14.03.2018 г.) с приложением актов осмотра территорий посредством Почты России и электронной почты с указанием на то, что территория, подлежащая обслуживанию Исполнителем, находится в ненадлежащем состоянии, пользуясь своим правом, предоставленном ему пунктами 5.3.4. и 5.3.5. Договора. 

Однако, Заказчик данные обращения проигнорировал. 

В актах, приложенных к вышеуказанным письмам, комиссия Исполнителя указывала на то, что количество снега, находящегося на территории существенно превышает количество «свежевыпавшего», который Исполнитель и должен был убирать по условиям контракта (пункт 3.1.1. Технического задания к контракту), а также, что уборка количества снега, находящегося в данный момент на территории невозможна ручным способом, для этого необходимо использовать механизированную уборку, которая не входит в состав услуг по заключенному договору, а также существенно превышает цену договора, которая была рассчитана именно на основании необходимости уборки территорий ручным способом.

Уведомлением от 06.04.2018 г. Исполнитель сообщил Заказчику о начале выполнения работ в соответствии с условиями договора с 07.04.2018 г. 

Начиная с 07.04.2018 г. Исполнитель оказывал услуги, предусмотренные контрактом, направляя Заказчику Акты выполненных услуг от 30.04.18г. за апрель, акт от 31.05.2018г. за май, акт от 30.06.2018 г. за июнь, акт от 24.07.2018 г. за июль.

Как указывает истец, по факту получения актов оказанных услуг Заказчик не воспользовался правами, предусмотренными пунктами 4.2-4.4. Контракта, не выразил претензий к Исполнителю по количеству и качеству оказываемых услуг, но при этом не подписал Акты и не оплатил Исполнителю фактически оказанные услуги.

24.07.2018 г. Исполнителю стало известно от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), что была осуществлена выплата по банковской гарантии в адрес МКУ «ЖКХ и благоустройство», в связи с тем, что Исполнитель не приступил к выполнению своих услуг по контракту и Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт. Дата расторжения - 07.05.2018 г. 

30.07.2018 г. ООО «Декарт СК» оплатил в адрес АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) сумму банковской гарантии в размере 52 668,60 руб.

Как указывает истец, впоследствии им был получен вызов от УФАС по Московской области на заседание комиссий по делам №РНП-12888/18, на которых не смог присутствовать и представить доказательства отсутствия вины в своих действиях, в связи с чем был включен в реестр недобросовестных поставщиков Решением комиссии УФАС по Московской области от 24.08.2018 г.

В соответствии с уведомлением об одностороннем расторжении контракта от 11.04.2018 г., Заказчик расторг контракт на основании пункта 8.2.3 Контракта, указав при этом в самом уведомлении, что контракт будет считаться расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения данного уведомления, в случае если не будут устранены все нарушения.

16.04.2018 г. Заказчик получил от Исполнителя уведомление о начале выполнения работ по контракту с 07.04.2018 г. Заказчик, в свою очередь, поскольку договор на момент получения уведомления являлся действующим, обязан был воспользоваться пунктом 8.6. Договора и отменить свой односторонний отказ. 

Как полагает истец, односторонний отказ от исполнения Договора со стороны МКУ «ЖКХ и благоустройство» нарушил права ООО «Декарт СК» и имеет все признаки недействительной сделки. У Заказчика не имелось оснований для не оплаты фактически оказанных услуг, тем не менее Заказчик Исполнителю не оплатил оказанные услуги. 

Задолженность за фактически оказанные услуги составляет 383 373,88 руб. за период с мая по июль 2018 года.

Претензия о взыскании денежных средств в размере 445 824,11 руб. (четыреста сорок пять тысяч восемьсот двадцать четыре руб. 11 коп.) была направлена в адрес Ответчика 19.11.2018 г. и получена 27.11.2018 г., однако оставлена без удовлетворения. 

Рассматривая требования истца по существу, суд исходит из следующего.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

Согласно пункту 8 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

На основании части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (часть 14 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Как установлено судом, МКУ "ЖКХ и благоустройство" с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона, заключило муниципальный контракт с ООО "Декарт СК" №0848300037418000029-0947598-02 от 07.03.2018г., на оказание услуг по уборке придомовых (дворовых) территорий жилого фонда городского поселения Дмитров, а также услуг по содержанию и ремонту объектов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, находящихся на данных территориях.

Согласно п. 3.1. Контракта Исполнитель оказывает услуги на территории указанной в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

Срок оказания услуг: с даты подписания Контракта по 31 декабря 2018 г. включительно (п. 3.2).

На основании пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу статьи 783 Гражданского кодекса РФ к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде, если это не противоречит статьям 779 - 782 названного кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно п. 5.1. Контракта Заказчик вправе:

- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (подп.5.1.1),

- запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг (подп .5.1.2.),

- осуществлять контроль над ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения Исполнителем согласно графику проверок хода выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), составлять промежуточные акты проверок (приложение № 4 к Контракту), с указанием объемов невыполненных работ. При наличии возможности устранения выявленных недостатков, определять сроки их устранения (подп. 5.1.3).

Заказчик обязан сообщать   в   письменной   форме   Исполнителю   о   недостатках,   обнаруженных   в ходе оказания услуг, в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков. Уведомление о выявлении недостатков направляется посредством электронной почты и иными доступными способами с указанием даты составления Уведомления и исходящим номером ( подп. 5.2.1).

Подпунктом 5.1.7. Контракта предусмотрено право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.

Согласно п. 8.1. настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

Пунктом 8.2. определены случаи одностороннего отказа от исполнения Контракта:

- Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми (8.2.1.);

- Исполнитель неоднократно нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Контрактом (8.2.2.);

- Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает Календарный план (График оказания услуг), предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Исполнителем условий Контракта стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок (8.2.3.).

В соответствии с п. 8.4. Контракта  решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителю, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о  вручении  Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта (п. 8.5).  

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Исполнителем выполнены следующие действия:

-   устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения;

-  Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций (п.8.6.).

23.03.2018г., в адрес ООО "Декарт СК" была направлена (Заказным письмом с уведомлением) претензия со штрафными санкциями за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (п. 7.4. Контракта) (Исх. №745 от 23.03.2018г.). Письмо вернулось в адрес ответчика с отметкой "Отсутствие адресата по указанному адресу".

Согласно п. 5.4.6. Контракта Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.

Доказательства принятия мер по извещению Заказчика об изменении адреса истцом в материалы дела не представлены. 

11.04.2018г. вынесено Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

На основании пунктов 8.2.3, 8.4, 8.5 Контракта, а также ч. 9, ч.12 ст. 95 ФЗ-44 и п. 2 ст. 715 ГК РФ, 07.05.2018г., муниципальный контракт №0848300037418000029-0947598-02 от 07.03.2018г., был расторгнут. Основание расторжения контракта: Исполнитель не приступил к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом.

На основании ч.12 ст. 95 ФЗ-44 , в УФАС по Московской области была направлена Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут, включаемая в реестр недобросовестных поставщиков. В результате чего решением УФАС по Московской области ООО "Декарт СК" включен в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО "Декарт СК" обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об обжаловании решения УФАС по Московской области по делу №РНП-12888/18 от 24.08.2018г. Арбитражный суд города Москвы вынес решение о полном отказе в удовлетворении заявления ООО "Декарт СК".

ООО "Декарт СК" к исполнению своих обязательств в установленные контрактом сроки не приступило, что подтверждается отправкой уведомлений с приложением фотоматериалов.

Согласно подп. 5.4.1. Контракта Исполнитель обязан предоставить план-график выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Однако, в материалы дела не представлены доказательства предоставления Заказчику  план-график выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

Также Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные настоящим Контрактом (подп. 5.4.2.).

Как указывает ООО "Декарт СК" в исковом заявлении, с 07.04.2018г. приступил к выполнению работ в соответствии с условиями контракта, прикладывая уведомление от 06.04.2018г. и распечатку с официального сайта Почты России о том, что письмо  получено. 

Однако, из приложенных к отзыву на исковое заявление документов следует, что направленное в адрес ответчика заказным письмом (РПО № 14102122011698) почтовое отправление (вх.319 от 10.04.2018г.) содержало 3 письма (по 3-м заключенным контрактам) совсем другого содержания и которые не подписаны генеральным директором ООО "Декарт СК". 

В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 и 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ). При этом следует иметь в виду, что исчерпывающий перечень действий, совершение которых либо воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, статьей 307 ГК РФ не установлен.

По смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться, в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

Доводы истца о наличии просрочки кредитора в связи с тем, что территория, подлежащая обслуживанию Исполнителем находилась в ненадлежащем состоянии, что препятствовало началу выполнения работ, подлежат отклонению.

Согласно пункту 3 статьи 405 Кодекса должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (пункт 1 статьи 406 Кодекса).

Исходя из положений статей 328, 405, 406 и 719 ГК РФ, если заказчик не исполняет свои обязанности по предоставлению имущества, необходимого для выполнения подрядчиком работ (документации, строительной площадки), то подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их; подрядчик не считается просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ; заказчик не вправе требовать уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ; подрядчик вправе отказаться от исполнения договора.

Вместе с тем, для применения вышеизложенного подрядчику необходимо представить доказательства того, что он не приступал к работе по вине заказчика и начатые работы были им приостановлены. В противном случае неисполнение заказчиком указанных обязанностей не признается обстоятельством, препятствующим выполнению работ.

Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт виновных действий (бездействия) заказчика и направления ответчику уведомления о приостановлении исполнения договора либо иных действий, предусмотренных ст. 719 ГК РФ.

В пп. 14 и 15 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 г., разъяснено, что, если в государственном (муниципальном) контракте содержится общее указание на право стороны на односторонний отказ, отсутствие в контракте упоминания о каком-либо конкретном существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, учитывая положения ГК РФ и условия контракта, суд считает законными действия заказчика по одностороннему отказу от исполнения контракта.

Установленный заказчиком факт отсутствия деятельности со стороны подрядчика во исполнение заключенного контракта на протяжении  длительного времени со дня заключения контракта и с учетом установленного срока выполнения работ позволяет заказчику прийти к правомерному выводу о том, что существует угроза невыполнения работ к установленному сроку, в связи с чем у последнего возникает право на односторонний отказ от контракта в соответствии со ст. 715 ГК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что отсутствуют основания для признания одностороннего отказа от контракта недействительным и применения последствий его недействительности. 

Рассматривая требование истца о взыскании стоимости фактически выполненных работ, суд исходит из следующего. 

В соответствии с частью 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом названной статьи, суд установил, что акты выполненных работ истец направил ответчику после расторжения контракта; обстоятельств того, что работы выполнены до расторжения контракта, суд не установил.

Работы, выполненные после расторжения контракта, не подлежат приемке и оплате. При этом суд учитывает, что материалами дела не доказано фактическое использование ответчиком результата работ.

Следовательно, данное требование также не подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Московской области.

 

Судья                                                                                                            Ж.П. Борсова